국가산업단지 조성사업

<市 담당부서 : 투자개발과 기업조성팀장 이호성, ☎ 2593>

□ 사업개요

위 치	동두천시 상패동 동두천교차로 일원
사업기간	2018. ∼ 2022.
사업규모	산업단지 조성 289,887㎡(총 990,000㎡중 1단계 사업)
입주대상	섬유·의복, 화학, 전자부품, 컴퓨터, 통신장비 제조 등
사 업 비 (억원)	전체	LH	국비	지방비
	1,100	742	25,800	100
	조성원가 : 1,030천원/평
추진현황	조사설계용역 착수(2017. 11.)

□ 추진경과

❍ 2015.  6. 30. : 동두천 국가산업단지 추진 확정(10만평 우선 조성)

❍ 2017.  9.  1. : 예비타당성조사 통과

❍ 2017. 11. 20. : 조사설계용역 착수(LH)

❍ 2017. 12.  8. : 개발행위허가 제한지역 지정 고시(시)

❍ 2017. 12. 13. : 교통영향평가 및 사전재해영향성 용역 착수(LH)

❍ 2017. 12. 21. : 환경영향평가용역 착수(LH)

❍ 2018. 5.  10. : 진입도로 사업 타당성 협의 및 현장점검(국토연구원)

❍ 2018. 6.  18. : 산업단지계획 승인 신청(LH→국토부)

❍ 2018. 6.  19. : 산업단지계획(안) 및 사업인정에 관한 의견청취 계획 공고(시)

□ 향후계획

❍ 2018. 12. : 산업단지지구 지정 및 산업단지계획 승인(국토부)

❍ 2019.~2022. : 보상, 착공, 준공(LH)

❍ 2022. 하반기 : 분양

□ 관련사진