□ 주요 투자사업 추진현황

우리 동두천시에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

‣ 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
송내동 행정복지센터 신축	10,718	309	2,993	7,416	-	2024	2021	70
생연동 원도심 상권 진흥구역 지정 지원	4,000	2,000	1,000	1,000	-	2024	2020	100
자연휴양림 세미나실 및 객실 신축	11,724	4,040	4,410	3,147	-	2024	2021	85
어수로 도로확장	21,215	20,237	978	-	-	2023	2018	100
동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업	3,875	3,056	819	-	-	2023	2019	100
지행동~시가지 우회도로 연결사업	14,000	8,854	2,950	350	1,846	2026	2019	50
어수로 전선 지중화	6,246	5,330	916	-	-	2023	2021	100
국도 3호선 도로 확포장 공사	25,500	4,600	6,100	2,510	12,290	2026	2023	50
하봉암교~평화로 도로 개설	2,500	1,709	233	558	-	2024	2021	70
소요초교 주변 도시계획도로개설	8,100	-	200	-	7,900	2026	2022	10
캠프 북캐슬 주변 도시계획도로개설	8,000	-	200	-	7,800	2026	2022	10
왕방터널 관리용역	2,089	267	704	704	414	2025	2022	70
상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로 (소로1-21호선) 개설	7,100	5,234	1,554	312	-	2024	2020	90
상패동 6통 도시계획도로 (소로1-19호선) 개설	2,550	1,909	491	150	-	2024	2020	90
소요초교 동측 도시 계획도로(소로3-370호선 외 1개소) 개설	3,000	169	1	-	2,830	2026	2022	10
상패동 동성교회 인근 도시계획도로 (소로2-327호선)개설	4,000	112	58	2,300	1,530	202.	2022	20
조산마을회관 인근 도시계획도로 (소로1-100호선) 개설	3,500	59	61	500	2,880	2027	2022	10
소요초교 동안교 주변 도시계획도로개설	3,500	1,943	610	947	-	2025	2020	50
소요산역 건너편 도시계획도로 개설	2,500	273	127	700	1,400	2026	2023	10
경기북부 어린이박물관 편의시설 조성	11,000	5,158	2,077	3,765	-	2024	2018	85
캠프소요 in 경기	4,000	1,189	1,551	1,260	-	2024	2019	85
산림치유원 자연누림 (산림레포츠 시설) 조성	15,200	5,504	6,625	3,071	-	2024	2019	100
행복드림센터 (시민수영장) 건립	30,100	10,830	8,276	10,994	-	2024	2019	97
복합문화 커뮤니티센터 건립	30,000	16,520	5,797	7,683	-	2024	2019	100
반다비체육센터 (장애인스포츠 재활센터) 건립	19,800	17,209	2,591	-	-	2023	2019	100
노후 정수장 정비	6,879	600	3,062	2,042	1,175	2025	2022	75
노인회관 및 장애인회관 건립	16,616	5,428	4,352	4,617	6,571	2025	2022	15
상패근린공원 조성	10,000	3,800	700	2,800	2,700	2025	2022	30
꿈일다 프로젝트	2,338	-	100	2,238	-	2024	2022	45
경기도일자리재단 이전부지 정화 및 검증	32,100	6,300	93	-	25,707	2027	2022	5
국민체육센터 헬스장 이전 및 보강	1,900	-	80	1,820	-	2024	2023	70
반려동물 테마파크 조성	25,000	100	50	600	24,250	2027	2023	20
상봉암2 역사공원 조성사업	6,400	-	4,000	2,400	-	2029	2023	10

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

송내동행정복지센터 신축

담당자

회계과 김종헌(☎860-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 집합건축물인 싸이언스타워에 위치한 송내동 행정복지센터는 외부 입주 기관과 통로 및 공용부 공간을 공유하고 있어 행정수요 및 인구 증가로 인한 행정 업무와 문화·복지 서비스 제공 공간이 부족

○ 행정복지센터의 행정서비스 제공과 주민자치 프로그램 및 취미활동 등을 위한 공간을 확보할 필요가 있으나, 청사 증축에 대한 행정적․법적 절차가 복잡하여 이행하기 어려운 실정으로 독립적인 행정복지센터의 신축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1.∼2024. 12.

○ 위 치 : 송내동 690, 691

○ 규 모 : 지하1층~지상3층 철근콘크리트구조 업무시설, 연면적 2,991. 97㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,671백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,671	2,857	5,247	3,567
국 비
시 도 비
시군구비	11,671	2,857	5,247	3,567
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 송내동행정복지센터 신축 기본 및 실시설계 완료

○ 현재 공사 중(내·외부 마감공사)

□ 향후계획

○ 사업완료 및 개청(2024. 12. 예정)

□ 사업변경 내역

○ 공사실행 단위 금액 상승에 따른 총사업비 변경(공사비, 용역비, 시설부대비 등)

- 당초 : 10,862백만 원

- 변경 : 11,671백만 원(증 809백만 원)

사업명

생연동 원도심 상권진흥구역 지정지원사업

담당자

일자리경제과 오지영(☎860-2309)

□ 사업목적 및 필요성

○ 택지개발지구와 원도심 상권 분화에 따른 원도심상권 슬럼화가 빠르게 진행됨에 따라 소비자의 흥미를 끌 수 있는 상권 트렌드를 개발 및 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.~2024.

○ 위 치 : 생연로 97-1 일원

○ 규 모 : 120,650㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	2,000	1,000	1,000
국 비
시 도 비	2,000	1,000	500	500
시군구비	2,000	1,000	500	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2021.∼2023. : 1~3년차 사업 추진 완료

□ 향후계획

○ 2024.  9. : 상권 축제 개최

○ 2024. 10. : 큰시장 노점정비 및 그늘막 설치

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동두천 자연휴양림 세미나실 신축

담당자

관광휴양과 강지석(☎860-3251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주중 및 비수기 단체방문객 유도를 위한 대형행사, 워크숍 등에 활용 가능한 세미나실 건립

○ 치유의 숲 및 놀자숲 운영, 산림복지단지 사업 추진에 따른 방문객 증가에 대비해 세미나실 상부에 숙박시설 추가조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9.~2024. 2.

○ 위 치 : 탑동동 산16 일원

○ 규 모 : 지상3층, 연면적 2,897.91㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,724백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,627	4,040	4,410	3,177
국 비
시 도 비	4,500		1,669	2,831
시군구비	7,127	4,040	2,741	346
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2020. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 9. : 세미나실 3층 규모 확대 조성 확정

○ 2020. 10.~2022. 5. : 기본·실시설계 및 각종 행정절차 추진

○ 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 7. : 건설사업관리용역 착수 및 본공사 및 전기·통신·소방공사 착공

○ 2023. 2. : 태양광 발전장치, 배전반, 분전반공사 착공

○ 2023. 4. : 냉난방기, 자동제어 설치공사 착공

○ 2023. 12. : 관급자재 저수조, 경관조명, 방수시트 준공

□ 향후계획

○ 2024. 1.~2. : 2024년도 사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어수로 도로확장

담당자

도로과 박철희(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 도로의 기능 강화를 위해 기존 도로확장구간(동두천중앙역~어수사거리)과 연계, 4차선으로 확장하여 시가지 도로이용 편의 제공 및 시민 불편을 해소하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.∼2023.

○ 위 치 : 어수사거리∼신천교사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=270m, B=14.5→20m(2→4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,215백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	21,215	20,237	978
국 비	9,350	9,265	85
시 도 비
시군구비	11,865	10,972	893
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018.  5.  2. : 실시설계용역 착수

○ 2018. 10. 28. : 실시설계용역 준공

○ 2019.  6. 27. : 공사 착공

○ 2023.  4. 10. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업

담당자

도로과 박철희(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신시가지와 연결되는 역세권 도로의 기능성 확보를 위해 협소한 기존 도로폭 조정과 보도 신설을 통해 도로이용 편의 증진과 안전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2023.

○ 위 치 : 제일산부인과 사거리~부영5단지 사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=159m, B=8→15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,875백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,875	3,056	819
국 비	2,700	2,522	178
시 도 비
시군구비	1,175	534	641
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 10.  4. : 실시설계용역 착수

○ 2020.  9. 21. : 실시설계용역 준공

○ 2021.  6. 21. : 공사 착공

○ 2023. 11. 30. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

지행동∼시가지우회도로 연결사업

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020년 시가지 우회도로가 개통되었으나 중로1-6호선이 미개설되어 인근 아파트 등 시민들의 교통편의 제공을 위한 도로 개설 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2026.

○ 위 치 : 지행동 휴먼빌2차∼송내동 시가지우회도로

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,000	8,854	2,950	350	1,846
국 비	6,000	3,000	2,950	50
시 도 비
시군구비	8,000	5,854		300	1,846
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2019. 10.  4. : 실시설계용역 착수

○ 2020.  3. 31. : 실시설계용역 준공

○ 2023. 10. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2026.  4. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어수로 전선지중화

담당자

도로과 박철희(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어수로 도로확장사업과 병행 추진하는 사업으로 동두천 중앙역 역세권 도로의 기능확보를 위해 도시미관 저해요소를 제거하여 보행자 중심의 보행환경 제공 및 원도심 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2023.

○ 위 치 : 동두천중앙역∼신천교사거리

○ 규 모 : 전선지중화 L=1.1㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,246백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,246	5,330	916
국 비
시 도 비
시군구비	3,190	2,774	416
지 방 채
민간자본	3,056	2,556	500
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 12. 23. : 사업 선정(한국전력공사)

○ 2021.  3.  2. : 협약 체결(한전)

○ 2021.  6. 30. : 협약 체결(KT, 기타 통신사)

○ 2021. 10. 19. : 공사 착공

○ 2023.  4.    : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

국도3호선 도로확포장공사(송내동)

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평화로의 기존도로 협소로 인한 교통 정체와 사고 위험이 항시 내포하고 있어 시가지 교통정체 해소와 교통사고 예방을 위한 도로 확장 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2026.

○ 위 치 : 송내삼거리~롯데마트 앞 사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=1.09㎞, B=20m→35m, 교량 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,500백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	25,500	4,600	6,100	2,510	12,290
국 비	5,000		5,000
시 도 비
시군구비	20,500	4,600	1,100	2,510	12,290
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 11. 14. : 실시설계용역 착수

○ 2023.  7. 21. : 실시설계용역 준공

○ 2023. 12     : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2026. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

하봉암교∼평화로 도로 개설

담당자

도로과 박철희(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신설 하봉암교와 기존 하상도로 접속부 종단구배가 극심하여 교량 기준에 맞추어 도로 선형 및 구배, 폭원 등을 조정하여 지역주민 등 도로이용객 불편 해소 및 안전한 도로교통망 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.∼2024.

○ 위 치 : 하봉암교~평화로

○ 규 모 : 도로개설 L=134m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	1,709	233	558
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	1,709	233	558
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2021. 12. 16. : 실시설계용역 착수

○ 2022.  4. 14. : 실시설계용역 준공

○ 2023.  7. 17. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2024.  9. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

소요초교 주변 도시계획도로

(중로2-44 등) 개설사업

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상대적으로 낙후된 소요초교 인근 지역의 균형적인 발전이 필요하며, 현재 추진 중인 소요초교 동측 도시계획도로(소로3-310호선 등)과 연결하여 접근성 향상 및 도시발전을 위한 생활기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.∼2026.

○ 위 치 : 상봉암동 285-1 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=610m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,100백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,100		200		7,900
국 비
시 도 비
시군구비	8,100		200		7,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2023.  1. 16. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 12. 17. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2025.   7. : 공사 준공

○ 2026.  12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

캠프 북캐슬 주변 도시계획도로개설

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘주한미군 공여구역 주변지역 등 발전종합계획 변경’ 확정(2022. 12.)에 따른 중로 3-58호선 주변 근린공원조성 계획 및 캠프캐슬 공여지 매입

○ 기존 협소한 도로를 확장하여 시민들의 접근성 향상 및 교통편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.∼2026.

○ 위 치 : 동두천동 377-2 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=914m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000		200		7,800
국 비
시 도 비
시군구비	8,000		200		7,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2023.  2. 20. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2024.  9. : 실시설계용역 준공

○ 2025.  7. : 공사 준공

○ 2026. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

왕방터널 관리용역

담당자

도로과 이재오(☎860-2296)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로이용자의 안전과 쾌적한 도로교통 환경조성 도모

○ 관련법에 따른 터널의 지속적 점검을 통한 사고 예방 및 대응 철저

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8.∼2025. 7.

○ 위 치 : 왕방터널

○ 규 모 : 지방도 364호선 왕방터널(2,080m) 유지관리

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,089백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,089	267	704	704	414
국 비
시 도 비
시군구비	2,089	267	704	704	414
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2022. 7. : 관리용역 계약

○ 2022. 8.∼12. : 왕방터널 관리용역 (1차-5개월) 수행 완료

○ 2023. 1.∼12. : 왕방터널 관리용역 (2차-12개월) 수행 완료

□ 향후계획

○ 2024. 1.∼12. : 왕방터널 관리용역 (3차-12개월) 수행

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당초 : 1,943,806천 원

- 변경 : 2,089,282천 원 (증145,476천 원)

사업명

상패동 약수암∼경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선)개설공사

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 접근성을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충을 통해 쾌적한 주거 환경을 조성하여 지역의 발전 역량을 개선하며,

○ 법면 보강 및 배수시설 확충을 통해 우기시 산지부 토사 및 우수 유출을 저감함으로써 주민 피해 및 불편을 해소하고, 소방도로 확보를 통해 재해·재난상황 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11.∼2024. 5.

○ 위 치 : 상패동 32-85∼22-27 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=416m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,100백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,100	5,234	1,554	312
국 비
시 도 비
시군구비	7,100	5,234	1,554	312
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2019. 11. ~ 2020. 3. 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2020.  4. 실시계획인가완료 및 보상착수

○ 2020.  8. 투자심사 완료(적정)

○ 2021.  8. 보상완료

○ 2022.  3. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2024. 5. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 공사원가 및 감정평가결과 보상비 상승으로 인한 총사업비 변경

- 당초 : 5,530백만 원(전액시비)

- 변경 : 7,100백만 원(전액시비)

사업명

상패동 6통

도시계획도로(소로1-19호선) 개설

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 접근성을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충을 통해 쾌적한 주거 환경을 조성하여 지역의 발전 역량을 개선하며,

○ 법면 보강 및 배수시설 확충을 통해 우기시 산지부 토사 및 우수 유출을 저감함으로써 주민 피해 및 불편을 해소하고, 소방도로 확보를 통해 재해·재난상황 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11.∼2024. 7.

○ 위 치 : 상패동 14-59∼22-27 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=184m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,550백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,550	1,909	491	150
국 비
시 도 비
시군구비	2,550	1,909	491	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2019. 11.~2020. 1. : 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2020.  4. : 실시계획인가완료 및 보상착수

○ 2020.  8. : 투자심사 완료(적정)

○ 2021.  8. : 보상완료

○ 2022.  3. : 공사 착공

○ 2023.  6. : 토목공사 타절준공

○ 2023. 11. : 지장물 수용재결 및 공탁

□ 향후계획

○ 2024. 3.~7. : 잔여공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 공사원가 및 감정평가결과 보상비 상승으로 인한 총사업비 변경

- 당초 : 2,400백만 원(전액시비)

- 변경 : 2,550백만 원(전액시비)

사업명

소요초교 동측 도시계획도로

(소로3-370호선외 1개소) 개설공사

담당자

도시재생과 신명범(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10.∼2026. 12.

○ 위 치 : 소요초교 동측∼신천 제방도로 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=420m, B=6∼15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	169	1		2,830
국 비
시 도 비
시군구비	3,000	169	1		2,830
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2022. 10. : 실시설계용역 착수

○ 2023.  4. : 실시설계용역 (도시관리계획 변경 절차 진행)

○ 2023. 12. : 도시관리계획 변경 결정고시

□ 향후계획

○ 2024.  7. : 실시계획인가

○ 2024.  10.∼2025. 10. : 보상 착수 및 보상완료

○ 2025.  11.∼2026. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

상패동 동성교회 인근 도시계획도로(소로2-327호선) 개설공사

담당자

도시재생과 신명범(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10.~2026. 12.

○ 위 치 : 상패동 동성교회 동측~골프장 북측 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=394, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	112	58	2,300	1,530
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	112	58	2,300	1,530
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2022. 10. : 실시설계용역 착수

○ 2023.  4. : 실시설계용역 완료

○ 2023.  6. : 실시계획인가 고시

□ 향후계획

○ 2024.  4.∼2024. 11. : 보상 착수 및 완료

○ 2024. 12.∼2026. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

조산마을회관 인근 도시계획도로(소로1-100호선) 개설공사

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10.~2027. 12.

○ 위 치 : 탑동동 금말교~조산마을회관 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=419, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,500	59	61	500	2,880
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	59	61	500	2,880
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2022. 11. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2024.  9. : 실시계획인가

○ 2024. 10.∼2025.  8. : 보상 추진 및 완료

○ 2025.  9.∼2027. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

소요초교∼동안교 도시계획도로(소로2-304호선)개설공사

담당자

도시재생과 신명범(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 2.∼2025. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 209-36∼안흥동 12 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=993m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,500	1,943	610	947
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	1,943	610	947
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2021. 12. : 실시설계용역 및 재해영향 평가용역 완료

○ 2023.  7. : 보상 추진

○ 2023. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2025. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

소요산역 건너편 도시계획도로

(소로3-380호선외1개소)개설공사

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5.∼2026. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 127-8∼82-38

○ 규 모 : 도로개설 L=366m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	273	127	700	1,400
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	273	127	700	1,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2023.  3. : 중기지방재정계획 및 투자심사

○ 2023.  5. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2024.  9. : 실시계획인가

○ 2024. 10.∼2025.  8 : 보상절차 추진 및 완료

○ 2025.  9.∼2026. 12 : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

경기북부 어린이박물관 편의시설 조성

담당자

투자개발과 강정훈(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.~2024.

○ 위 치 : 상봉암동 161 일원

○ 규 모 : 19,500㎡ (유원지 놀이 및 편의시설, 기반시설(도로) 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,000	8,291	485	3,610
국 비	5,500	4,562	255	1,417
시 도 비
시군구비	5,500	3,729	230	2,192
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(공사중, 공정률 : 85%)

○ 2018.  9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021.  1. : 보상 착수

○ 2022.  7. : 공사 착수

○ 2022. 12. : 보상 완료

□ 향후계획

○ 2024.  8. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업위치 : 당초(상봉암동 8 일원), 변경(상봉암동 161 일원)

○ 사업기간 : 당초(2018. 1.~2023. 12.), 변경(2018. 1.~2024. 12.)

○ 사업규모 : 당초(A=19,618㎡), 변경(A=19,500㎡)

○ 사업내용 : 당초(사계절 썰매장, 작은식물원 및 숲길조성 등)

변경(유원지 놀이시설, 산책로, 조경 식재 등)

사업명

캠프 소요 in 경기

담당자

투자개발과 강정훈(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2024.

○ 위 치 : 상봉암동 164-3 일원

○ 규 모 : 공원, 유원지 등 기반 및 편의시설 조성(44,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	1,840	900	1,260
국 비
시 도 비	2,000	1,200	600	641
시군구비	2,000	640	300	619
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(공사중, 공정률 : 85%)

○ 2018.  9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021.  1. : 보상 착수

○ 2022.  7. : 공사 착수

○ 2022. 12. : 보상 완료

□ 향후계획

○ 2024.  8. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초(2019. 10.∼2023. 12.), 변경(2019. 10.∼2024. 12.)

○ 사업규모 : 당초(A=11,000㎡), 변경(A=44,000㎡)

○ 사업내용 : 당초(자연공원 조성 11,000㎡), 변경(공원 조성 44,000㎡)

사업명

산림치유원 자연누림(산림레포츠 시설)조성

담당자

투자개발과 박용군(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시 면적 중 약 68%를 차지하는 우수한 산림자원을 보유하고 있음에 따라

○ 경기도 최초 산림복지단지 조성을 통한 다양한 산림복지서비스 제공으로 관광객 유치 및 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1.~2024. 12.

○ 위 치 : 탑동동 산16 일원

○ 규 모 : 915,570㎡(담금센터 신축 1동, 트리탑데크로드 조성 1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,200백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,200	5,504	6,625	3,071
국 비	11,200	3,914	5,526	1,760
시 도 비	2,000	1,151	599	250
시군구비	2,000	439	500	1,061
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(공사중, 공정률 90%)

○ 2023. 12. : 트리탑데크로드 조성사업 완료

□ 향후계획

○ 2024.  4. : 담금센터 신축 완료

○ 2024.  8. : 하늘정원 조성공사 완료

○ 2024. 12. : 수목 보식 및 추가 보완공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초(2020. 1.~2023. 12.), 변경(2020. 1.~2024. 12.)

- 화물연대 파업, 레미콘 파동 등에 따른 자재수급 불안정 및 폭염, 장마 등 기상여건에 따른 일정 지연

사업명

행복드림센터(시민수영장) 건립

담당자

투자개발과 최민석(☎860-2583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신시가지 조성 이후 급격히 쇠락한 원도심에 수영장, 키즈헬스케어센터 등이 포함된 복합건축물을 건립하여 시민들의 삶의 질 향상과 원도심  활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.∼2024.

○ 위 치 : 생연동 594-1

○ 규 모 : 부지면적 4,560㎡, 건축연면적 7,764㎡(지하2층∼지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,100백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	30,100	15,296	11,494	3,310
국 비	3,000	3,000
시 도 비	15,400	8,191	4,600	2,609
시군구비	11,700	4,105	6,894	701
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(공사중, 공정률 : 68%)

○ 2020. 10. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 10. : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2024. 8. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : 당초(27,400백만 원), 변경(30,100백만 원)

- 층별 공간계획 변경에 따라 시비 2,700백만 원 증액

사업명

복합문화커뮤니티센터 건립

담당자

투자개발과 박성윤(☎860-2592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청년창업지원, 생활문화, 동아리, 청소년 상담, 청소년 교육활동, 도서관 및 지역영상미디어센터 등 복합적으로 구성된 문화시설을 건설하여 시민 모두가 함께 어우러져 이용할 수 있도록 복합문화커뮤니티센터 건립을 통해 원도심 주민의 문화복지 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2024.

○ 위 치 : 생연동 557-3 외 8필지

○ 규 모 : 건축연면적 9,420㎡(지하1층∼지상7층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	30,000	16,520	5,797	7,683
국 비
시 도 비	18,500	8,615	2,792	7,093
시군구비	11,500	7,905	3,005	590
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(공사중, 공정률 : 68%)

○ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2022.  1. : 토지 소유권 이전 완료 및 공사 착수

□ 향후계획

○ 2024.  6. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경

- 당초(부지면적 2,978㎡, 연면적 6,218㎡, 지하2층∼지상4층)

- 변경(부지면적 3,035㎡, 연면적 9,420㎡, 지하1층∼지상7층)

사업명

장애인 스포츠 재활센터 조성

담당자

투자개발과 박지훈(☎860-2597)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 장애인의 욕구와 필요에 부합한 스포츠와 재활을 접목한 장애인체육 시설을 조성하여 장애 주민들의 재활 의지 고취 및 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2023.

○ 위 치 : 상패동 55 외 3필지

○ 규 모 : 건축연면적 4,254㎡(지하1층∼지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,800백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,800	17,209	2,591
국 비	4,000	4,000
시 도 비	11,100	9,079	2,021
시군구비	4,700	4,130	570
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(완료)

○ 2020. 5. : 2차 토지매입(상패동 60-3 외 1필지)

○ 2021. 5. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2021. 8. : 공사 착수

○ 2023. 4. : 준공

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

○ 사 업 명 : 당초(장애인 스포츠 재활센터), 변경(반다비 체육센터)

○ 사업규모

- 당초(부지면적 3,228㎡, 연면적 6,000㎡, 지하1층∼지상3층)

- 변경(부지면적 5,670㎡, 연면적 4,254㎡, 지하1층∼지상3층)

사업명

노후 정수장 정비

담당자

환경사업소 양화석(☎860-3188)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 동두천정수장의 공정개선(시설개량)을 통하여 소형생물(유충) 대응강화 및 정수시설 운영 안정화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.~2025.

○ 위 치 : 동두천정수장(평화로3208번길 1)

○ 규 모 : 노후정수장 정수공정 개선(Q=40,000㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,879백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,879	600	3,062	2,042	1,175
국 비	3,439.5	300	1,531	1,021	587.5
시 도 비
시군구비	3,439.5	300	1,531	1,021	587.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2022.  3. : 지방상수도 현대화사업 공모 선정(국고 보조)

○ 2023.  4. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2023.  8. : 환경부 사전기술 검토(총사업비 : 증 1,175백만 원)

□ 향후계획

○ 2024.  1. : 공사착공

○ 2025. 12. : 공사완료(여과지 개량, 역세설비, 차염설비 완료)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초(5,704백만 원), 변경(6,879백만 원)

※ 환경부 사전기술 검토 반영[환경부 물이용기획과-5094(2023. 8. 22.호)]

○ 사업기간 : 당초(2022.~2024. 12.), 변경(2022.~2025. 12.)

※ 총사업비 변경(국고 증)에 따른 사업기간 변경 [환경부 물이용기획과-6811(2023. 11. 8.)호]

사업명

동두천시 노인회관 및 장애인회관 건립

담당자

투자개발과 박지훈(☎860-2597)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천 노인 인구는 21.5%로, 경기도 평균 14.1%에 비해 노인 인구 비율이 크게 높은 상황으로, 초고령사회 진입에 따른 노인복지 수요가 크게 증가하고 있으나, 노인여가복지시설은 크게 부족하여, 노인들의 여가 프로그램을 위한 공간의 조성이 필요함

○ 동두천 장애인 인구는 7%로 장애인복지 수요가 증대되고 있으나 장애인복지관 및 장애인단체 사무실은 건축된 지 20년 이상 되어 활동 공간이 협소하고 환경이 열악하여, 장애인들이 활동할 수 있는 새로운 복지․문화 공간이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.∼2025.

○ 위 치 : 생연동 511-1 일원

○ 규 모 : 건축연면적 2,766㎡(지상1층~지상3층 2개동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,616백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,616		5,428	4,617	6,571
국 비
시 도 비
시군구비	16,616		5,428	4,617	6,571
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(기본 및 실시설계 용역 착수)

○ 2022.  7. : 노인회관 및 장애인회관 건립계획 수립

○ 2022.  8. : 지방재정 투자심사

○ 2023.  1. : 부지매입 및 소유권 이전 완료

○ 2023.  6. : 건축기획 용역 및 공공건축사업계획서 사전검토 완료

○ 2023.  7. : 공공건축심의 완료

○ 2023. 10. : 설계공모작 평가심사위원회 개최

○ 2023. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2024.  8. : 공사 착수

○ 2025.  7. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

싱패근린공원 조성

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대상지 내 집단분포 되어있는 분묘이전으로 지역주민의 정주여건 개선 및

녹색복지 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.~2025.

○ 위 치 : 상패동 산18 일원

○ 규 모 : 면적 75,558㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	3,800	700	2,800	2,700
국 비	4,800		300	2,300	2,200
시 도 비
시군구비	5,200	3,800	400	500	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021. 5. : 토지매입 완료 (44,325㎡)

○ 2021. 7. : 휴게광장 839㎡ 부분 조성 완료(수경반점 건너편)

○ 2023. 2. : 분묘조사용역 시행(840기)

○ 2023. 3.∼11. : 묘지 이전비용 감정평가 완료 및 이장 공고(1·2차)

○ 2023. 2.∼ : 유연분묘 이전 지속

○ 2024. 6. : 무연분묘 개장용역 착수

□ 향후계획

○ 2024. 10. : 실시설계 용역 완료

○ 2024. 11. : 무연분묘 이전 완료 및 조성공사 착수

○ 2025. 12. : 상패근린공원 조성사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

경기도일자리재단 이전부지 정화 및 검증

담당자

일자리경제과 유재복(☎860-2369)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기도일자리재단 이전을 위해 이전부지 오염토양 정화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9.∼2027. 10.

○ 위 치 : 상패동 19 일원

○ 규 모 : 오염토양 15,768㎥ 정화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,100백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	32,100	6,300	93		25,707
국 비
시 도 비	10,000		93		9,907
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	22,100	6,300			15,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2022.  6.∼8. : 토양오염 정밀조사 용역

○ 2023.  1.∼ : 정화사업 실시설계용역 추진(용역 중지)

□ 향후계획

○ 2024.∼2025. : 토양오염 정화 및 검증

○ 2025.∼ : 경기도일자리재단 이전 신축공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 당초 약100억원의 정화비용이 추정되었으나 규제심판부 권고에 따라 환경부에서 불소기준 완화 중으로 개정 완료 시 변경사항을 반영하여 정화사업 추진 예정(불소 오염량 및 정화기간 감소 예정)

사업명

국민체육센터 헬스장 이전 및 보강

담당자

문화체육과 이지훈(☎860-2824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 헬스장의 환기시설 부족 및 협소한 면적으로 인한 불편함을 헬스장

이전(증축)을 통해 개선하여 시민들의 삶의 질 향상 및 건강증진 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 2.~2024. 10.

○ 위 치 : 천보산로 688

○ 규 모 : 국민체육센터 헬스장 이전(증축) (연면적 500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,900백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,900		80	1,280
국 비	1,300		56	1,244
시 도 비
시군구비	600		24	576
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2023. 10. : 실시설계완료

○ 2024.  1. : 헬스장 증축 공사 착공

○ 2024.  8. : 헬스장 증축 공사 준공

□ 향후계획

○ 2024.  9. : 헬스장 이전에 따른 기존 다목적실 재정비

○ 2024. 10. : 헬스장 주변 시설물 보수공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : 당초(2,000백만 원), 변경(1,900백만 원)

사업명

반려동물 테마파크 조성

담당자

투자개발과 최보경(☎860-2589)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반려인구가 증가함에 따라 반려동물 서비스에 대한 수요 또한 증대되고 있으나 경기 남부에 편중되어있는 반려동물 테마파크를 동두천시에 조성하여 지역 편중을 완화하고 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8.~2027. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 산18 일원

○ 규 모 : 총 부지면적 82,715㎡, 건축 연면적 2,801.7㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	25,000	100	50	60	24,250
국 비
시 도 비
시군구비	25,000	100	50	600	24,250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(건축기획용역중, 공정률 : 90%)

○ 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 실시

○ 건축기획용역 실시

□ 향후계획

○ 2024. 7. ~ 2025. 8. : 설계공모, 기본 및 실시설계

○ 2025. 9. ~ 2027.12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초(2022. 8.~2026. 12.), 변경(2022. 8.~2027. 12.)

사업명

싱봉암2 역사공원 조성

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상봉암2 역사공원은 소요산 관광지와 연접되어 있고, 상당 부분 개발 가능성이

있는 토지임에 향후 지역 내 관광자원과 연계하여 새로운 성장동력을 창출,

주변 상권과 지역경제 회복에 기여할 것으로 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.~2029.

○ 위 치 : 상봉암동 산41 일원

○ 규 모 : 231,740㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,400백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,400		4,000	2,400
국 비
시 도 비
시군구비	6,400		4,000	2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 5. : 상봉암2 역사공원 신설

○ 2023. 5. : 1차 토지매입 완료(176,435㎡)

○ 2023.11. : 소요산확대개발사업 발전방안 및 기본계획 용역 완료

○ 2024. 2. : 토지 등 지장물 감정평가

○ 2024. 4. : 조성계획 수립 착공

□ 향후계획

○ 2024. 12. : 조성계획 수립 완료 및 실시설계 용역 착수

○ 2025. 12. : 조성계획 인가

○ 2026. 1.∼2028. 12. : 상봉암2 역사공원 조성 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음