소요산 산림욕장 확대개발사업

<市 담당부서 : 투자개발과 개발2팀장 양웅식, ☎ 2587>

□ 사업개요

위 치	동두천시 상봉암동 산21번지 외 33필지
사업기간	2015 ∼ 2019
사업규모	목재문화체험장, 숲속의집 및 캠핑장, 유아숲체험원 등
사 업 비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2018년 소요			향후투자
				계	확보	미확보
	계	17,890	10,594	3,600	3,600	-	3,696
	국 비	-	-	-	-	-	-
	도 비	12,293	6,820	2,700	2,700	-	2,773
	시․군비	4,097	2,274	900	900	-	923
	특별교부세	500	500	-	-	-	-
	특별조정교부금	1,000	1,000	-	-	-	-
추진현황	공사 추진 중

□ 추진경과

❍ 2015. 10. : 실시설계용역 착수

❍ 2016. 11.~2017. 2. : 설계경제성검토(VE) 용역 완료 및 건설기술심의(경기도)

❍ 2017.  5. : 실시계획인가, 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 승인

❍ 2017.  5. : BF예비인증 및 야간경관심의 완료

❍ 2017.  6. : 경기도 계약심사 실시 및 실시설계용역 준공

❍ 2017.  9. : 공사 착공 및 착공식 개최

❍ 2018.  3. : 2차분 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후계획

❍ 2019.  6. : 공사 준공

□ 관련사진