소요산(공주봉) 모노레일 설치사업

<투자개발과 투자유치팀장 김승호, ☎ 2590>

□ 사업개요

위 치	동두천시 상봉암동 산33번지 일원
사업기간	2016. ∼ 2019.
사업규모	모노레일 L=2.9km, 승강장 2개소 등
사 업 비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2018년 소요			향후투자
				계	확보	미확보
	계	6,140	140	6,000	700	5,300	-
	국 비						-
	도 비						-
	시․군비	6,140	140	6,000	700	5,300
추진현황	타당성조사용역 완료(2016), 야생생물보호구역 해제 용역(2016.9.∼2019.9.), 생태자연도 등급 신청 용역 (2017.4.∼2018.1.)

□ 추진경과

❍ 2017.  4.~12. : 생태자연도 등급신청 용역 발주 및 추진

❍ 2017.  9. : 모노레일 설치사업 관련 사회단체 등 찬성 서명 운동 추진

❍ 2017. 12. : 토지사용승낙 관련 봉선사 종무회의 안건 상정 추진

❍ 2018.  1. : 모노레일 설치 대상지 생태자연도 등급 부여 (1등급지 포함)

❍ 2018. 3. : 조계종 사회부(환경위원회), 봉선사 현장방문

❍ 2018. 5.~6. : 조계종 토지사용 협의

□ 문제점 및 대책

❍ 토지 사용협의 추진에 기간 소요

□ 향후계획

❍ 2018. 7. ∼ 8. : 토지사용 승낙과 관련 조계종 협의 추진

❍ 2018. 9. ∼ 2019. 1. : 실시설계 및 환경영향 평가용역 추진

❍ 2019. 2. ∼ 7. : 착공 및 준공

□ 관련사진