동화리조트(골프장) 조성사업

<市 담당부서 : 투자개발과 투자유치팀장 김승호, ☎ 2590>

□ 사업개요

위 치	동두천시 탑동동 산169번지 일원
사업기간	2013 ∼ 2019.
사업규모	콘도미니엄 40실, 골프장 9홀
사 업 비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2018년 소요			향후투자
				계	확보	미확보
	계	50,000	16,580	13,620	13,620	-	19,800
	민간투자	50,000	16,580	13,620	13,620	-	19,800
추진현황	도시관리계획 결정 입안서 제출(2016), 경기도 도시계획위원회 재심의(2017) 동두천시 지구단위계획구역 공람공고(2018.1.)

□ 추진경과

❍ 2017.  6. : 경기도 도시계획위원회 2차 재심의 (조건부 의결)

❍ 2017.  9. : 지구단위계획구역 심의서류 제출 요청(시→동화개발)

❍ 2017. 11. : 도시·건축 공동위원회 개최(조건부 수용)

❍ 2018.  1. : 지구단위계획구역 및 계획 공람공고

❍ 2018.  4. : 도시관리계획 시설결정 및 고시

□ 문제점 및 대책

❍ 사전 행정 절차 진행에 시간 소요로 기존 계획 일부 지연

□ 향후계획

❍ 2018. 7.∼10. : 환경영향평가 실시 및 개발행위허가 신청 및 승인

❍ 2018. 12. : 착공계 제출 및 공사 착수

❍ 2019. 12. : 동화리조트 준공

□ 관련사진