외국인관광특구 특화거리 환경개선사업

<市 담당부서 : 전략사업과 사업콘텐츠개발팀장 오정명, ☎ 2626>

□ 사업개요

위 치	동두천시 외국인관광특구
사업기간	2018. ∼ 2020.
사업규모	경관조명 특화거리 조성(L=500m, B=6m 구간 중 일부) Camp Bosan 휴게광장(쉼터) 조성사업(500㎡) 외국인관광특구 내 소공원 주변 정비사업(3,600㎡)
사 업 비 (백만원)	재원별	총사업비	기 투자	2019년 소요			향후투자
				계	확보	미확보
	계	4,122	375	2,853	2,853	-	894
	국 비	3,298	300	2,283	2,283	-	715
	도 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	824	75	570	570	-	179
추진현황	2018년 1단계 사업 완료 * 관광특구 내 Gate 조형물 및 공공화장실 신설

□ 추진상황

❍ 2018년 1단계 사업

- 관광특구 내 Gate 조형물 및 공공화장실 신설

❍ 외국인관광특구 경관조명 특화거리 조성사업

- 2019.  1. : 경관조명 특화거리 조성사업 착수  * 공기관 대행

- 2019.  2. : 착수

- 2019.  4. : 디자인 개발

❍ Camp Bosan 휴게광장(쉼터) 조성사업

- 2019.  1. : 외국인관광특구 특화거리 환경개선사업 추진계획 수립

- 2019.  5. : 공유재산심의

❍ 외국인관광특구 내 소공원 주변 정비사업

- 2019.  2. : 실시설계 완료

- 2019.  3. : 공사업체 선정 (계약의뢰)

- 2019.  4. : 공사착수

□ 향후계획

❍ 외국인관광특구 경관조명 특화거리 조성사업

- 2019.  7. : 의회 보고, 주민설명회

- 2019.  8. : 공사 착수

- 2019. 12. : 준공

❍ Camp Bosan 휴게광장(쉼터) 조성사업

- 2019.  7. : 의회보고

- 2019.  8. : 광장조성 관련 매입예정부동산 취득 (계약, 소유권이전 등)

- 2019.  9. : 휴게광장(쉼터) 조성사업 실시설계

- 2019. 10. : 공사착수

- 2019. 12. : 준공

❍ 외국인관광특구 내 소공원 주변 정비사업

- 2019. 10. : 준공

※사업대상지 참고도

보산역

휴게광장

(기존 센터 주변)

소공원 주변 환경개선

공공화장실

【관 광 특 구】

신    천

(경관조명 주요 설치 구간)