놀자숲 조성사업

<市 담당부서 : 투자개발과 개발1팀장 박관섭, ☎ 2582>

□ 사업개요

사업기간	2015.〜2019.
위 치	동두천시 탑동동 산33번지 일원
사업규모	18ha(놀자센터, 모험의 숲, 놀이의 숲 등)
사 업 비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2019년 소요			향후투자
				계	확보	미확보
	계	17,175	9,265	7,910	7,910	-	-
	국 비	9,675	4,184	5,491	5,491	-	-
	도 비	7,500	5,081	2,419	2,419	-	-
	시․군비			-	-	-	-
추진현황	2018. 2. 26. 공사 착수(공정률 82%)

□ 추진경과

❍ 2017. 12. : 소규모 환경영향평가 협의 완료, 사전재해영향성검토(개발) 완료.

인허가 완료, 기본 및 실시설계 준공, 조달청 입찰의뢰

❍ 2018. 2. : 놀자숲(건축·토목·조경·기계) 공사착수

❍ 2018. 3. : 놀자숲(전기·통신·소방) 공사착수

❍ 2018. 3. 22. : 착공식 개최(MTB자연휴양림 합동)

❍ 2018. 3.~2019. 7. : 공사 추진(7월말 공정률 82%)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후계획

❍ 2019. 11. : 공사 준공

□ 관련사진