국가산업단지 조성사업

<市 담당부서 : 투자개발과 기업조성팀장 이호성, ☎ 2593>

□ 사업개요

사업기간	2018. ∼ 2023.
위 치	동두천시 상패동 동두천교차로 일원
사업규모	산업단지 조성 1차 267,309㎡(약 8.1만 평) ※총 100만㎡(30만 평) 단계적 조성
입주업종	섬유·의복, 화학, 1차금속, 전자부품, 컴퓨터, 통신장비, 기타 기계, 자동차 제조업 등
사 업 비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2019년 소요			향후투자
				계	확보	미확보
	계	117,000	800	2,900	2,900	-	108,800
	국 비	25,800	-	500	500	-	25,300
	도 비	5,000	-			-	5,000
	시 비	5,000	-			-	5,000
	기타	75,900	800	2,400	2,400	-	72,700
추진현황	2019. 7. 농업진흥지역 해제

□ 추진경과

❍ 2015.  6. 30. : 동두천 국가산업단지 추진 확정(단계적 조성, 1단계 10만평)

❍ 2017.  9.  1. : 예비타당성조사 통과

❍ 2018.  6. 18. : 산업단지계획 승인 신청(LH→국토부)

❍ 2018.  6. 29. : 동두천 국가산업단지 주민 합동설명회

❍ 2018.  7. 20. : 수도권정비심의실무위원회 “원안 가결”
- 산업단지 제한 공급물량 외 추가 공급

❍ 2018. 11. 29. : 농림축산식품부 농지 전용 협의 의견 회신
- 입지 재검토 의견

❍ 2019.  1. 18. : 국무조정실 국가산업단지 현안점검회의

- 입지 일부 조정(8.1만 평) 및 2단계 조성사업 조기 착수 협의(1. 22. 통보)

❍ 2019.  3. 28. : (관계기관 협의결과에 따른) 산단계획 보완 제출(LH→국토부)

❍ 2019.  4.  5. : 주민설명회 개최(상패동 행정복지센터 3층)

❍ 2019.  6.  4. : 경기도 농업정책심의회 의결(농업진흥지역 해제 심의)

- 2019. 6. 7. 농지전용심사협의의견서 제출(경기도→농림축산식품부)

❍ 2019.  6.  5. : 군사기지 및 군사시설보호심의위원회 심의(28사단)

❍ 2019.  7. 31. : 농업진흥지역 해제“조건부 동의” 의견 회신(농림축산식품부→국토부)

□ 향후계획

○ 2019. 9. : 산업단지계획(안) 승인 및 고시(국토교통부)

○ 2020. : 토지 보상(LH)

○ 2021. ~ 2023. : 착공, 준공, 분양(LH)

□ 관련사진