11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

장사사실 신축(공설묘지 재개발)

담당자

사회복지과 박종만

(☎860-2266)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공설묘지 만장과 더불어 늘어나는 화장률에 대비하여 매장 중심의 공설       묘지를 봉안시설 중심의 공원묘역으로 재개발 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008. 9. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 동두천시 안흥동 산62번지 일원

○ 규 모 : 봉안시설(21,270기), 관리사무소, 주차장, 공원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,790백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	16,790	1,192	587	5	15,006
국 비	4,449	-	386	-	4,063
시 도 비	954	-	83	-	871
시군구비	11,387	1,192	118	5	10,072
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2008. 09. : 사업추진계획 수립

○ 2010. 10. : 기본설계 완료

○ 2011. 12. : 진입도로 및 교량공사 완료

○ 2014. 09. : 봉안담 1기 완공

□ 향후계획

○ 2015년 중 자연장지 설치계획 수립

○ 2017년까지 단계적 공설묘지 재개발 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

경기북부 어린이박물관 건립사업

담당자

문화체육과 김재헌

(☎860-2058)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부지역의 문화시설 인프라 구축 및 창의적인 어린이 프로그램을

통해 가족 간의 유대를 높이고 어린이의 지적·신체적 재능을 발달시키는

체험학습형 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 9. ∼ 2015. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 162번지 일원

○ 규 모 : 부지 12,237㎡, 건축연면적 5,646.65㎡(지하1층, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	19,200	836	2,394	15,970	-
국 비	1,330	-	-	1,330	-
시 도 비	8,270	418	798	7,054	-
시군구비	9,600	418	1,596	7,586	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○ 2015. 6월 현재 : 지상층 철골공사 중

□ 향후계획

○ 2015.12 : 건축공사 준공

○ 2015.01 ∼ 2016.02 : 전시물 제작 및 설치

○ 2016.03 ∼ 2016.04 : 전시물 및 전시물 시운전

○ 2016.05 : 개관(예정)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

신천 생태하천 복원사업

담당자

환경보호과 정소영

(☎860-2255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천시의 젓줄이며 지방 하천인 신천을 수생식물 식재, 자연형호안 조성,       콘크리트 구조물 철거 등 생태하천복원을 통하여,

○ 동·식물의 서식처로서 생태적 기능을 확보하고, 아이들이 멱감을 수 있는

하천으로 발전시켜 물 환경조성에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2005. 10.～2014. 7.

○ 위 치 : 양주시 경계(은현면 용암리)∼동두천시 상패동 상패교

○ 규 모 : L=5.7㎞ 좌·우안

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,151백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	19,151	18,045	1,106
국 비	12,506	12,132	374
시 도 비	2,345	2,264	81
시군구비	4,300	3,649	651
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014.07. 사업 준공

□ 향후계획

○ 생태하천 복원사업 유지관리 실시

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경        (단위 : 백만원)

구분	총사업비
	당 초	변 경
계	22,254	19,151
국 비	15,578	12,506
지방비	6,676	5,193

○ 변경사유

- 감사원감사(‘12년) 및 한강유역환경청 지적사항 반영과 현장여건을 고려하여          공사내용이 일부 변경됨에 따라 공사 완료 전 총사업비(22,254백만원)를 최종          소요 사업비(19,151백만원)으로 변경

사업명

동두천중앙역 역세권 개발사업

담당자

도로과 김수근

(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천중앙역의 교통환경 개선 및 인도설치에 따른 보행환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 3. ~ 2016. 9.

○ 위 치 : 동두천중앙역 일원(동두천중앙역 ~ 어수사거리)

○ 규 모 : 도로개설 L=0.592km, B=15~20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	25,000	15,790	4,910	1,007	3,293
국 비	13,995	11,540	2,455	-	-
시 도 비	1,000	1,000	-	-	-
시군구비	10,005	3,250	2,455	1,007	3,293
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2011. 4. : 토지 및 지장물 보상 실시

○ 2013. 3. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016.  9. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

상패~신사로간 도로개설공사

담당자

도로과 손영득

(☎860-2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미개설된 지방도 364호선을 연결하여 시내 교통량 분산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 3. ~ 2014. 12.

○ 위 치 : 상패동 ~ 생연2동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.05km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	29,000	19,840	9,160
국 비	14,500	12,000	2,500
시 도 비	1,000	1,000
시군구비	13,500	6,840	6,660
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2011. 12. : 공사 착공

○ 2015.  5. : 공사 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

변전소~부처고개간 도로개설

담당자

도로과 김수근

(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통량이 증가하는 국도3호선의 교통량 분산을 통한 교통체계 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 8. ~ 2016. 10.

○ 위 치 : 송내동 안골마을 ~ 광암동 외인주공아파트 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.48km, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 59,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	59,300	31,496	8,500	6,012	13,292
국 비	29,650	13,600	7,500	5,000	3,550
시 도 비	339	339
시군구비	29,311	17,557	1,000	1,012	9,742
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ 2013. 5. : 실시설계용역 완료

○ 2013. 8. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 10. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

소요동 도시계획도로(동막천일원)도로개설

담당자

도로과 김수근

(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요15통 동막천 일원의 주민들에게 도로개설에 따른 기반시설 및 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4. ~ 2015. 5.

○ 위 치 : 소요15통 동막천 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.235km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,189백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	2,189	520	1,380	289
국 비
시 도 비
시군구비	1,800	520	1,280
지 방 채
민간자본	389		100	289
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 1. : 공사착공

○ 2015. 5. : 공사완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

사업규모		총사업비(백만원)		사업기간
당초	변경	당초	변경	당초	변경
L=0.399km, B=10~15m	L=0.235km, B=15m	3,000	2,189	2013.4 ~ 2015.1	2013.4 ~ 2015.5

사업명

소요동 도시계획도로개설사업

담당자

도로과 김수근

(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요동 먹쟁이골 주변 기반시설 확충 및 소요산산림욕장 진입로 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 5. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 76번지 일원(먹쟁이골)

○ 규 모 : 도로개설 L=0.277km, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	2,600	1,000			1,600
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	1,000	24		1,576
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2012. 8. : 실시설계용역 완료

○ 2013. 3. : 토지 및 지장물 보상 실시

○ 2014.1.~12. : 보상금지급

□ 향후계획

○ 2016.  3. : 공사 착공

○ 2016. 12. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

평화로 (창말고개) 위험도로 구조개선사업

담당자

도로과 김수근

(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시야확보의 어려움과 노면불량으로 사고위험이 다분한 창말고개를 정비, 사고발생 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 소요동 동양대학교 주변

○ 규 모 : 도로개설 L=0.58km, B=21.5~24.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	8,000		682.5	1,029.5	6,288
국 비	3,000		175	577	2,248
시 도 비	2,000				2,000
시군구비	3,000		507.5	452.5	2,040
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014. 3. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2015.  9. : 공사착공

○ 2016. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역

사업규모		총사업비(백만원)		사업기간
당초	변경	당초	변경	당초	변경
L=0.40km, B=20~30m	L=0.58km, B=21.5~24.5m	6,000	8,000	2014.3 ~ 2016.12	2014.3 ~ 2016.12

사업명

강변서로(신천교~동광교) 개설사업

담당자

도로과 김수근

(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통량이 증가하는 국도3호선의 교통량 분산을 통한 교통체계 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 상패동 신천교 ~ 상패동 동광교 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.924km, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	7,040		4,530	1,510	1,000
국 비	3,520		3,520
시 도 비
시군구비	3,520		1,010	1,510	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014. 3. : 실시설계용역 착수

○ 2015. 6. : 토지 및 지장물 보상 실시

□ 향후계획

○ 2015.  9. : 공사착공

○ 2016. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

안흥지구 주거환경개선사업(도로개설)

담당자

도시과 강문성

(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안흥동 일원의 노후 주택 밀집 지역에 도로, 상·하수도 등 기반 시설을

확충하여 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007년 ∼ 2015년

○ 위 치 : 안흥동 42번지 일원 (신흥고등학교 맞은편)

○ 규 모 : 도로개설 L=708m, B=6∼10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,582백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	4,582	2,856	881	845	-
국 비	2,877	1,496	705	676	-
시 도 비	671	671	-	-	-
시군구비	1,034	689	176	169	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2007.  3. : 실시설계용역 착수

○ 2013.  6. : 실시설계용역 준공

○ 2013.  8. : 보상 착수

○ 2014.  7. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2015. 10. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

생연1-1지구 주거환경개선사업(도로개설)

담당자

도시과 강문성

(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생연동 일원의 노후 주택 밀집 지역에 도로, 상·하수도 등 기반 시설을

확충하여 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ∼ 2016년

○ 위 치 : 생연동 512-3번지 일원 (보영여자고등학교 와 평화로 사이)

○ 규 모 : 도로개설 L=525m, B=4∼6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,027백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	4,027	2,057	625	1,345	-
국 비	2,667	1,091	500	1,076	-
시 도 비	475	475	-	-	-
시군구비	885	491	125	269	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2008.  9. : 실시설계용역 착수

○ 2013.  6. : 실시설계용역 준공

○ 2013.  8. : 보상 착수

○ 2015.  4. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016.  4. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

풀잎유치원앞 도로개설

담당자

도시과 황원준

(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생연동 풀잎유치원 앞 일원 도시기반시설 확충을 통해 쾌적한 주거환경을

조성하여 주민들의 교통불편을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009년 ∼ 2014년

○ 위 치 : 생연동 180-2번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=343m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,469백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	1,099	1,099	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7	7	-	-	-
시군구비	1,092	1,092	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2009. 9. : 실시설계용역 착수

○ 2011. 1. : 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시

○ 2011. 6. : 실시설계용역 준공

○ 2013. 6. : 공사 착공

○ 2014. 6. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당사항 없음

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
사업규모	L=206m, B=8m	L=343m, B=6m
총사업비	1,469백만원	1,099백만원
사업기간	2009년~2010년	2009년~2014년

사업명

소요초등학교 후문 앞 도로개설사업

담당자

도시과 강문성(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요초등학교 후문 주변 도로개설을 통하여 주민 및 학생들에게 안전하고

편리한 도로망을 제공하여 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼2016년

○ 위 치 : 상봉암동 239-3번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=513m, B=6∼15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	3,000	60	-	1,000	1,940
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	60	-	1,000	1,940
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2015.  1. : 실시설계용역 착수

○ 2015.  3. : 실시설계용역 준공

○ 2015.  6. : 도시관리계획 변경 결정 (소로 폭 8m → 6m)

○ 2015.  7. : 보상계획 공고

□ 향후계획

○ 2016.  3. : 공사 착공 예정 (잔여 사업비 확보시)

○ 2016. 12. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

중앙로∼동광로 간 도로개설사업

담당자

도시과 황원준

(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙로∼동광로 간 도시기반시설 미비지역에 도시계획도로를 개설하여

쾌적한 주거환경 조성 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ∼ 2015년

○ 위 치 : 생연동 615-21번지 일원 (빨간풍차 제과점 ∼ 보산역 전철하부)

○ 규 모 : 도로개설 L=447m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,055백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	3,055	1,555	1,500	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,055	1,555	1,500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2010. 12. : 실시설계용역 착수

○ 2011.  5. : 실시설계용역 준공

○ 2012.  4. : 보상 착수

○ 2014.  5. : 공사 착공

○ 2015.  7. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당사항 없음.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
사업규모	L=447m, B=8m	L=447m, B=8m
총사업비	3,330백만원	3,055백만원
사업기간	2010년~2012년	2010년~2015년

사업명

소요산 산림욕장 진입도로 개설사업

담당자

도시과 강문성

(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼림욕장 및 소요산을 찾는 관광객들에게 편리한 도로망을 제공하여

소요산권 관광자원 활성화를 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ∼ 2015년

○ 위 치 : 상봉암동 산 23-1번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=953m, B=6∼11m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,503백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	5,503	2,203	3,300	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,300	100	2,200	-	-
시군구비	3,203	2,103	1,100	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013.  3. : 실시설계용역 준공

○ 2013.  6. : 보상 착수

○ 2013. 12. : 공사 착공

○ 2015.  6. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당사항 없음.

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

동두천중앙역 주변 도로개설사업

담당자

도시과 황원준

(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천중앙역 역세권 주변 도시기반시설 미비지역에 도시계획도로를

개설하여 원활한 차량 소통 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ∼ 2015년

○ 위 치 : 생연동 635-1번지 일원 (동두천중앙역 주변)

○ 규 모 : 도로개설 L=822m, B=6∼10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,695백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	5,695	3,520	1,800	375	-
국 비	2,900	2,000	900	-	-
시 도 비	100	100	-	-	-
시군구비	2,695	1,420	900	375	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012.  1. ∼ 2013. 11. : 공사 준공 (소로 3-161호선 : 영남철강~이나이트)

○ 2012.  1. ∼ 2013.  9. : 공사 준공 (소로 3-161호선 : 중화원~중부가스)

○ 2014.  5. ∼ 2014.  6. : 공사 준공 (소로 2-320호선 : 동두천로~중앙로)

○ 2013.  9. ∼ 2014. 12. : 공사 준공 (소로 3-156호선 : 생연동 광명빌라)

○ 2012. 12. ∼ 2015.  5. : 공사 준공 (소로 3-49호선 : 동두천중앙역 앞)

□ 향후계획

○ 해당사항 없음

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
사업규모	L=1,200m, B=6∼10m	L=822m, B=6∼10m
총사업비	7,000백만원	5,695백만원
사업기간	2012년~2013년	2012년~2015년

사업명

광암동 다목적회관 주변 도로개설사업

담당자

도시과 강문성

(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상대적으로 낙후된 광암동 지역에 도로개설을 통하여 원활한 차량 소통

및 주민들에게 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2106년

○ 위 치 : 광암동 170-3번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=270m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	1,500	70	555	500	375
국 비	555	-	555	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	945	70	-	500	375
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2013. 12. : 실시설계용역 착수

○ 2014.  4. : 실시설계용역 준공

○ 2015.  2. : 보상 착수

□ 향후계획

○ 2016.  3. : 공사 착공 예정 (잔여 사업비 확보시)

○ 2016. 12. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

동두천 복합화력발전소 용수공급시설 설치공사

담당자

환경사업소 신명범

(☎860-3188)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천시 복합화력발전소에 원활한 용수공급을 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013.03. ~ 2014. 12.

○ 위 치 : 양주시 경계~동두천 복합화력발전소

○ 규 모 : 용수공급 송수관로 매설(직경 600㎜, 연장 7.3㎞), 가압장 1개소,

진입도로 개설 1식(폭 8m, 연장 0.4㎞)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,425백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년	‘15년	‘16년 이후
계	14,425	-	14,425	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	14,425	-	14,425	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2013. 11. 착공

○ 2014. 12. 준공

□ 향후계획

○ 2015. 08. 용수공급시설 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음