9-2. 지방채 발행사업

우리 동두천시에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
국도대체 우회도로개설사업 (회천~청산) (보상비)	74,200	10,000	2,600	51,600	10,000	-	10,000	80

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

국도대체우회도로 개설사업

(회천~청산)

담당자

도로과 김수근(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 만성적인 교통체증이 발생되는 국도3호선의 우회도로를 개설하여 시민들에게 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2003. 4. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 양주시 회천 ~ 연천군 청산면

○ 규 모 : 도로개설 19.05km, B=20~27m(우리시구간 L=9.71km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 74,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	74,200	19,200	26,100	19,900	9,000
지 방 채	10,000	10,000
국 비	17,000	2,500	100	9,900	4,500
시 도 비	43,000	3,500	25,000	10,000	4,500
시군구비	4,200	3,200	1,000
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2007.  3. : 1공구(회천~상패) 공사착공

○ 2009.  5. : 2공구(상패~청산) 공사착공

○ 2014. 10. : 1공구(상패~청산) 공사준공

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 2공구(상패~청산) 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음