109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
동두천 락페스티벌 개최 지원	250	-	-	250	2017	2017	-
동두천시민회관 리모델링	6,000	-	-	6,000	2021	2017	-
제4회 크리스마스 트리 축제	293	-	-	-	2016	2016	100
산림휴향형MTB체험단지조성	18,610	-	5,681	12,929	2019	2015	95% (실시설계)
놀자숲 조성	17,030	-	4,200	12,830	2018	2016	85% (실시설계)
6산 절경을 활용한 숲길조성	3,690	-	1,000	2,690	2018	2015	60% (공사)
소요산산림욕장 확대개발	18,790	391	5,236	13,163	2019	2013	100% (실시설계)

‣ 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

동두천 락페스티벌 개최 지원

담당자

문화체육과 이득만(☎2063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 최초 락 발상지인 경기북부 동두천에 활력소를 불어넣어 줄 젊음의 상징이자 미래의 콘텐츠로 한류원조 동두천 K-ROCK 페스티벌을 개최하여 대한민국 최장수 락 페스티벌의 명성을 이어나가고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 8월

○ 위 치 : 한미우호의 광장

○ 규 모 : 약 1,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  250백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기 투자	‘16년	‘17년	‘18년 이후
계	250	-	-	250	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	125	-	-	125	-
시군구비	125	-	-	125	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 홍보(TV, 인터넷 블로그‧카페 등, 지하철 광고, 현수막, 포스터, 전단 등)

○ 안전 : 재해대처계획 수립 및 안전관리위원회 심의 등

□ 향후계획

○ 오랜 기간 주둔하고 있는 주한미군과 지역 주민이 함께 참여할 수 있는 행사를 개최하여 상호 간의 교류를 강화하는 기회를 제공하고 지역사회 안정화에 기여하고자 함

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 해당 없음

사업명

동두천시민회관 리모델링

담당자

문화체육과 이득만(☎2063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화 된 시미회관을 리모델링해 시민의 문화예술에 대한 기본권인 문화 향유권 보장 및 시민 정주여건 개선 도모

□ 사업개요

○ 부지면적 : 16,850㎡

○ 연 면 적 :  6,080㎡ (지상 2층/지하 1층)

○ 사 업 량 : 동두천시민회관 지상 2층, 지하1층, 옥상층,

외부(외벽, 창호, 가설공사), 설비(기계, 전기, 통신, 소방) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기 투자	‘16년	‘17년	‘18년 이후
계	6,000	-	-	-	6,000
국 비	2,000	-	-	-	2,000
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	-	-	-	4,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 2017. 2. 시민회관 리모델링 사업 중기지방재정계획 반영

○ 2017. 7. 투자심사 적정

□ 향후계획

○ ‘문화예술회관 건립지원 사업 사전평가’ 심사 및 지역발전특별회계 도 자율편성사업(보조율 최대70%) 등 참여

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 해당 없음

사업명

제4회 크리스마스트리 축제

담당자

지역경제과 천세환

(☎860-2278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심의 경우 전통시장 4개소 및 상점가가 밀집되어 있으나, 대형마트에 비해 열악한 환경과 주택과의 거리가 멀리 떨어져 있어 차별화전략이 대두되고 있음.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6월~12월

○ 위 치 : 동두천큰시장로터리~보산동 관광특구 입구

○ 규 모 : 트리 공원조성 1곳, 조형물 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 293백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기 투자	‘16년	‘17년	‘18년 이후
계	293	-	293	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	133	-	133	-	-
시군구비	133	-	133	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	27	-	27	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2016. 11. : 축제 지원계획, 지방재정 투자심사 등 행정절차 완료

○ 2016. 12. : 크리스마스 트리 축제 완료

사업명

산림휴양형 MTB체험단지 조성

담당자

투자개발과 유재란(☎860-2586)

□ 사업목적 및 필요성

○ 왕방산 국제MTB대회와 연계한 산림휴양형 MTB체험단지(MTB로 특화된 자연휴양림)를 4계절 숙박·휴양·체험이 가능한 산림관광 기반시설 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 10.

○ 위 치 : 탑동동 산18번지 일원

○ 규 모

- 휴양시설 : 숲속 휴양관, 숲속의집, 야생화단지, 물놀이장 등 조성

- 교육시설 : MTB학교, 숲속교실, 산약초 체험장 등 조성

- 체육시설 : MTB코스 신설 및 다운 힐 코스 개발, BMX(자전거 묘기장) 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,610백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기 투자	‘16년	‘17년	‘18년 이후
계	18,610	-	5,681	3,744	9,185
시 도 비	13,958	-	4,261	2,808	6,889
시군구비	4,652	-	1,420	936	2,296

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 95%)

○ 2015. 7. : 중앙투자심사 통과(행정자치부)

○ 2016.12. : 주민설명회 개최, 용역중지 추진, 토지매입(97%) 추진

○ 2017. 6. : 경기도 건설기술심의 완료, 소규모 환경영향평가협의 추진, BF예비인증 접수

○ 2017. 7. : 휴양림 조성계획 승인 및 사전재해 영향성검토 추진

□ 향후계획

○ 2017.  8. 경기도 계약심사 추진

○ 2017.  9. 기본·실시설계용역 준공

○ 2017.  9.∼2019.  9. : 공사 추진

○ 2019. 10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 사항 없음

사업명

놀자숲 조성

담당자

투자개발과 백수현(☎860-2583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 4계절 전 연령대가 즐길수 있는 새로운 초대형 숲 놀이터 조성으로 수도권의 가족단위 방문객 유치가 가능한 동두천시 대표 관광지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 10. ~ 2018. 10.

○ 위 치 : 동두천시 탑동동 산33번지 일원

○ 규 모

- 모험의숲 : 숲 모험시설(에코 어드벤처) 조성

- 놀이의숲 : 네트 어드벤처, 포레스트 슬라이드, 트리하우스, 숲속 놀이터 등 조성

- 놀자센터 : 클립앤클라임, 실내 어드벤처, 실내 네트, 푸드 코트 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,030백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기 투자	‘16년	‘17년	‘18년 이후
계	17,030	-	4,200	12,830	-
국 비	9,530	-	-	9,530	-
특별조정교부금	7,500	-	4,200	3,300	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 85%)

○ 2016. 11. 중앙투자심사 통과

○ 2017.  3. 대상지 토지매입(100%) 추진

○ 2017.  6. 건축물 경관위원회 개최 및 실시설계 VE 완료

□ 향후계획

○ 2017.  8. : 건축물 구조심의, 경기도 건설기술 심의, 소규모 환경영향평가 협의(7~9월), 사전재해영향성 검토(8∼9월), 건축협의 및 개별법에 의한 인허가 추진(8∼9월)

○ 2017.  9. : 경기도 계약심사 추진  등 및 기본·실시설계준공

○ 2017. 10. ∼ 2018. 9. : 공사 추진

○ 2018. 10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
총사업비	12,400백만원	17,030백만원

사업명

6산절경을 활용한 숲길 조성

담당자

투자개발과 박관섭(☎860-2582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계절적으로 관리되고 있는 6산을 하나의 스토리텔링으로 연계하여 수도권 제일의 등산코스로 도시 브랜드의 가치 상승에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 11.

○ 위 치 : 동두천시 6산(소요·마차·칠봉·해룡·왕방산·국사봉)

○ 규 모

- 전망시설 : 전망대, 데크, 포토존 등

- 등산시설 : 트래킹, 샛길, 야생화길

- 시설정비 : 기 조성된 숲길정비

- 기    타 : 스토리텔링, 진입광장, 안내시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,690백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기 투자	‘16년	‘17년	‘18년 이후
계	3,690	-	1,000	1,390	1,300
국 비	2,952	-	800	1,112	1,040
시군구비	738	-	200	278	260

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  공사 60%)

○ 2015.  7. 지방재정투자심사 완료

○ 2016.  8. 설계용역 완료

○ 2016. 11. 공사 착수

○ 2017.  5.∼6.  공사추진 및 헬기 자재운반 추진

□ 향후계획

○ 2017.  9. 1차 공사 준공

○ 2018.  6. 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
총사업비	3,300백만원	3,690백만원

사업명

소요산 관광벨트화 연계구축

담당자

투자개발과 강성규(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 산림욕장에 다양한 기능을 부여한 공원으로 확대 조성하여 주변 관광 자원과의 연계를 통한 시너지 효과 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.~2019.

○ 위 치 : 동두천시 상봉암종 산 21번지 외 33필지

○ 규 모  : 목재문화체험장, 숲속의 집 및 캠핑장, 유아 숲 체험원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,790백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기 투자	‘16년	‘17년	‘18년 이후
계	18,790	391	5,236	4,967	8,196
시 도 비	12,293	293	3,927	2,600	5,473
시군구비	6,497	98	1,309	2,367	2,723

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2013. 10. 중앙 투·융자심사 완료

○ 2016.  7. 공원조성계획 확정 지형도면 고시

○ 2017.  5. 실시계획인가 승인

○ 2017.  6. 경기도 계약심사 및 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2017.  7. : 공사 발주 및 착공

○ 2019.  7. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
총사업비	23,000백만원	18,790백만원