9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 동두천시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
생연2동 주민센터 신축	3,145	2017. 1. ∼ 2017. 12.	주민센터

생연2동 주민센터 신축사업

- 단계 : 준공 -

회계과 최유선 860-2176

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	경기도 동두천시 생연로 95
	인구 수	착공일	준공일
		12,236명(2017. 3. 2.)	11,997명(2017. 12. 28.)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		9명/10명	11명/12명
	재정자립도	착공일	준공일
		13.48%	14.17%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	1993.9.23			816㎡						932.32㎡			지1/지상3
	본청
	의회
	주민센터	1993.9.23			816㎡						932.32㎡			지1/지상3
	청사신축 필요성			기존 주민센터 노후화 및 지구단위계획구역 편입
	사업기간			착공			2017. 3. 2.
				준공			~ 2017. 12. 28. (9개월)
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 일반경쟁입찰
	추정(예정)가격			계약금액						3,123백만원			낙찰율			약 87 %
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계		2017년			844㎡						1,283.87㎡			지상4층
	본청
	의회
	기타		2017년			844㎡						1,283.87㎡			지상4층		주민센터

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	3,440						3,440
	Y-3 이전
	Y-2
	Y-1	1,140						1,140
	준공연도(Y)	2,300						2,300
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비		-		-		-		-
	2) 설계비						120
	3) 감리비								39
	4) 공사비								2,913
	5) 기타부대비								51		각종 인입비 및 수수료

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2015. 11	반영	자체
	타당성 조사	해당없음	-	자체
	투융자심사	2016. 2.	-	경기도
	공유재산관리계획	2015. 9.	-	지방의회
	설계	2016. 10.	-	자체
	착공	2017. 3. 2.	-	자체
	준공	2017. 12. 28.	-	자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	2,913,235,416
	단위비용(원/㎡)	2,270,643
	점유율(%)	100%
건 축	금액(원)	2,253,966,226	※기계, 토목, 조경 포함 승강기, 저수조, 위생설비 등
	단위비용(원/㎡)	1,756,794
	점유율(%)	77%
전 기	금액(원)	309,872,080	태양광 발전장치
	단위비용(원/㎡)	241,521
	점유율(%)	11%
통 신	금액(원)	279,924,480	음향기기, CCTV 설비
	단위비용(원/㎡)	218,180
	점유율(%)	10%
소 방	금액(원)	55,157,630	소방시설
	단위비용(원/㎡)	42,991
	점유율(%)	1.5%
폐기물처리	금액(원)	14,315,000
	단위비용(원/㎡)	11,157
	점유율(%)	0.5%