109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
제18회 동두천 청소년 별자리 과학축제	120	-	120	120	120	-	2018	100%
전통시장 활성화를 위한 공영주차장 조성사업	8,000	-	-	5,100	2,900	2021	2018	0.75%
5060 청춘로드 조성사업	6,700	245	560	1,500	4,395	2020	2017	34%
외국인관광특구 특화거리 환경개선사업	4,122	-	375	2,853	894	2020	2018	40%
DDC 할로윈 축제	290	-	290	-	-	2018	2017	100%
생연초 실내체육관 증축사업	2,800	-	-	1,800	1,000	2020	2018	10%
소요동8통 마을 진입도로 개설	3,820	3,000	2,600	820		2020.2.	2018	40%
동두천락페스티벌	500		500				2018	100%
국제 트레일러닝 대회	175	0	175	0	0	2018	2018	100%
보건소 별관 (치매안심센터) 신축	2,600	900	1	1,699	-	2019	2018	10%
6산 절경을 활용한 숲길조성	3,954	3,954	1,312	-	-	2019	2016	90%
경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업	11,000	2,600	154	3,600	4,800	2020	2018	5%
치유의 숲 조성	2,000	200	113	1,800		2020	2017	30%
소요동행정복지센터 신축	5,459	-	-	800	4,659	2020	2018	3%
어등산 건강·힐링 체험숲 조성	2,840	-	-	2,840	-	2019	2018	30%
생연 및 상패 근린공원 조성	6,600	-	-	2,800	3,800	2022	2018	10%
우리동네 주민쉼터 조성	2,000			750	1,250	2021	2018	0%
국도3호선(창말고개)~안흥IC 연결공사	20,000	204	561	3	19,232	2021	2016	20
시가지전선 지중화사업	3,913	2,007	1,754	152	-	2019	2016	96
소요산 박스암거 보수·보강 공사	3,400	1,600	20	1,800	-	2020	2017	5
부처고개 위험도로 구조개선사업	7,500	38	2	97	7,363	2021	2017	10
어수로 도로확장사업	18,700		1,248	3,681	13,771	2022	2018	26
동원베네스트~일신건영아파트간 도로개설사업	4,180	1,547	1,913	720	-	2019	2018	100
소요교 보수보강	3,200			353	2,147	2020	2018	11

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제18회 동두천

청소년별자리 과학축제

담당자

여성청소년과 고용수

031)860-2857

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년을 위한 우수 과학문화 확산과 미래 과학인재 양성을 위한 경기 북부

지역을 대표하는 청소년 과학 축제로 자리매김하며, 건전한 청소년 놀이문화

조성에 기여하고 우주과학에 대한 이해 증진의 장으로 삼고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. 13.(토) 10:00~22:00

○ 위 치 : 종합운동장 주경기장

○ 규 모 : 80여개의 과학체험 부스 운영, 17개 청소년 공연팀 장기자랑 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	120		120	120	120
국 비
시 도 비	15		15	15	15
시군구비	85		85	85	85
지 방 채
민간자본	20		20	20	20
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 약 20,000여명의 관내 초중고교생 및 학부모, 교사, 일반 시민 등이 참여하여

성황리에 종료

□ 향후계획

○ 지속 추진 예정(경기 북부지역을 대표하는 청소년 과학 축제로 자리매김)

사업명

전통시장 활성화를 위한

공영주차장 조성사업

담당자

일자리경제과 최정열 031)860-2278

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 및 골목상권 등 원도심 경제 활성화

○ 전통시장 주변 주차난 해소로 인접 교통소통의 원활화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ∼ 2021. 12.

○ 위 치 : 생연동 698-23번지 일원(농협하나로마트 옆)

○ 규 모 : 건축식 공용주차장 1개소 1식(지상 2층, 4,836㎡, 90면 규모)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,000			5,100	2,900
국 비	3,000			3,000
시 도 비
시군구비	5,000			2,100	2,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.75%, *집행률 기준)

○ 2017. 10. : 발전종합계획 확정

○ 2018.  1. : 중기지방재정계획 반영

○ 2018.  3. : (도)투자심사 완료

○ 2018. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 고시

○ 2019.  2. : 실시설계용역 완료

○ 2019.  7. : 실시계획인가 완료

□ 향후계획

○ 2019. 7.～2020. 3. : 토지보상 및 취득

○ 2020. 4.～2020. 7. : 공사 (착)준공

사업명

두드림 5060 청춘로드 조성

담당자

전략사업과 김도연 031)860-2725

□ 사업목적 및 필요성

○ 생연동 일원의 지역공동화 문제 해결 및 원도심 경제 활성화 등

지역개발의 구심점 역할을 할 수 있는 특화거리 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9.∼2020. 12.

○ 위 치 : 생연동 원도심 일원(생연로∼동광극장)

○ 규 모 : 1㎞구간 특화거리 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,700	245	560	1,500	4,395
국 비
시 도 비
시군구비	6,700	245	560	1,500	4,395
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 34%)

○ 2017. 12.∼2018. 9. : 청춘로드(1, 2, 3구간) 기본 및 실시설계 용역

○ 2018.  3.∼9. : 청춘로드(1구간) 하수관로 공사완료

○ 2018. 5.∼2019. 3. : 청춘로드(1구간) 건물 간판⋅파사드 설계 용역 완료

○ 2018.  3.∼2019. 8. : 청춘로드(1구간) 전선 지중화 완료

□ 향후계획

○ 2019. 6.∼2020. 6. : 청춘로드(1구간) 건물 간판⋅파사드 공사 추진

○ 2019.  10.∼2020. 10. : 청춘로드(2구간) 전선지중화 공사 추진

○ 2018. 12.∼2020. 12. : 청춘로드 거리조성 공사 추진(1, 2, 3구간)

사업명

외국인관광특구 특화거리 환경개선사업

담당자

전략사업과 김윤세 031)860-2627

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 이전에 따른 미군 주둔지역 주변 도심지 공동화 현상 발생

○ 외국인관광특구 특화거리 환경개선사업을 통한 도시미관 재조정 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 보산동 429-19번지 일원 (외국인관광특구)

○ 규 모 : 관광특구(45,000㎡) 내 공공편의시설 개선사업 추진

- 경관조명 거리, 소규모 휴게쉼터 조성, 편의시설 등 환경개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,587백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,587		1,664	1,564	894
국 비	2,870		1,331	1,251	715
시 도 비
시군구비	717		333	313	179
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018년) 공공편의시설 확충 : 공공화장실(1), 조형물(2)

○ 2019년) 경관조명 거리조성 디자인개발 완료 및 착수 준비

휴게쉼터 조성사업 추진(부지매입 중)

관광특구 내 야외무대 및 근린공원 주변 정비공사(공사 중)

□ 향후계획

○ 경관조명 거리조성 사업 (2019. 12. 공사완료)

○ 휴게쉼터 조성사업 (2019. 11. 부지매입 완료)

○ 관광특구 내 야외무대 및 근린공원 주변 정비공사 (2019. 10. 공사완료)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 3,587백만원에서 535백만원이 증액 된 4,122백만원으로 변경

○ 사업대상지 내 야외무대 및 근린공원 주변 정비공사 (3,600㎡) 추가

사업명

제2회 DDC 할로윈 축제

담당자

전략사업과 김태우 031)860-2275

□ 사업목적 및 필요성

○ 미군 재배치에 따른 보산동 관광특구 공동화 방지 및 경제 활성화

○ 지역의 문화적 특색을 살린 이색축제 개최로 동두천시 관광자원 구축

○ 미군부대 및 관광특구 관련 부정적 이미지 개선 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. 27.(토) ~ 28.(일)

○ 위 치 : 동두천시 보산동 관광특구 일원

○ 내 용 : 할로윈 퍼레이드, 거리 버스킹, 할로윈 스페셜 콘서트 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	290		290
국 비	-		-
시 도 비	-		-
시군구비	110		110
지 방 채	-		-
민간자본	-		-
기 타	180		180

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 10. 27.(토) ~ 28.(일) 2일간 개최 완료

○ 보산동 관광특구 역사상 가장 많은 방문객인 20,000명(2일간) 유치

□ 향후계획

○ 2019. 10. 26.(토) ~ 27.(일) 제3회 DDC 할로윈 축제 개최 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

생연초 실내체육관 증축사업

담당자

평생교육원 권만혁 031)860-3318

□ 사업목적 및 필요성

○ 미세먼지로부터 안전한 교육환경 구축

○ 학교 구성원과 지역주민이 함께 공유하는 지역사회 중심 공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 동두천시 생골로 19

○ 규 모 : 체육관 증축 773㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,800			1,800	1,000
국 비
시 도 비	1,000			630	350
시군구비	400			270	150
지 방 채
민간자본
기 타	1,400			900	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 07. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2019. 10. : 공사착공 예정

○ 2020. 04. : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 공사준공 변경( 2019. 12. → 2020. 04. )

사업명

소요8통마을진입도로개설공사

담당자

도시재생과 강정훈 031)860-2374

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리시 소요동 8통 일원의 마을도로가 협소하여 주민 통행에 불편이 발생하고 있으며, 도로 옆의 구거로 인해 통행에 위험이 상존하는 실정으로 국도대체우회도로 안흥IC와 연결되는 도로 개설을 통해 지역주민에게 통행 편의와 안전을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 10. ∼ 2020. 2.

○ 위 치 : 동두천시 안흥동 108-4번지 (소요동 8통) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,820
국 비
시 도 비(특조금)	1,500	1,500
시군구비	2,320	1,500		820
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2015. 2. : 국도대체우회도로 접속가능여부 의견 조회

○ 2016. 11 ~ 2017. 5. : 실시계획 용역 추진

○ 2018. 1. : 실시계획 인가 및 보상 추진

○ 2018. 3. : 공사 착공( 구조물 설치 완료)

□ 향후계획

○ 2020. 2. : 공사 완료 예정

□ 사업변경 내역

○ 당초 2,900백만원으로 2017년 심사를 득하였으나 감정평가 결과 보상비가 증가하여 사업비 3,820백만원 당초 사업비 대비 31% 증액됨.

사업명

동두천 락 페스티벌

담당자

문화체육과 이득만 031)860-2063

□ 사업목적 및 필요성

○ 아마추어 락 밴드 등용문이자 현대 실용음악의 발상지인 동두천시의 고유 축제 행사로서, 이를 통해 대중음악의 다양성을 확보하고 새로운 음악 콘텐츠 발굴 및 육성·지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8. 31.(토) ~ 9. 1.(일)

○ 위 치 : 소요산 주차장 특설무대

○ 규 모 : 참가 인원 약 1만 2천 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	500		500
국 비
시 도 비	150		150
시군구비	350		350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 추진 완료

□ 향후계획

○ 전국 최장수 뮤직페스티벌이자 2019년도 경기도 대표관광축제인 ‘동두천 락 페스티벌’ 위상 제고, 락의 본고장 동두천시 위상 공고화

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

국제 트레일러닝 대회

담당자

문화체육과 정해윤 031)860-2209

□ 사업목적 및 필요성

○ 왕방산 MTB대회의 기존 코스를 활용하여 트레일러닝 대회 개최를 지원함으로써 산악 레포츠 대표 도시로서의 이미지 제고 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2018. 4.

○ 위 치 : 동두천시 종합운동장 및 왕방산, 해룡산, 칠봉산, 어등산 일원

○ 규 모 : 1,521명 참가(외국인 29개국 217명 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 175백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계			175
국 비			45
시 도 비			0
시군구비			40
지 방 채			0
민간자본			90
기 타			0

□ 추진상황

○ 2017. 9. ~ 2018. 3. 대회 참가 접수 및 준비

○ 2018. 4. 21. 대회 개최 완료

□ 향후계획

○ 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

보건소 별관(치매안심센터) 신축

담당자

보건소 김복겸 031)860-3375

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매국가책임제(국가시책사업) 시행에 따른 치매안심센터 설치 의무화

○ 치매예방, 상담, 조기진단, 자원 연계 및 교육 등 치매 통합 관리서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 714-10

○ 규 모 : 지상 2층(대지 915㎡, 연면적 710㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,600	900	1	1,699
국 비	300		1	299
시 도 비	40			40
시군구비	2,260	900		1,360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 4. 30. : 경기도 계약심사

○ 2019. 6. 13. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019. 12. 13. : 공사 준공(예정)

□ 사업변경 내역

○ 사업기간

- 당초 : 2018. 9. ~ 2019. 7.

- 변경 : 2019. 5. ~ 2019. 12.

※ 변경사유 : 행정절차(심의, 심사) 이행에 따른 사업 지연

사업명

6산 절경을 활용한 숲길조성

담당자

투자개발과 김욱 031)860-2584

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천시를 둘러싸고 절경을 자랑하는 6산 및 임도를 바탕으로 스토리텔링 작업을 통해 관광지를 연계·개발하여 이야기가 있는 등산코스 및 아름다운 임도 길 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2019.(4년 간 )

○ 위 치 : 동두천시 6산(소요·마차·칠봉·해룡·왕방산, 국사봉)

○ 규 모 : 등산로 50km 및 임도 28km 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,954백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,954	2,390	1,564
국 비	3,163	1,912	1,251
시 도 비
시군구비	791	478	313
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2017.1~2017.12. : 2017년분 공사 추진

○ 2018.1~12. : 국사봉 데크로드, 임도(왕방산, 해룡산) 내 숲속데크 및 전망데크, 이야기벽 설치, 소요산 공주봉 노후 전망데크 교체 등

○ 2019.1.~7.: 소요산 하백운대 노후 데크 계단 교체, 왕방산 탱크바위 진입로 안전시설물 및 쉼터 설치 등

□ 향후계획

○ 2019. 8.~12. : 왕방산 등산로~동두천 자연휴양림 연결 데크로드 조성

○ 2019. 10.~연중 : “이야기가 있는” 동두천 6산 종주 스탬프 투어 추진

○ 2019. 12. : 공사 준공(사업 종료)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ “해당없음”

사업명

경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업

담당자

투자개발과 강성규(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업 기본계획을 수립하여 가족단위 관광객을 위한 관광인프라를 구축 지역경제 및 관광지 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2020.(3년간)

○ 위 치 : 동두천시 상봉암동 8번지 일원

○ 규 모 : 약 210,000㎡(야영장 등 기반시설 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기 투자	‘18년	‘19년	‘20년 이후
계	11,000		2,600	3,000	5,400
국 비	5,500		1,300	1,500	2,700
시 도 비
시군구비	5,500		1,300	1,500	2,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 3. : 경기도 투자사업 심사 완료

○ 2018. 5. : 기본 및 실시설계용역 계약심사 완료

○ 2018. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2019. 11. : 실시설계용역 준공

○ 2020. 3.~12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ “해당없음”

사업명

치유의 숲 조성

담당자

투자개발과 백수현 031)860-2583

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시화로 인한 만성질환과 아토피 등 환경성 질환의 효과적인 치유의 수단으로 산림을 활용하여 심리적 안정과 건강증진 등 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 10.(3년간)

○ 위 치 : 동두천시 탑동동 산26번지 일원

○ 규 모 : 509,654㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000		200	1,800
국 비	1,000		100	900
시 도 비
시군구비	1,000		100	900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2018. 3. : 조성계획수립 및 기본·실시설계용역 착수

○ 2019. 3. : 관광자원화사업 관리운영용역 착수

○ 2018. 4. ~ 2019. 7. : 조성계획 수립 및 기본·실시설계용역(7월말 공정률 90%)

□ 향후계획

○ 2019.  9. : 조성계획 수립 및 기본·실시설계용역 준공

○ 2019. 10. : 공사 착공(건축·토목·조경·기계·전기·통신·소방)

○ 2020. 10. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ “해당없음”

사업명

소요동행정복지센터 신축

담당자

회계과 최유선 031)860-2176

□ 사업목적 및 필요성

○ 협조하고 노후화된 소요동행정복지센터를 신축하여 주민 불편사항을 해소하고       양질의 행정서비스 제공 등 행정복지센터의 역할을 다하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2020. 9.

○ 위 치 : 동두천시 동두천동 262번지 일대

○ 규 모 : 지상1층~3층[연면적 : 약 1,727㎡]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,459백만원(특조금 2,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,459			800	4,659
국 비
시 도 비
시군구비	3,459	-		800	2,659
지 방 채
민간자본
기 타	2,000				2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 용역 중)

○ 2018.  7. : 소요동행정복지센터 신축 건립 계획 수립

○ 2018.  8. :　중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자사업 심사

○ 2018. 11. :　공유재산 관리계획 반영

○ 2019.  2. :　토지매입 및 용역사업수행능력 평가 실시

○ 2019.  3. :　기본 및 실시설계 용역(완료 2019. 8. 21. 예정)

□ 향후계획

○ 2019. 9.~10. :　사업자 선정 및 공사 착공

○ 2020. 9. : 준공(예정)

사업명

어등산 건강·힐링 체험숲 조성

담당자

공원녹지과 이일주 031)860-2471

□ 사업목적 및 필요성

○ 힐링 공간으로 자리매김 할 수 있는 산림치유 거점을 구축하여 시민들에게       양질의 산림복지 서비스 제공

○ 편익시설을 신규 설치하여 건강증진 및 체력단련의 기회 부여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 생연동 산65-3번지 일원(어등산)

○ 규 모 : 숲길 데크로드, 정상 전망대, 벽천분수, 등산로 보행매트 설치

약수터 3개소 정비, 자작나무 숲 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,840백만원(2018년 90백만원 / 2019년 2,750백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,840			2,840
국 비	1,420			1,420
시 도 비
시군구비	1,420			1,420
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2018.  6. : 투융자심사 통과(적정)

○ 2018. 11. : 실시설계용역 착공

○ 2019.  4. : 실시설계용역 준공

○ 2019.  7. : 공사계약 입찰 중

□ 향후계획

○ 2019.  8. : 공사 착공

○ 2019. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

생연 및 상패근린공원 조성

담당자

공원녹지과 정원호 031)860-2413

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 공원 대상지로 2020.7.1.일자 자동실효 고시 방지는 물론 실효에 따른     난개발, 공원감소에 대처하고 공원조성을 통해 생태계 보존 및 부족한 공원확보에     만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2022

○ 위 치 : 생연근린공원(생연동 산53 일원), 상패근린공원(상패동 산16 일원)

○ 규 모 : 177,039㎡(생연103,844㎡ 상패73,195㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,600백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,600	-	-	2,800	3,800
국 비
시 도 비
시군구비	6,600	-	-	2,800	3,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○2019.07.19. : 조성계획수립 및 실시계획인가 용역 착수(진행중)

□ 향후계획

○2019.11.30. : 생연근린공원 토지매입

○2019.12.31. : 조성계획수립 완료

○2020.03.31. : 상패근린공원 토지매입

○2020.05.31. : 실시계획인가 완료

○2022.12.31. : 공원조성 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

우리동네 주민쉼터 조성사업

담당자

건축과 김혜정 031)860-2396

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후주거지의 빈집이 계속 발생하여 주민들이 안전사고에 무방비로 노출되어 있으며, 지역주민이 떠난 후 안전사고 발생 위험 때문에 민원 증대

○ 1년 이상 방치된 빈집(공·폐가)을 정비·철거하여 주민편의시설(동네주차장, 주민쉼터, 공동텃밭 등)을 설치(3년간 사용)하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

○ 위 치 : 동두천시 전역

○ 규 모 : 빈집 60개소 철거

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000			750	1,250
국 비	1,600			600	1,000
시 도 비
시군구비	400			150	250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 2019. 3. : 2019년 사업신청자 26호 접수 중 17호 선정

○ 2019. 8. : 2019년 제1차 빈집 9개소 철거 및 주차장 조성

□ 향후계획

○ 2019.  9. : 2019년 제2차 사업대상 선정

○ 2019. 12. : 2019년 제2차 빈집 철거 및 주민편의시설 조성

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

국도3호선(창말고개)~안흥IC연결공사

담당자

도로과 강문성 031)860-2428

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요산IC와 바로 연결되는 교량 신설을 통하여 국도대체우회도로를 이용하는

운전자들이 교통편의를 증진하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 소요산IC ~ 일반산업단지

○ 규 모 : 신천횡단교량 설치(L=137m, B=20.9m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	20,000	204	561	3	19,232
국 비	10,000	200	501	2	9,297
시 도 비
시 비	10,000	4	60	1	9,935
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2017. 6. ~ 2019. 7. : 실시설계용역 추진

○ 2019. 7. : 공사 발주

□ 향후계획

○ 2019. 9. : 공사 착공 예정

○ 2021.12. : 공사 완료 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 20,000 백만원(당초: 25,000 백만원)

○ 사    유 : 실시설계용역 결과에 따른 공사비 반영

사업명

시가지전선 지중화사업

담당자

도로과 김은창 031)860-2429

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리시에서 유동인구가 가장 많은 지행역사거리~신시가지 사거리 구간을

지중화하여 시가지 미관 및 보행환경 개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 4. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 지행역 앞 신시가지 일원

○ 규 모 : 전선지중화 L=1.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,913	2,007	1,754	152
국 비
도 비	2,935	1,505	1,430
시 비	978	502	324	152
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 96%)

○ 2017. 4. : 전선 지중화사업 확정

○ 2017. 5. : 지중화사업 협약 체결(동두천시↔한국전력공사)

○ 2017. 9. : 지중화사업 협약 체결(동두천시↔통신사)

○ 2018. 8. : 지중화사업 구간 변경 승인(한국전력공사)

○ 2018.12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019.12. : 공사 완료 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업위치 : 생골사거리~지행역사거리~신시가지사거리(L=2.8km)

[당초 : 생골사거리~지행역사거리~GS수퍼마켓 앞(L=1.8km)]

○ 총사업비 : 3,913백만원(당초: 8,000백만원)

○ 사    유 : 사업구간 변경과 한국전력공사 공사비(50%) 별도부담 및

통신사업자 케이블설치공사비 별도부담

사업명

소요산 박스암거 보수·보강 공사

담당자

도로과 김훈 031)860-2289

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요산 진입도로와 주차장 하부 구조물(1981년 설치)의 노후 및 파손이 심각하여(정밀안전진단 결과 “C”등급) 보수 공사를 통해 차량 및 보행자 안전사고 예방 및 우기철 원활한 우수배제를 통한 관광지 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2020

○ 위 치 : 상봉암동 3번지 일원

○ 규 모 : L=958.6m B=2@3X2.5

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,400	1,600	20	1,800
국 비
시 도 비
시군구비	3,400	1,600	20	1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016. 12. : 정밀안전진단(C등급)

○ 2018.  8. : 실시설계용역 준공

○ 2019.  4. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020.  2. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

부처고개 위험도로 구조개선사업

담당자

도로과 강문성 031)860-2428

□ 사업목적 및 필요성

○ 변전소~부처고개간(2공구) 도로개설 구간과 접속되는 부처고개는 도로의

구조․시설기준 미달로 운전자들의 대형 사고 위험방지 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 광암동 부처고개 일원(지방도 364호선)

○ 규 모 : 도로구조개선 L=614m, B=20.5~30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,500	38	2	97	7,363
국 비	2,100	38	2	97	1,963
시 도 비
시 비	5,400				5,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017. 6. ~ 2019. 1. : 실시설계용역 추진

○ 2019. 7. : 보상계획공고

□ 향후계획

○ 2019. 10. : 공사 착공 예정

○ 2021. 12. : 공사 완료 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 7,500백만원(당초 5,800백만원)

○ 사    유 : 실시설계용역 결과에 따른 공사비 반영

사업명

어수로 도로확장사업

담당자

도로과 김은창 031)860-2429

□ 사업목적 및 필요성

○ 생연동 어수사거리∼신천교사거리 구간의 도로를 확장하여 교통사고 예방 및

교통소통의 원활과 도시기반시설 확충으로 지역간 균형발전 및 쾌적한 주거

환경을 조성하고 지역주민의 불편을 해소하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 생연동 어수사거리 ~ 신천교사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=270m, B=14.5 → 20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,700 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	18,700
국 비	9,350		1,248	3,547	4,555
시 도 비
시 비	9,350			134	9,216
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

○ 2018. 5. ~ 2018. 10. : 실시설계용역 추진

○ 2019. 1. : 보상계획공고

○ 2019. 6. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공사 완료 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

동원베네스트 ~

일신건영아파트 간 도로개설사업

담당자

도로과 김은창 031)860-2429

□ 사업목적 및 필요성

○ 동원베네스트아파트 ~ 일신건영휴먼빌2차아파트 간 도로 단절로 인해 아파트

주민들이 교통 불편을 겪고 있는 실정으로, 도시계획도로(중로1-6호선) 개설을

통해 교통성을 확보하여 주민 불편사항을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2019. 5.

○ 위 치 : 지행동 동원베네스트 ~ 일신건영 휴먼빌2차 아파트

○ 규 모 : 도로개설 L=197m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,180	1,547	1,913	720
국 비	1,600	1,547	7	46
도 비
시 비	2,580		1,906	674
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 9. ~ 12. : 실시설계용역 추진

○ 2018. 6. : 공사 착공

○ 2019. 5. : 공사 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 4,180백만원(당초 4,800백만원)

○ 사    유 : 실시설계용역 결과에 따른 공사비 반영

사업명

소요교 보수보강

담당자

도로과 강문성 031)860-2428

□ 사업목적 및 필요성

○ 교량 노후화로 인한 안전사고를 미연에 방지하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 8. ~ 2020. 7.

○ 위 치 : 상봉암동 환경사업소 앞 소요교

○ 규 모 : 교량상판 재가설 및 보수 L=120m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,200			353	2,847
국 비
도 비
시 비	3,200			353	2,847
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

○ 2018.11. ~ 2019. 5. : 실시설계용역 추진

○ 2019. 8. : 공사 착공 예정

○ 2020. 7. : 공사 완료 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 3,200백만원(당초 2,500백만원)

○ 사    유 : 실시설계용역 결과에 따른 공사비 반영