109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
전통시장 공영주차장 조성사업	6,000		868	5,132		2020	2018	13
산악레포츠 구간정비 사업	2,190	4	701	1,485		2020	2019	68
어등산 건강·힐링 체험숲 조성	2,840		2,756			2019	2018	100
생연지구 내 학교용지 토지매입	17,000		16,822			2019	2019	100
상패근린공원 조성사업	5,779		372	3,000	2,407	2022	2019	43
생연근린공원 조성사업	6,735		3,228	3,507		2019	49
강변도로(1구간) 구조물 보수보강 공사	2,250	692	1,558			2019	2019	100
신천교 및 승전교 내진보강 공사	3,300		364	2,936		2020	2019	50
강변도로(2구간) 구조물 보수보강 공사	2,700		75	1,625	1,000	2021	2019	5
동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업	3,800	40			3,760	2022	2019	5
지행동~시가지우회도로 연결사업	14,000	54		100	13,846	2023	2019	10
국도3호선 도로확포장공사 (송내동)	19,000		96	204	18,700	2023	2019	5
소요동8통 마을진입도로 개설공사	3,820	2,554	1,046	200		2020.5.	2018	90
우리동네 주민쉼터 조성	2,000		588	873	539	2021년	2018	50
6산 절경을 활용한 숲길 조성	4,703	3,561	757	385		2020	2018	98%
치유의 숲 조성	4,000	113	80	2,003	1,804	2021	2019	40%
경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업	11,000		166		10,834	2022	2018	5
캠프 소요 in 경기	4,000				4,000	2022	2019	5
보건소 별관 (치매안심센터) 신축	1,924	19	1,818	87		2020.	2018.	95

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전통시장 활성화를 위한

공영주차장 조성사업

담당자

일자리경제과 최정열 031)860-2278

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 및 골목상권 등 원도심 경제 활성화, 주차난 해소로 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1.∼2021. 12.

○ 위 치 : 생연동 698-23번지 일원(농협하나로마트 옆)

○ 규 모 : 건축식 공용주차장 1개소 1식(지상 2층, 4,836㎡, 90면 규모)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,000		868	7,132
국 비	3,000		434	2,566
시 도 비
시군구비	5,000		434	4,566
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%, *집행률 기준)

○ 2017. 10. : 발전종합계획 확정

○ 2018.  3. : (도)투자심사 완료

○ 2018. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 고시

○ 2019.  7. : 실시계획인가 완료

○ 2019.  9.~11. : 감정평가 및 (1~2차) 협의보상 실시

□ 향후계획

○ 2020. 5. : 수용재결 완료(수용개시)

○ 2020. 6.~10. : 공사 착·준공

□ 사업변경 내역

구 분	변경 전	변경 후
총사업비	8,000백만원(국 3,000, 시 5,000)	6,000백만원(국 3,000, 시 3,000)
사업규모	건축식 공용주차장 1개소 1식 (지상 2층, 4,836㎡, 90면 규모)	지평형 공영주차장 1개소 [2,369㎡(주차장 2,147, 도로 222), 69면]
사업기간	2018. 1.∼2021. 12.	2018. 1.∼2020. 10.

사업명

산악레포츠 구간정비 사업

담당자

문화체육과 장영균(☎860-2144)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 우리시에서 개최하는 동두천 왕방산 전국 MTB 대회 및 국제 트레일러닝 대회 구간 인 오지재 고개는 왕방산과 해룡산 사이를 관통하는 지방도 364호선으로 인해 대회 구간이 단절되어 지속적으로 대회참가자 및 관광객이 사고 위험에 노출되어 있어 안전사고 위험을 미연에 방지하고 산악레포츠의 명소로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5.∼2020. 12.

○ 위 치 : 탑동동 산 40-1번지 외 3필지 일원

○ 규 모 : 교량 1개소 신설(L=50m, B=5m), 임도 연결(L=170m, B=4∼33m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,190	4	701	1,485
국 비	815		638	177
시 도 비
시군구비	1,375	4	63	1,308
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  68%)

○ 2020. 3. : 토지이전등기 완료 및 공사 재착공

○ 2020. 6. : 배수로 공사 및 구조물 터파기 완료

□ 향후계획

○ 2020. 12. 이전 공사 준공 계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

어등산 건강·힐링 체험 숲 조성

담당자

공원녹지과 이일주(☎860-2471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건강·힐링 공간으로 자리매김 할 수 있는 산림치유 거점을 구축해 지역       주민에게 양질의 산림복지 서비스 제공

□ 사업 개요

○ 기 간 : 2018. 5. ～ 2019. 12.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 산65-3번지 일원

○ 규 모 : 11,700㎡(3,539평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,840	-	2,840
국 비	1,420		1,420
시 도 비
시군구비	1,420		1,420
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018.  5. : 현지조사 및 조성 계획서 작성

○ 2019.  4. : 공사 착공

○ 2019.  12. : 공사 준공

□ 향후 계획

○ 2020. : 시설관리 및 유지보수

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

생연지구 내 학교용지 토지매입

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생연지구 내 유휴부지로 남아있는 학교용지를 공공시설 용지로 매입하여

도시 활성화 및 시민 복지향상에 기여

□ 사업 개요

○ 대 상 지 : 동두천시 생연동 715-5, 생연동 715-6번지

○ 면    적 : 26,690.8㎡

○ 소유자(매도인) : 한국토지주택공사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	17,000		17,000
국 비
시 도 비
시군구비	17,000		17,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 4.  3. : 생연지구 내 학교용지 토지매입 계약체결

○ 2019. 5. 10. : 도시관리계획 결정 고시

○ 2019. 5. 13. : 잔금지급 및 소유권 이전

□ 향후 계획

○ 2020. : 시설관리 및 유지보수

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

생연근린공원 조성사업

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 공원 대상지로 2020. 7. 1.일자로 자동실효 방지 및 실효에 따른

난개발, 공원감소에 대처하고 공원조성을 통해 생태계 보존 및 부족한

공원확보에 기여.

□ 사업 개요

○ 기    간 : 2019. ∼ 2021.

○ 대 상 지 : 생연근린공원(동두천시 생연동 산53번지 일원)

○ 규    모 : 103,844㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,735백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,735		3,228	3,507
국 비
시 도 비	6,735		3,228	3,507
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(용역 95%, 토지보상 47%, 공사 7%)

○ 2018. 12.    : 사업 추진계획 수립

○ 2019. 7. 19. : 조성계획수립 및 실시계획 인가 용역 착수(진행 중)

○ 2019.  9.    : 보상계획 공고

○ 2019. 10.    : 감정평가 완료

○ 2019. 11. ∼ : 생연근린공원 토지매입(진행 중)

○ 2020.  3. 12. : 공원조성계획(변경) 결정 고시

○ 2020. 6. 25. : 도시계획시설 실시계획인가 고시

□ 향후 계획

○ 2020. 7. ∼ : 토지매입 협의취득 지속

○ 2020. 8.    : 생연근린공원 조성사업 착수

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

상패근린공원 조성사업

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 공원 대상지로 2020. 7. 1.일자로 자동실효 방지 및 실효에 따른

난개발, 공원감소에 대처하고 공원조성을 통해 생태계 보존 및 부족한

공원확보에 기여.

□ 사업 개요

○ 기    간 : 2019. ∼ 2022.

○ 대 상 지 : 상패근린공원(동두천시 상패동 산16번지 일원)

○ 규    모 : 73,195㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,779백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,779		372	3,000	2,407
국 비
시 도 비	5,779		372	3,000	2,407
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(용역 95%, 토지보상 35%, 공사 -%)

○ 2018. 12.    : 사업 추진계획 수립

○ 2019. 7. 19. : 조성계획 수립 및 실시계획 인가 용역 착수(진행 중)

○ 2019. 12.    : 보상계획 공고

○ 2020.  4.    : 감정평가 완료

○ 2020.  3. 12. : 공원조성계획(변경) 결정 고시

○ 2020.  5. ∼ : 생연근린공원 토지매입(진행 중)

○ 2020. 6. 25. : 도시계획시설 실시계획인가 고시

□ 향후 계획

○ 2020. 7. ∼ : 토지매입 협의취득 지속

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

신천교 및 승전교 내진보강 공사

담당자

도로과 박철희(☎2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정밀안전진단 결과(B등급) 교량의 상부구조물 파손, 철근노출, 균열발생 등       구조물의 안전성에 영향을 미치는 손상이 발결되어 보수·보강이 시급한 상황임.

○ 보수보강을 통하여 도로교량을 이용하는 시민들에게 안전한 기반시설을       제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 12. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 신천교, 승전교

○ 규 모 : 교량 보수·보강(신천교 L=164m, B=15m, 승전교 L=140m, B=9m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,300		364	2,936
국 비
시 도 비	312			312
시군구비	2,988		364	2,624
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 10. 공사 착공(신천교)

○ 2020.  3. 공사 착공(승전교)

○ 2020.  6. 공사 준공(신천교)

□ 향후계획

○ 2020.  9. 공사 준공(승전교)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

강변도로(2구간) 구조물 보수보강 공사

담당자

도로과 박철희(☎2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정밀안전진단 결과(B등급) 교량의 상부구조물 파손, 철근노출, 균열발생 등       구조물의 안전성에 영향을 미치는 손상이 발결되어 보수·보강이 시급한 상황임.

○ 보수보강을 통하여 도로교량을 이용하는 시민들에게 안전한 기반시설을       제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 강변도로 2구간(원터교~상패교)

○ 규 모 : 교량 보수·보강 L=664m, B=16m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,700		75	1,625	1,000
국 비
시 도 비	360			360
시군구비	2,340		75	1,265	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 12. 실시설계용역 완료

○ 2020.  6. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 12. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업물량 및 사업비는 변경 없으나 교량하부 기초확대 공정은 서울청에서 시행중인 신천 하천환경정비사업과 저촉으로 서울청과 사업 위수탁 추진 중

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업

담당자

도로과 김재상(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천중앙역 주변 보행환경 개선을 위하여 생연동 제일산부인과 사거리 ~부영5단지 사거리까지 도로를 확장하여 도시기반시설 확충으로 지역주민의 불편을 해소 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 생연동 제일산부인과 사거리~부영5단지 사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=159m, B=8→15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,800	40			3,760
국 비	2,700	0			2,700
시 도 비
시군구비	1,100	40			1,060
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 4. 25. : 투자심사 실시(동두천시, 적정)

○ 2019. 10. 4. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 6. : 실시설계용역 준공 예정

○ 2021. 1. ~ 12. : 보상 추진 예정(사업비 확보시)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

지행동~시가지우회도로 연결사업

담당자

도로과 최제호(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지행동 에코휴먼빌2차 아파트부터 송내동 시가지우회도로 연결도로를 설치하여 도시기반시설 확충으로 지역주민의 불편을 해소 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 지행동 에코휴먼빌2차 아파트~송내동 시가지우회도로

○ 규 모 : 도로확장 L=502m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,000	54		100	13,846
국 비	6,000				6,000
시 도 비
시군구비	8,000	54		100	7,846
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 10. 4. : 실시설계용역 착수

○ 2020. 3. 31. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2021. 1. ~ 12. : 보상 추진 예정(사업비 확보시)

사업명

국도3호선 도로확포장공사(송내동)

담당자

도로과 최제호(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도3호선 송내동 구간의 기존 4차선을 6차선으로 확장하여 시가지 교통정체 해소 및 교통사고 예방을 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 8. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 송내삼거리~송내안골 사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=1.0km, B=20→35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,000		96	204	18,700
국 비
시 도 비
시군구비	19,000		96	204	18,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 8. 29. : 투자심사 실시(동두천시, 적정)

○ 2019. 11. 14. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 실시설계용역 완료 예정

○ 2021. 1. ~ 12. : 보상 추진 예정(사업비 확보시)

사업명

소요8통마을진입도로개설공사

담당자

도시재생과 강정훈 031)860-2374

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리시 소요동 8통 일원의 마을도로가 협소하여 주민 통행에 불편이 발생하고 있으며, 도로 옆의 구거로 인해 통행에 위험이 상존하는 실정으로 국도대체우회도로 안흥IC와 연결되는 도로 개설을 통해 지역주민에게 통행 편의와 안전을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 10. ∼ 2020. 5.

○ 위 치 : 동두천시 안흥동 108-4번지 (소요동 8통) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,820
국 비
시 도 비(특조금)	1,500	1,500
시군구비	2,320	1,054	1,046	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2015. 2. : 국도대체우회도로 접속가능여부 의견 조회

○ 2016. 11 ~ 2017. 5. : 실시계획 용역 추진

○ 2018. 1. : 실시계획 인가 및 보상 추진

○ 2018. 3. : 공사 착공( 구조물 설치 완료)

○ 2018. 11.: 도로 아스콘 포장 완료 및 부대시설 설치 완료

□ 향후계획

○ 2020. 5. : 공사 완료 예정

□ 사업변경 내역

○ 당초 2,900백만원으로 2017년 심사를 득하였으나 감정평가 결과 보상비가 증가하여 사업비 3,820백만원 당초 사업비 대비 31% 증액됨.

사업명

우리동네 주민쉼터 조성사업

담당자

건축과채미정(☎860-2396)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 주거지의 빈집이 계속 발생하여 주민들이 안전사고에 무방비로 노출되어 있으며, 지역주민이 떠난 후 안전사고 발생 위험 때문에 민원 증대

○ 1년 이상 방치된 빈집(공·폐가)을 정비·철거하여 주민편의시설(동네주차장, 주민쉼터, 공동텃밭 등)을 설치(3년간 사용)하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. 1.∼2021. 12. 31.

○ 위 치 : 동두천시 전역

○ 규 모 : 빈집 60개소 철거

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000		588	873	539
국 비	1,600		588	581	431
시 도 비
시군구비	400		-	292	108
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○ 2019.  8. : 2019년 제1차 빈집 9개소 철거, 주차장 9개소 조성

○ 2019. 12. : 2019년 제2차 빈집 8개소 철거, 주차장 5개소·텃밭 3개소 조성

○ 2019. 12. : 2019년 제3차 빈집 7개소 철거, 주차장 8개소 조성

○ 2020.  5. : 2020년 제1차 빈집 10개 철거, 주차장 10개소 조성 추진 중

□ 향후계획

○ 2020.  7. : 2020년 제2차 빈집 10개소 철거, 주차장 8개소·텃밭 4개소 조성 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

6산 절경을 활용한 숲길조성

담당자

투자개발과 홍성철(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 숲길 조성·관리 및 위험구간 개선 등 6산의 아름다운 절경을 활용하여        시민 생활환경 개선 및 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.∼2020. 12.

○ 위 치 : 동두천시 6산 (소요산, 마차산 등)

○ 규 모 : 등산로 50km 임도 28km 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,600	3,561	757	277	-
국 비	3,700	2,849	606	245	-
시 도 비
시군구비	900	712	151	37	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 6산 절경 임도 및 등산로 개선(데크로드 및 전망데크, 상징물설치 등) 완료

○ 노후 등산로 및 위험구간 개선 완료(왕방산 탱크바위 등)

□ 향후계획

○ 왕방산 일원 숲길 개선공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 당초 4,600백만원(국비 3,700 시비 900) 변경 4,703백만원(국비3,760 시비943)

○ 증 103백만원

○ 노후 구조물 및 위험구간 안전사고방지 시설물 설치 및 왕방산 등산로와 임도 사이의 단절구간 연결 작업 추진을 위한 추가사업비 반영

사업명

치유의 숲 조성

담당자

투자개발과 홍성철(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천시 우수한 산림자원을 활용, 산림 치유인자를 활용한 숲속 치유공       간을 조성하여, 시민 생활환경 개선 및 산림 치유공간에 대한 시민수요에       부응하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.∼2021. 5.

○ 위 치 : 동두천시 탑동동 산26 일원

○ 규 모 : 500,035㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500	113	80	2,003	1,804
국 비	1,000	57	40	903
시 도 비	1,000			200	800
시군구비	3,500	56	40	900	1,004
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020. 2. 13. : 치유의 숲 조성계획 승인

○ 2020. 4. 29. : 치유의 숲 조성계획 및 실시설계 용역 준공

○ 2020. 6. 23. 기준 : 공사업체 선정에 따른 적격심사 추진중

□ 향후계획

○ 2020. 7.∼2021. 5. : 치유의 숲 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 5,500백만원(국비 1,000 도비 1,000 시비 3,500)

변경 4,000백만원(국비 1,000 특별조정교부금 900 도비 1,000 시비 1,100)

○ 감 1,500백만원

○ 공유재산(토지) 1,500백만원 부분 제외, 특별조정교부금 확보에 따른 시비 900백만원 삭감.

개별 투자심사 사업 추진현황

- 사업별로 별지 작성

사업명

경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업 기본계획을 수립하여 가족단위 관광객을 위한 관광 인프라를 구축 지역경제 및 관광지 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.∼2022.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 산41번지 일원

○ 규 모 : 약 210,000㎡ (사계절 썰매장 및 작은식물원, 숲길조성, 야영장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,000		166		10,834
국 비	5,417		83		5,417
시 도 비
시군구비	5,417		83		5,417
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 3. : 경기도 투자사업 심사 완료

○ 2018. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 3.∼12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초(A=19,618㎡), 현재(A=210,000㎡)

○ 사업기간 : 당초(2018.∼2019.), 현재(2018.∼2022.)

개별 투자심사 사업 추진현황

- 사업별로 별지 작성

사업명

캠프 소요 in 경기

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요산은 동두천에 가장 많은 관광객이 찾는 곳으로 관광인프라 부족과 가족단위 숙박시설이 부족하여 지역경제 활성화로 이어지지 못하고 있는 실정이기에, 자유수호평화박물관 인근 역사공원 부지를 개발하여 고용 및 소득 증대에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2022.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 산41번지 일원

○ 규 모 : 자연공원 조성 11,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000				4,000
국 비
시 도 비	2,000				2,000
시군구비	2,000				2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 11. : 경기도 투자사업 심사 완료

○ 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 3.∼12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초(2019.∼2021.), 현재(2019.∼2022.)

사업명

보건소 별관(치매안심센터) 신축

담당자

보건소 김복겸(☎860-3375)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대통령 치매국가책임제 공약에 따른 치매안심센터 설치 의무화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 11. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 거북마루로 49

○ 규 모 : 지상 2층(부지 915.3㎡, 연면적 710.24㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,924백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,924	19	1,818	87
국 비	360	17	343
시 도 비	1,045	2	956	87
시군구비	519		519
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(진도 : 95%)

○ 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 및 기타 부대시설 보완 공사 중

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 준공(사업완료)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음