9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 동두천시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
소요동 행정복지센터 신축	5,459	2018. 8. ~ 2020. 12.(29개월)	기타 (행정복지센터)

▸ 대상사업 : ‘20년 준공된 사업

소요동 행정복지센터 신축사업

- 단계 : 준공 -

회계과 김종헌 031-860-2176

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	경기도 동두천시 동두천동 262번지
	인구 수	착공일	준공일
		소요동 8,675명(2019.12월말 기준)	소요동 8,768명(2020.11.월말 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		11명/11명	11명/11명
	재정자립도	착공일	준공일
		11.98%	12.69%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	1994년			1,313㎡			-			1,094㎡			지하1~3층
	본청
	의회
	기타	1994년			1,313㎡			-			1,094㎡			지하1~3층
	청사신축 필요성			건축물 협소 및 노후화
	사업기간			착공 당시			2019 ~ 2020 (2년)
				준공			2019 ~ 2020 (2년)
	사업수행방식			경쟁입찰방식(설계･시공 분리)
	추정(예정)가격						계약금액						낙찰율			%
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계
	본청
	의회
	기타		2020년			3,547㎡			-			1,741.67㎡			지상1~3층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	5,459백만원		-		-		5,459백만원		-
	Y-3 이전
	Y-2
	Y-1
	준공연도(Y)	5,459백만원		-		-		5,459백만원		-
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비						572백만원
	2) 설계비						163백만원
	3) 감리비								45백만원
	4) 공사비								4,279백만원
	5) 기타부대비								4백만원

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2018. 8.	반영	자체
	타당성 조사			자체
	투융자심사	2018. 11.	적정	경기도
	공유재산관리계획	2018. 11.	완료	지방의회
	설계	2019. 9.	준공	자체
	착공	2019. 11.	착공	자체
	준공	2020. 12.	준공	자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	4,284,446,730원
	단위비용(원/㎡)	2,459,965원
	점유율(%)	100%
건 축	금액(원)	3,239,456,790원	지상1층 민원실, 동장실, 부녀회 등 지상2층 주민자치실, 취미교실, 회의실 지상3층 강당, 기계실 등
	단위비용(원/㎡)	1,859,972원
	점유율(%)	75.61%
전 기	금액(원)	657,739,020원	수배전반 등
	단위비용(원/㎡)	377,648원
	점유율(%)	15.35%
통 신	금액(원)	271,757,520원	통합내선, 음향설비, 방송설비 등
	단위비용(원/㎡)	156,033원
	점유율(%)	6.34%
소 방	금액(원)	115,493,400원	옥내소화전, 유도등, 자동화재탐지 등
	단위비용(원/㎡)	66,312원
	점유율(%)	2.70%