109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
보훈회관 건립	2,773	-	100	2,423	250	2022	2019	17
소요동 행정복지센터 신축	5,459	1,207	4,252	-	-	2020	2018	100
생연동 원도심 상권진흥구역지정 지원사업	4,000	0	-	1,000	3,000	2023	2020	25
탑동계곡 편익시설 조성사업	5,000		175	4,825		2021	2020	5
송내지구 주차장 조성사업	3,883	0	336	3,547	0	2021	2019	40
중앙동 일원 주차장 조성사업	3,073	0	6	2,267	800	2022	2021 (재심사)	30
세아프라자 옆 주차장 조성사업	7,300	0	0	5,400	1,900	2023	2020	10
소요교 보수보강공사	3,700	962	2,022	716	0	2021	2020	98
생연근린공원 조성사업	6,735	3,228	1,523	-	-	2021	2020 (재심사)	100
상봉암2 역사공원 토지매입	-	-	-	-	-	-	-	-
곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강공사	2,100	-	-	88	2,012	2022	2020	4
선업교 및 송천교 내진보강 및 보수보강 공사	2,150	66	1,614	-	-	2020	2020	100
어수로 전선지중화사업	4,000	-	-	4,000	-	2022	2020	20
도시재생 커뮤니티 센터 조성	9,157	-	540	59	8,558	2024	2020	10
상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로 (소로1-21호선) 개설공사	5,500	21	2,149	2,588	742	2022	2020	39
상패동 6통 도시계획도로 (소로1-19호선) 개설공사	2,300	10	543	1,737	-	2021	2020	24
우리동네 주민쉼터 조성사업	2,000	588	749	663	-	2021	2018	95
경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업	11,000	166	410	756	9,668	2022	2018	40
캠프 소요 in 경기	4,000	-	-	-	4,000	2022	2019	40
행복드림센터 (시민수영장) 건립	25,000	-	910	5,194	18,896	2023	2019	5
자연누림조성	15,200	-	787	4,509	9,904	2023	2019	5
치유의 숲 조성	4,000	192	1,322	2,486	-	2021	2019	95
복합문화 커뮤니티 건립	30,000	-	106	4,583	25,311	2022	2019	35
장애인 스포츠 재활센터 조성	18,000	-	3,920	5,780	8,300	2023	2019	40
보건소 별관 (치매안심센터)신축	1,924	1,640	253	-	-	2020	2018	100
스마트관망관리 인프라구축사업	3,572	-	-	1,630	1,942	2022	2020	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

보훈회관 건립

담당자

복지정책과 김욱(☎860-2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 보훈회관은 준공된 지 30년 이상 된 건물로 시설이 열악하고 면적 협소

○ 보훈회관 신축으로 보훈대상자 예우 및 애국심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1.∼2021. 12.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 294-2

○ 규 모 : 지상 4층(연면적 995.77㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,773백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,773		100	2,423	250
국 비	500			250	250
시 도 비	80		80
시군구비	2,193		20	2,173
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 17%)

○ 2021. 3. : 계약심사 완료

○ 2020. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 1. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2021. 4. : 보훈회관 건립공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 보훈회관 건립공사 준공

사업명

소요동 행정복지센터 신축

담당자

회계과 김종헌(031-860-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소하고 노후화 된 소요동행정복지센터를 신축하여 주민 불편사항을 해소하고        양질의 행정서비스 제공 등 행정복지센터의 역할을 다하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10.~2020. 12.

○ 위 치 : 동두천시 동두천동 262번지

○ 규 모 : 지상 1층~3층(연면적 1,741.67㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,459백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,459	1,207	4,252
국 비
시 도 비
시군구비	5,459	1,207	4,252
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 7. : 소요동행정복지센터 신축 계획 수립

○ 2018. 8. : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자사업 심사

○ 2018. 11. : 공유재산 관리계획 반영

○ 2019. 3. : 기본 및 실시설계 용역

○ 2019. 11. : 소요동행정복지센터 착공

○ 2020. 12. : 소요동행정복지센터 준공

사업명

생연동 원도심 상권진흥구역지정

지원사업

담당자

일자리경제과 민영경

(☎860-2278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 및 골목상권의 자생력 강화 및 지속적 성장기반 마련

○ 상인소득 증대, 신규고용 창출을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2024(4년간)

○ 위 치 : 동두천시 생연로 97-1 일대

○ 규 모 : 대지 120,650㎡ / 점포 371개

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000			1,000	3,000
국 비
시 도 비	2,000			500	1,500
시군구비	2,000			500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 테마거리 조성 및 시설유지보수를 위한 나라장터 내 발주계획 등록

○ 7월 중 입찰 본 내역 공고 게시 예정

□ 향후계획

○ 연도별 세부계획에 따라 사업 추진

사업명

탑동계곡 편익시설 조성사업

담당자

안전총괄과 김훈(☎860-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 불법시설물을 철거한 탑동계곡에 계곡 물놀이장 등 편의시설을 조성하여 방문객의 편의제공 및 지역경제 활성화 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2021

○ 위 치 : 탑동계곡 일원

○ 규 모 : 둘레길 조성, 계곡 물놀이장, 계곡 쉼터, 화장실, 주차장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000		175	4,825
국 비
시 도 비
시군구비	5,000		175	4,825
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021. 5. 공사착공

○ 2021. 6. 보상계획 공고

□ 향후계획

○ 2021.  7. 도시계획시설 보상 실시

○ 2021. 12. 공사준공 예정

사업명

송내지구 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 이철희(☎860-2444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2004년 교통영향평가 도시기반시설 주차장 100면 조성 이행사항

○ 송내 택지지구 내 주차시설 부족으로 주변 상가들과 상가를 이용하는 시민들이 주차난 겪고 있음에 따라 주차장 조성

○ 상가들과 인근 시민들의 불편을 해소하고 지역경제 활성화에 기어코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10.~2021. 12.

○ 위 치 : 동두천시 송내동 681

○ 규 모 : 부지면적 1,595㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,883백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,883		336	3,547	0
국 비
시 도 비
시군구비	3,883		336	3,547	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020. 3.  2. 공공디자인 완료

○ 2020. 3. 17. 지반조사 완료

○ 2020. 4. 22. 도시관리계획 결정(변경) 공람·공고 완료

○ 2020. 5. 28. 주민설명회 완료 및 보고

○ 2020. 7.  3. 송내지구 지구단위계획 변경 심의 완료

○ 2020. 7. 22. 도시관리계획 결정(변경) 고시 완료

○ 2020. 9. ~ 10. 건축허가 협의 완료 및 실시계획인가 고시 완료

○ 2020. 10. 28. 송내지구 주차장 조성사업 특정구조·공법 선정 심의회 완료

○ 2020. 11.  6. 신기술·특허 사용협약서 체결 완료

○ 2020. 11.  9. 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 보완 완료

○ 2020. 12. 송내지구 주차장 조성사업 공사 및 감리, 건설폐기물용역 등 계약

□ 향후계획

○ 2021. 10. 주차장 준공

□ 사업변경 내역

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			38.8
			52.6
공사비	소계		35.6
			52.0
	▪건축공사 ▪토목공사 ▪조경공사 ▪기계공사	□건축(토목, 조경, 기계) 1식	26.6
			37.7
	▪통신공사	□통신공사 1식	2.1
			4.8
	▪전기공사	□전기공사 1식	2.1
			5.6
	▪소방공사	□소방공사 1식	2.7
			4.1
	▪토목공사	□토목공사(노상주차장) 및 기타부대비 1식	2.1
			0
용역비	소계		3.2
			0.4
	▪설계비	□기본 및 실시설계 1식	1.6
			0.4
	▪건설폐기물처리용역	□건설폐기물처리용역 1식	1.3
			0
	▪감리용역	□건축 및 소방감리용역 1식	0.3
			0

사업명

중앙동 일원 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 이철희(☎860-2444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 주민들과 인근 상가 이용자들의 편의 및 교통통행 문제 해소

○ 원활한 유동인구 유입에 따른 중심상권의 시장 기능 회복 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1.~2022. 6.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 612-1

○ 규 모 : 지평식 주차장 48면(1,785㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,073백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,073		6	2,267	800
국 비
시 도 비
시군구비	3,073		6	2,267	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 1.~2021. 5. 토지 1건 및 지장물 4건 중 3건 보상 완료

○ 2021. 4. 실시설계 용역 착공

□ 향후계획

○ 2021. 7.~8. 실시설계 용역 준공

○ 2021. 9.~2022. 6 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			30.7
			22.7
공사비	소계		5.9
			3.8
	▪토목공사	□토목공사 1식	4.1
			2.4
	▪전기공사	□전기공사 1식	0.4
			0.3
	▪통신공사	□통신공사 1식	0.1
			0.1
	▪CCTV공사	□CCTV 공사 1식	0.3
			0.2
	▪관제시스템	□주차관제 1식	1
			0.8
용역비	소계		2.7
			0.2
	▪설계비	□실시설계+현황측량	0.2
			0.2
	▪철거비	□철거비 1식	2.5
			0
보상비	소계		22.1
			18.7
	▪토지	□1,785m² × 1,120,000원/㎡ = 1,999,200,000원	20
			17
	▪건물	□650.7m² × 324,264원/㎡ = 210,998,650 원	2.1
			1.7

※ 보상비 및 공사비(철거비 재산정) 등으로 사업예산 변경

※ 사업기간(2021. 12. → 2022. 6.) 변경

사업명

세아프라자 옆 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 이철희(☎860-2444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 불법주차 차량 증가와 주차장 부족에 따른 시민들과 인근 상가 이용자들의 주차난 해소

○ 오랜 음성적 유흥문화(유흥가)로 각인된 지역에 대한 이미지 및 정주여건 개선

○ 전통시장 및 두드림 5060 청춘로드 조성사업에 연계되는 기반시설(주차장)을 확충하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1.~2023. 12.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 814-1 외 3필지

○ 규 모 : 지평식 주차장 101면(3,032㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,300		0	5,400	1,900
국 비	950		0	0	950
시 도 비
시군구비	6,350		0	5,400	950
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 12. 30. 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시(도시재생과)

○ 2021.  1. 19. 실시설계용역 착공

○ 2021. 1. ~ 5. 감정평가 및 협의보상

□ 향후계획

○ 2021. 7. ~ 2023. 12. 보상 및 철거 포함 주차장 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			73
			59
공사비	소계		8
			5
	▪토목공사	□토목공사 1식	3.5
			3
	▪전기공사	□전기공사 1식	1
			0
	▪통신공사	□통신공사 1식	1
			0
	▪철거공사	□철거공사 1식	2.5
			2
용역비	소계		0.2
			0.2
	▪설계비	□실시설계+현황측량	0.2
			0.2
보상비	소계		64.8
			54
	▪토지	□3,079m² × 1,682,050원/㎡ ≒ 5,179,031,950 원	51.8
			43.6
	▪건물	□1,471m² × 402,420원/㎡ × ≒ 591,960,750 원	5.9
			4.4
	▪영업보상비	□29동 × 24,479,310원 ≒ 709,900,000 원	7.1
			6

사업명

소요교 보수보강공사

담당자

도로과 최제호(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요교는 1992년에 준공하여 현재까지 26년간 공용 중인 교량으로 교량 상판 일부 펀칭파괴 등 결함이 발견됨에 따라 소요교 구조물에 대한 긴급 정밀안전진단을 우선 실시하였고 그 결과에 따라 보수·보강공사를 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2021. 6.

○ 위 치 : 상봉암동 환경사업소 앞 소요교

○ 규 모 : L=120m, B=14.9m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,700	962	2,022	716	-
국 비
시 도 비
시군구비	3,700	962	2,022	716	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 2019. 8. 23. : 공사 착공

○ 2020. 12. : 공정률 98%

□ 향후계획

○ 2021. 6. 22. : 공사 준공

사업명

생연근린공원 조성사업

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 공원 대상지로 2020. 7. 1.일자로 자동실효 방지 및 실효에 따른

난개발, 공원감소에 대처하고 공원조성을 통해 생태계 보존 및 부족한

공원 확보에 기여.

□ 사업 개요

○ 기    간 : 2019.∼2021.

○ 대 상 지 : 생연근린공원(동두천시 생연동 산53번지 일원)

○ 규    모 : 103,844㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,735백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,735	3,228	3,507	-	-
국 비		-	-	-	-
시 도 비	6,735	3,228	3,507	-	-
시군구비		-	-	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진 상황(사업완료)

○ 2018. 12.     : 사업 추진계획 수립

○ 2019. 09.    : 보상계획 공고

○ 2019. 10.    : 감정평가 완료

○ 2020. 03. 12. : 공원조성계획(변경) 결정 고시

○ 2020. 06. 25. : 도시계획시설 실시계획인가 고시

○ 2020. 10. 16.∼2021. 7. 15. : 생연근린공원 조성사업 완료

□ 향후 계획

○ 생연근린공원 지속 관리

사업명

상봉암2 역사공원 토지매입

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획시설 상 공원으로서 원칙적으로 시에서 조성해야 할 의무가 있으며,

소요산 관광지와 연접되어 상당부분 개발 가능성이 있는 토지임을 고려할 때,        향후 주변 관광자원과 연계하여 지역경제 발전을 도모할 수 있는 토지이기에

매입을 추진하고자 함.

□ 사업 개요

○ 대 상 지 : 동두천시 상봉암동 산41번지 일원(상봉암2 역사공원)

○ 면    적 : 176,435㎡

○ 매 입 비 : 3,010백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : -백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진 상황(0%)

○ 2020. 09. 23. : 상봉암2 역시공원 토지소유자 진정민원 접수(토지보상 관련)

○ 2020. 10. 20. : 의원정담회 보고(상봉암2 역사공원 토지매입)

○ 2020. 11.     : 2021년 본예산(안) 반영요청(미반영)

□ 향후 계획

○ 사업비 지속 반영 요청 및 민간조성계획 요청 시 적극 검토 추진

사업명

곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강공사

담당자

도로과 선호철(☎2289)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내진성능평가 결과(B, C등급) 교량의 신축이음 파손 및 미설치, 콘크리트 열화에 의한 철근 노출, 균열 발생 등 구조물의 안전성에 영향을 미치는 손상이 발견되어 보수·보강이 시급한  상황임.

○ 내진 성능이 미약한 교량 받침 교체 및 보강을 통하여 도로 교량을 이용       하는 시민들에게 안전한 기반시설을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 곡촌교 외 14개소

○ 규 모 : 내진성능 및 보수보강공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,100	-	88	1,380	1,468
국 비
시 도 비
시군구비	2,100	-	88	1,380	1,468
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 2021. 4. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2021. 8. : 공사 착공

○ 2022. 5. : 공사 준공

사업명

선업교 및 송천교 내진보강 및 보수보강 공사

담당자

도로과 유장욱(☎860-2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선업교, 송천교 교량에 대한 내진성능평가 결과 설계지진력 발생시 교각부       내진성능을 확보하지 못하고, 받침의 경우도 받침 본체에 대해 지진 발생시       저항력 확보가 필요한 실정

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3.~2020. 9.

○ 위 치 : 선업교 및 송천교

○ 규 모 : 선업교 L=133m, B=12m, 송천교 L=101m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,150백만원(도비471 특교세400 특조금1,000 시비279)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,150	66	1,614	-	-
국 비
시 도 비	471	-	471	-	-
시군구비	1,679	66	1,143	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 2019. 11. 실시설계용역 준공

○ 2020. 3. 공사착공

○ 2020. 5. 투자심사(적정)

○ 2020. 9. 공사준공

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

어수로 전선지중화사업

담당자

도로과 김재상(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천중앙역에서 어수사거리까지는 4차선으로 확장 되었고, 어수사거리부터 신천교사거리 도로확장사업을 추진 중에 있으나, 도로주변 전주 및 전선으로 인하여 도시미관을 저해하고 있는 실정임. 어수로 전선지중화사업을 통해 구도심 도시미관 개선 필요에 따른 사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1.~2022. 3.

○ 위 치 : 동두천중앙역 ~ 신천교 사거리

○ 규 모 : 전선지중화(L=0.5km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	-	-	4,000	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,000	-	-	2,000	-
지 방 채
민간자본	2,000	-	-	2,000	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 12. 20. : 2021년 전선지중화 사업 선정

○ 2021. 07. 10. : 설계 준공

□ 향후계획

○ 2021. 08. 10. : 공사 착공(예정)

○ 2022. 03. 10. : 공사 준공(예정)

사업명

도시재생 커뮤니티 센터 조성

담당자

도시재생과 김혜란(☎860-2373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심의 주민 편의시설 부족 문제를 해결하고, 지역공동체 활성화를 위한 도시재생커뮤니티센터 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2024.

○ 위 치 : 생연동 825-15번지 일원

○ 규 모 : 도시재생 커뮤니티센터 조성(지상5층, 연면적 2,305.4㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,157백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	9,157	-	540	59	8,558
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 2020. 2.∼4.   도시재생커뮤니티센터 대상지 선정

○ 2020. 5.∼12.   공유재산관리계획 등 사전행정절차 추진

○ 2020. 10.∼12.   도시재생 커뮤니티센터 부지매입 (2필지)

○ 2021. 3.∼7.   2022년 특수상황지역개발 사업 공모 신청 및 확정

□ 향후계획

○ 2021. 8.∼2022. 부지 매입, 건축설계 공모, 기본 및 실시설계용역 등

○ 2023.∼2024.    공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2022년 특수상황지역개발 사업 공모에 선정됨에 따라 사업비 변경
- 당초 : 9,157백만 원(전액 시비)
- 변경 : 10,000백만 원(국비 8,000, 시비 2,000)

사업명

상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선) 개설공사

담당자

도시재생과 이창희(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후지역에 기반시설(도로, 상•하수도 등)을 제공하여 쾌적한 환경과 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11.~2022. 12.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 32-52번지~22-27번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=416m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,500	21	2,149	2,588	742
국 비
시 도 비
시군구비	5,500	21	2,149	2,588	742
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 39%)

○ 2019. 10. 실시설계용역 착수

○ 2020.  2. 실시설계용역 준공 및 인가

○ 2020.  4. 보상 착수

□ 향후계획

○ 2021.  8. 공사 착공

○ 2022. 12. 공사 준공

사업명

상패동 6통 도시계획도로(소로1-19호선) 개설공사

담당자

도시재생과 이창희(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후지역에 기반시설(도로, 상•하수도 등)을 제공하여 쾌적한 환경과 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11.~2021. 12.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 14-59번지~22-27번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=184m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,300	10	543	1,737	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	10	543	1,737	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ 2019. 10. 실시설계용역 착수

○ 2020.  2. 실시설계용역 준공 및 인가

○ 2020.  4. 보상 착수

□ 향후계획

○ 2021.  8. 공사 착공

○ 2021. 12. 공사 준공

사업명

우리동네 주민쉼터 조성사업

담당자

건축과 강문휘(☎860-2404)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 주거지의 빈집이 계속 발생하여 주민들이 안전사고에 무방비로 노출되어 있으며, 지역주민이 떠난 후 안전사고 발생 위험으로 민원 증대

○ 1년 이상 방치된 빈집(공·폐가)을 정비·철거하여 주민편의시설(동네주차장, 주민쉼터, 공동텃밭 등)을 조성(3년간 사용)하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1.~2021. 12.

○ 위 치 : 동두천 전역

○ 규 모 : 빈집 64개소 철거

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	588	749	663	-
국 비	1,600	588	580	432	-
시군구비	400	-	169	231	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2019년 제1~3차 빈집 24개소(주차장 21개소, 텃밭3개소) 조성완료

○ 2020년 제1~3차 23(주차장 10개소, 텃밭 12개소, 쉼터1개소) 조성완료

○ 2021년 제1차 빈집 11개소(주차장 6개소, 텃밭 3개소, 쉼터2개소) 조성완료

○ 2021년 제2차·제3차 빈집 6개소(주차장3개소, 텃밭3개소) 진행중

□ 향후계획

○ 2020. 8. : 2021년 제2차·제3차 공사 완료 예정

○ 2020. 9.~10. : 기조성 사업지에 대한 보수공사

사업명

경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9.∼2022. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 164-3번지 일원

○ 규 모 : 19,500㎡ (유원지 특화(놀이) 및 편의시설, 기반시설(도로) 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,000	166	410	756	9,668
국 비	5,500	83	205	378	4,834
시 도 비
시군구비	5,500	83	205	378	4,834
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018. 9 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 1 : 보상 착수

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 3. ∼ 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초(A=210,000㎡), 현재(A=19,500㎡)

○ 사업위치 : 당초(상봉암동 산41번지 일원), 현재(상봉암동 164-3번지 일원)

사업명

캠프 소요 in 경기

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2022.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 164-3번지 일원

○ 규 모 : 44,000㎡ (공원 기반 및 편의시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000				4,000
국 비
시 도 비	2,000				2,000
시군구비	2,000				2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 11 : 경기도 투자사업 심사 완료

○ 2019. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 3. ∼ 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초(A=11,000㎡), 현재(A=44,000㎡)

○ 사업위치 : 당초(상봉암동 산41번지 일원), 현재(상봉암동 164-3번지 일원)

사업명

행복드림센터(시민수영장) 건립

담당자

투자개발과 김은창(☎860-2583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신시가지 조성이후 급격히 쇠락한 원도심에 수영장, 키즈헬스케어센터, GX룸 등이 포함된 복합건축물을 건립하여 시민들의 삶의 질 향상과 원도심 활성화게 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.∼2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 594-1번지

○ 규 모 : 부지면적 4,560㎡, 건축연면적 7,764㎡(지상5층)

· 키즈헬스케어센터, 수영장, 실내놀이터, GX룸, 사무실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	25,000		910	5,194	18,896
국 비	3,000			2,000	1,000
시 도 비	15,400		908	3,092	11,400
시군구비	6,600		2	102	6,496
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 7 : 공공건축사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료

○ 2020. 10: 건축설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 7. : 건축설계용역 완료

○ 2021. 10. ∼ 2023. 10. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초(연면적 6,218㎡, 지상3층), 변경(연면적 7,764㎡, 지상5층)

사업명

산림치유원 자연누림(산림복지단지) 조성

담당자

투자개발과 홍성철(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 산림자원으로 동두천 산림복지지구로 지정된 왕방산 일원에 산림 교육·휴양·놀이 등의 종합적 산림복지단지 조성을 통해 시민 복지증진 및 방문객 유치를 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 탑동동 산16번지 일원

○ 규 모 : 915,570㎡(산림복지단지 조성 1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,200		787	4,509	9,904
국 비	11,200		100	904	10,196
시 도 비	2,000		420	2,561	981
시군구비	2,000		267	1,045	688
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 9. : 조성계획 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 6. : 전략환경영향평가 초안 협의완료

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 설계용역 완료

○ 2021. 12. ∼ 2022. 12. : 공사 추진

사업명

치유의 숲 조성사업

담당자

투자개발과 홍성철(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림치유인자를 활용한 인체면역력 증진 등 산림 치유공간 조성을 통해

시민 휴양 공간 확보 및 건강한 산림자원 이용환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ∼ 2021. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 탑동동 산16번지 일원

○ 규 모 : 500,035㎡ (치유의 숲 1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	209	1322	2,469
국 비	1,000	104	660	236
시 도 비	1,000		1	999
시군구비	2,000	105	661	1,234
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2020. 2 : 조성계획 승인

○ 2020. 7 : 공사착공

□ 향후계획

○ 2021. 7. : 공사준공

사업명

복합문화커뮤니티센터 건립

담당자

투자개발과 이진영

(☎860-2592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활문화, 동아리, 청년지원, 청소년 교육·활동, 도서관이 복합적으로 구성된 문화시설을 건설하여 청소년 및 청년 등 시민 모두가 함께 어우러져 이용할 수 있도록 복합문화커뮤니티센터 건립을 통해 원도심 주민의 문화복지 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2023.

○ 위 치 : 생연동 557-3번지외 8필지

○ 규 모 : 건축연면적 9,346㎡(지하 1층/지상 7층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,000		106	4,583	25,311
국 비
시 도 비	18,500		105	1,895	16,500
시군구비	11,500		1	2,688	8,811
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2021. 1. : 기본 및 실시설계 착수

○ 2021. 4. : 도시계획시설(문화시설) 실시계획 고시

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 건축설계 및 공익사업에 의한 토지수용 완료

○ 2022. 1.~ 2023. 12. : 공사

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모

변경 전	변경 후
부지면적: 2,978㎡ 연면적 7,540㎡ (지하2층/지상4층)	부지면적: 3,037㎡ 연면적: 9,346㎡ (지하1층/지상7층)

사업명

장애인 스포츠 재활센터 조성

담당자

투자개발과 이진영

(☎860-2592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 장애인의 욕구와 필요에 부합한 스포츠와 재활을 접목한 장애인체육 시설을 조성하여 장애 주민들의 재활의지 고취 및 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2022.

○ 위 치 : 상패동 55번지 외 3필지

○ 규 모 : 건축연면적 4,290㎡ (지하1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,000	-	3,920	5,780	8,300
국 비	4,000	-	320	1,680	2,000
시 도 비	11,100	-	1,800	3,000	6,300
시군구비	2,900	-	1,800	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020. 5. : 2차 토지매입(상패동 60-3번지 외 1필지)

○ 2021. 5. : 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 향후계획

○ 2021. 7.~12. : 공사

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사 업 명:

변경 전	변경 후
장애인 스포츠 재활센터	반다비 체육센터

○ 사업규모

변경 전	변경 후
부지면적 : 3,228㎡ 연 면 적 : 3,600㎡ (지하1층/ 지상3층)	부지면적: 5,670㎡ 연 면 적: 4,290㎡ (지하1층/지상3층)

사업명

보건소(치매안심센터)신축

담당자

보건소 신기일(860-3374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대통령 치매국가책임제 공약에 따른 치매안심센터 설치 의무화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. 13.~2020. 12. 31.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 거북마루로 49

○ 규 모 : 지상2층(부지 915.3㎡, 지상연면적 710.24㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,924백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,924	1,641	252
국 비	360	360	-
시 도 비	1,045	787	233
시군구비	519	494	19
지 방 채
민간자본
기 타

※ 2020년 준공에 따른 시도비 25백만원, 시비 6백만원 반납처리 완료

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ 2020년준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

스마트 관망관리 인프라 구축사업

담당자

환경사업소 이신재

(☎031-860-3188)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 발생한 인천 수돗물 적수사고 및 포항 수돗물 흑수사고 등으로 인한      국민들의 수돗물 불신야기로 인한 문제점을 해결하고자 수돗물 전 공급과정      에서 실시간 감시체계를 구축하여 사고발생을 사전에 방지하고 사고 발생      시 신속한 대응 및 조치가 가능하도록 스마트 관망관리 인프라를 구축        하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1.～2022. 12.(24개월 )

○ 위 치 : 동두천시 지방상수도 급수구역

○ 규 모 : 지방상수도 수량, 수질관리 시스템 및 음용환경개선 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,572백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,572	-	-	1,630	1,942
국 비	2,500	-	-	1,141	1,359
시 비	1,072	-	-	489	583

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 하반기 : 지방상수도 관망관리 운영현황 분석 및 국고보조금 신청

○ 2021. 4. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 위(수)탁협약 체결

○ 2021. 6. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 실시설계 중(K-water)

□ 향후계획

○ 2021. 8. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 실시설계 완료

○ 2021. 9. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 공사 착공

○ 2022.12. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 공사 준공(시운전2개월 포함)