109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
보훈회관 건립	2,773	100	2,423	250		2022	2019	95
송내동 행정복지센터 신축	10,862	1,348	18	491	9,005	2024	2021	40
생연동 원도심 상 권 진흥구역 지정 지원	4,000		1,000	1,000	2,000	2024	2020	50
경기도일자리재단 이전 토지매입	6,282		6,282			2021	2021	100
동두천 자연휴양림 세미나실 신축	11,174	100	3,353	3,505	4,216	2023	2021	20
탑동계곡 편익시설 조성	5,450		4,280	1,170		2022	2021	70
송내지구 주차장 조성	3,883	336	2,571	976		2022	2019	75
중앙동 일원 주차장 조성	3,070	6	2,393	671		2022	2021	90
생연근린공원 조성	6,735	4,751	1,984			2021	2020	100
소요교 보수보강 공사	3,276	2,984	292			2021	2020	100
곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강	2,080	88	1,076	916		2022	2020	0
어수로 전선지중화	5,500		4,715	785		2022	2021	90
생연로 전선지중화	3,200	2,815		385		2022	2021	100
국도 3호선 도로 확포장 공사	19,000	300	3,900	800	14,000	2025	2021	10
원도심 활성화 사업	30,000	7,250	119	1,051	21,580	2024	2021	25
하봉암교~평화로 도로 개설	2,500		42	958	1,500	2023	2021	2
상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로 (소로1-21호선) 개설	7,100	2,273	417	1,500	2,910	2024	2020	45

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
상패동 6통 도시계획도로 (소로1-19호선) 개설	2,400	553	645	800	402	2023	2020	50
상패동 수변공원 앞 도시계획도로 (소로1-20호선) 개설	2,400	1,952	200	248		2022	2021	80
우리동네 주민쉼터조성	1,987	1,337	650			2021	2018	100
경기북부 어린이박물관 편의시설 조성	11,000	3,743	2,457	745	4,055	2023	2018	22
캠프소요 in 경기	4,000	1,200		600	2,200	2023	2019	0
산림치유원 자연누림 (산림레포츠 시설) 조성	15,200	2,393	2,904	7,620	2,283	2023	2019	5
치유의 숲 조성	4,000	4,000				2021	2019	100
행복드림센터 (시민수영장) 건립	27,400	2,004	4,100	11,141	10,155	2023	2019	20
복합문화 커뮤니티센터 건립	30,000	2,003	5,136	4,581	18,280	2024	2019	23
반다비체육센터 (장애인스포츠재활센터) 건립	19,600	4,604	6,096	6,509	2,391	2023	2019	80
스마트 관망관리 인프라 구축	5,359		4,144	1,215		2022	2021	60

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

보훈회관 건립

담당자

복지정책과

김욱(☎860-2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 보훈회관은 준공된 지 30년 이상 된 건물로 시설이 열악하고 면적 협소

○ 보훈회관 신축으로 보훈대상자 예우 및 애국심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1.∼2022. 2.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 294-2

○ 규 모 : 지상 4층(연면적 995.77㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,773백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,773	100	2,423	250
국 비	500		250	250
시 도 비	80	80
시군구비	793	20	773
특별교부세	400		400
특별조정교부금	1,000		1,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 95%)

○ 2020. 3. : 계약심사 완료

○ 2020. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 1. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2021. 4. : 보훈회관 건립공사 착공

○ 2021. 12. : 보훈회관 건립공사 추진(공정률 95%)

□ 향후계획

○ 2022. 1. : 보훈회관 건립공사 준공

사업명

송내동행정복지센터 신축

담당자

회계과 김종헌(☎860-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 집합건축물인 싸이언스타워에 위치한 송내동 행정복지센터는 외부

입주기관과 통로 및 공용부 공간을 공유하고 있어, 행정수요 및 인구 증가로

인한 행정 업무와 문화·복지 서비스 제공 공간이 부족한 상태로, 행정복지

센터의 기능 유지가 어려운 실정임.

○ 행정복지센터의 행정서비스 제공과 주민자치 프로그램 및 취미활동 등을

위한 공간을 확보할 필요가 있으나, 청사 증축에 대한 행정적․법적 절차가

복잡하여 이행하기 어려운 실정으로, 독립적인 행정복지센터의 신축이 필요함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 8.

○ 위 치 : 동두천시 690~691번지

○ 규 모 : 지하1~지상3층 철근콘크리트구조 업무시설, 연면적 2,970.29㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,862백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,862	1,348	18	491	9,005
국 비
시 도 비
시군구비	10,862	1,348	18	491	9,005
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 송내동행정복지센터 신축 기본계획 수립

○ 경기도 투자심사 및 동두천시 공유재산관리계획 승인

○ 현재 송내동행정복지센터 신축 기본 및 실시설계 진행 중

□ 향후계획

○ 송내동행정복지센터 신축공사 계약심사 및 사업자 선정, 착공

사업명

생연동 원도심 상권진흥구역지정 지원사업

담당자

일자리경제과

민영경(☎860-2278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 및 골목상권의 자생력 강화 및 지속적 성장기반 마련

○ 상인소득 증대, 신규고용 창출을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2024(4년간)

○ 위 치 : 동두천시 생연로 97-1 일대

○ 규 모 : 대지 120,650㎡ / 점포 371개

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000		1,000	1,000	2,000
국 비
시 도 비	2,000		500	500	1,000
시군구비	2,000		500	500	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 테마거리 조성 및 시설유지보수 등 추진

○ 2022년 세부계획에 따른 환경개선 및 상권활성화 사업 추진 중

□ 향후계획

○ 연도별 세부계획에 따라 사업 추진

사업명

경기도일자리재단 이전 토지매입

담당자

일자리경제과 이광영(☎860-3129)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기도 산하 공공기관 북부지역 분산배치에 따른 지역간 균형발전

○ 구인·구직자간 미스매치 해소 및 행정인프라 구축으로 일자리역량 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 10.

○ 위 치 : 상패동 19번지 일원

○ 규 모 : 10,124㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,282백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,282		6,282
국 비
시 도 비
시군구비	6,282		6,282
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 3. 23. : 동두천시 공유재산 관리조례 일부개정(제302회 임시회)

○ 2021. 4.  5. : 투자심사위원회 개최 (2021. 4. 7. 승인)

○ 2021. 4.  8. : 공유재산심의회 개최 (2021. 4. 13. 승인)

○ 2021. 4. 13. : 발전종합계획 변경 승인(행정안전부장관)

○ 2021. 6. 28. : 캠프님블 감정평가 완료(6,270,297,500원)

○ 2021. 6. 29. : 국유재산(국방부) 매매계약 체결

○ 2021. 7.   8. : 소유권 이전 등기 완료

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

동두천 자연휴양림 세미나실 신축

담당자

관광휴양과 박성호(☎860-3255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주중 및 비수기 단체방문객 유도를 위한 대형행사, 워크숍 등에 활용 가능한       세미나실 건립

○ 치유의 숲 및 놀자숲 운영, 산림복지단지 사업 추진에 따른 방문객 증가에       대비해 세미나실 상부에 숙박시설 추가조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. ~ 2023. 9.

○ 위 치 : 탑동동 산16번지 일원

○ 규 모 : 지상3층, 연면적 2,897.91[eqn: m ^{2}]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,174백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,174	100	3,353	3,505	4,216
국 비
시 도 비	4,500			700	3,800
시군구비	6,674	100	3,353	2,805	416
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 9. : 세미나실 3층 규모 확대 조성 확정

○ 2020. 10. ~ 2022. 5. : 기본·실시설계 및 각종 행정절차 추진

○ 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 7. : 건설사업관리용역 착수 및 본공사 및 전기·통신·소방공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 9. : 공사준공(예정)

※ 동절기 공사중지 미포함

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초		변 경		증액사유
	사업비	사업규모	사업비	사업규모
계	10,514		11,174
설계비	286		286
공사비	9,639	연면적 2,807㎡	9,743	연면적 2,897㎡	· 연면적 변경 : 증90㎡ · ‘22년 노무비. 자재단가, 상반기 표준품셈 반영 · 경기도 계약심사 반영
감리비	566		1,122		· 안전관리 전담 인력 배치 · 공사비 증가 반영 · ‘22년 건설기술자 임금 반영
부대비	23		23

사업명

탑동계곡 편익시설 조성사업

담당자

안전총괄과 신명범(☎860-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 탑동계곡을 점거하고 있는 불법시설물을 철거하고 친수공간을 조성하여 청정한 계곡을 시민들에게 환원코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5.~2022. 5.

○ 위 치 : 탑동동 364-2번지 일원(탑동계곡 일원)

○ 규 모 : 둘레길 조성 3km. 물놀이장 13개소, 쉼터 464m,
화장실 3개소 주차장 100면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,450		4,280	1,170
국 비
시 도 비
시군구비	5,450		4,280	1,170
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○2021. 5. 13. 공사 착공

□ 향후계획

○2022. 5. 30. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비) 당초 5,000백만원→변경) 5,450백만원, 증 450백만원

- 변경사유 : 공사비 및 보상비 증가에 따른 예산 증액

사업명

송내지구 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 김성윤(☎860-2291)

□ 사업목적 및 필요성

○ 송내택지지구 내 주차시설 부족으로 인한 시민들의 불편을 해소하고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2022. 10.

○ 위 치 : 동두천시 송내동 681번지

○ 규 모 : 부지면적 1,595㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,883백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,883	336	2,571	976
국 비
시 도 비
시군구비	3,883	336	2,571	976
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2020.  4. : 도시관리계획 결정(변경) 공람․공고

○ 2020.  5. : 주민설명회 실시

○ 2020.  7. : 송내지구 지구단위계획 및 도시관리계획 결정(변경) 완료

○ 2020. 10. : 건축허가 및 실시계획 고시

○ 2020. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 9. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

(단위 : 억원)

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			38.8
			52.6
공사비	소계		35.6
			52.0
	▪건축공사 ▪토목공사 ▪조경공사 ▪기계공사	□건축(토목, 조경, 기계) 1식	26.6
			37.7
	▪통신공사	□통신공사 1식	2.1
			4.8
	▪전기공사	□전기공사 1식	2.1
			5.6
	▪소방공사	□소방공사 1식	2.7
			4.1
	▪토목공사	□토목공사(노상주차장) 및 기타부대비 1식	2.1
			0
용역비	소계		3.2
			0.4
	▪설계비	□기본 및 실시설계 1식	1.6
			0.4
	▪건설폐기물 처리용역	□건설폐기물처리용역 1식	1.3
			0
	▪감리용역	□건축 및 소방감리용역 1식	0.3
			0

사업명

중앙동 일원 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 김성윤(☎860-2291)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 주차장 부족으로인한 시민들과 인근 상가 이용자들의 불편을 해소하고 불법주정차 차량 증가로 인한 교통 통행 불편을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 9.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 612-1

○ 규 모 : 대지면적 1,934㎡ / 45면 규모 주차장 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,070	6	2,393	671
국 비	700		138	562
시 도 비
시군구비	2,370	6	2,255	109
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 토지 및 건축물 보상 완료. 세입자 퇴거 및 건축물 철거 완료

○ 주차장 포장 완료, 주차장 확장공사 추진 중

□ 향후계획

○ 2022. 8. : 주차장 확장 부지 내 건축물 철거 완료

○ 2022. 10. : 주차장 확장 공사 완료

사업명

생연근린공원 조성사업

담당자

공원녹지과 조은미(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 공원 대상지로 2020. 7. 1.일자로 자동실효 방지 및 실효에 따른 난개발, 공원감소에 대처하고 공원조성을 통해 생태계 보존 및 부족한 공원 확보

□ 사업 개요

○ 기    간 : 2019.∼2021.

○ 대 상 지 : 생연근린공원(동두천시 생연동 산53번지 일원)

○ 규    모 : 103,844㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,735백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,735	4,751	1,984
국 비
시 도 비	6,735	4,751	1,984
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(사업완료)

○ 2018. 12.    : 사업 추진계획 수립

○ 2019. 09.    : 보상계획 공고

○ 2019. 10.    : 감정평가 완료

○ 2020. 03. 12. : 공원조성계획(변경) 결정 고시

○ 2020. 06. 25. : 도시계획시설 실시계획인가 고시

○ 2020. 10. 16.∼2021. 7. 15. : 생연근린공원 조성사업 완료

□ 향후 계획

○ 생연근린공원 지속 관리

사업명

소요교 보수보강공사

담당자

도로과 최제호(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요교는 1992년에 준공하여 현재까지 26년간 공용 중인 교량으로 교량 상판 일부 펀칭파괴 등 결함이 발견됨에 따라 소요교 구조물에 대한 긴급 정밀안전진단을 우선 실시하였고 그 결과에 따라 보수·보강공사를 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2021. 6.

○ 위 치 : 상봉암동 환경사업소 앞 소요교

○ 규 모 : L=120m, B=14.9m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,276백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,276	2,984	292
국 비
시 도 비
시군구비	3,276	2,984	292
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 6. 22. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

곡촌교 외 14개소 내진성능

및 보수보강공사

담당자

도로과 선호철(☎860-2289)

□ 사업목적 및 필요성

○ 곡촌교 외 14개 교량에 대한 내진성능평가 결과 15개 교량 모두 공용기간       장기화에 따른 노후화로 내진 및 보수보강공사 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10. 12. ~ 2022. 4. 19.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 663-8번지 외 14개소

○ 규 모 : 곡촌교 외 14개소 내진성능 및 보수보강공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2080	88	1,076	916
국 비
시 도 비
시군구비	2,080	88	1,076	916
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 3. 24. : 투자심사 완료

○ 2021. 4.  9. : 실시설계 완료

○ 2021. 9. 14. : 공사 착공

○ 2021. 4. 19. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

어수로 전선 지중화

담당자

도로과 한재민(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천중앙역 역세권 주변 도심지 미관개선을 위한 지중화사업 필요

○ 어수로 도로확장사업과 연계한 지중화사업 병행 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 10. ~ 2022. 9.

○ 위 치 : 동두천 중앙역 ~ 신천교 사거리

○ 규 모 : 전선지중화 L=1.1㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,500		4,715	785
국 비
시 도 비
시군구비	2,774		1,989	785
지 방 채
민간자본	2,726		2,726
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2020. 12. 전선 지중화사업 확정

○ 2021. 10. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 7~8. 케이블 포설 및 통신설비 철거

○ 2022. 9. 전주 철거 및 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

생연로 전선 지중화

담당자

도로과 한재민(☎860-2429)

전략사업과 이근석(☎860-2445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 5060청춘로드 사업과 연계한 지중화 사업 추진으로 거리의 미관을 크게

향상시켜 거리활성화 및 쾌적한 음식문화거리 조성에 기여.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 생연로

○ 규 모 : 전선 지중화 L=0.44KM

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,200	2,815		385
국 비
시 도 비
시군구비	2,219	1,834		385
지 방 채
민간자본
기 타	981	981

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

국도3호선 도로확포장공사(송내동)

담당자

도로과 최제호(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 협소로 인한 교통 정체와 사고 위험을 내포하고 있어 기존 4차선을 6차선으로 확장하여 시가지 교통 정체 해소 및 교통 사고를 예방코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2025.

○ 위 치 : 송내삼거리~송내사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=1.0km, B=20→35m(4차로→6차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,000	300	3,900	800	14,000
국 비	3,900			400	3,500
시 도 비
시군구비	15,100	300	3,900	400	10,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 11. 실시설계 착수

○ 2021.  8. 교통시설안전진단 용역 추진

○ 2021. 10. 실시계획인가(변경) 신청

□ 향후계획

○ 2022. 4. 실시계획인가(변경) 고시

○ 2022. 7. 보상절차 추진

○ 2023. 8. 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

원도심(생연2동,중앙,보산) 활성화 사업

담당자

도로과 한재민(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 중앙로변의 혼잡한 가로환경 개선을 위한 도로시설 개선 필요

○ 보행자 중심의 도로환경을 제공하여 집객효과를 통한 상권활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 큰시장 로터리 ~ 보산역

○ 규 모 : 도로개선 L=1.42㎞, B=20m, 주차장 건설 170면(5,640㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	30,000	7,250	119	1,051	21,580
국 비	15,000			500	14,500
시 도 비
시군구비	15,000	7,250	119	551	7,080
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2020. 12. 주한미군 공여구역주변지역등 발전종합계획 사업 확정

○ 2021.  2. 원도심 활성화사업 타당성평가 및 기본계획수립 용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 7.~9. 주민설명회 및 의원정담회 업무보고

○ 2022. 10. 용역 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

하봉암교 평화로 도로 개설

담당자

도로과 한재민(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하봉암교 재가설에 따른 급격한 접속도로 종단구배 선형 문제점 발생

○ 접속도로의 차량과 보행자 통행 안전 및 불편 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 하봉암동 327-9번지 일원(하봉암교 앞)

○ 규 모 : 도로개설 L=158㎞, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500		42	958	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	2,500		42	958	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2022.  4. 도시관리계획결정(변경) 용역 준공

○ 2022.  4. 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2022. 7. 실시계획인가

○ 2022. 10. 보상 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

상패동 약수암~경찰서 앞

도시계획도로(소로1-21호선) 개설공사

담당자

도시재생과 권연진(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○도시계획도로 개설을 통해 접근성을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충을      통해 쾌적한 주거 환경을 조성하여 지역의 발전 역량을 개선하며, 법면 보강 및     배수시설 확충을 통해 우기시 산지부 토사 및 우수 유출을 저감함으로써      주민 피해 및 불편을 해소하고, 소방도로 확보를 통해 긴급 차량의 접근성을     개선함으로써, 각종 재해·재난상황 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 3.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 32-85번지~22-27번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=416m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,100	2,273	417	1,500	2,910
국 비
시 도 비
시군구비	7,100	2,273	417	1,500	2,910
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○2019. 11. ~2020.3 실시설계용역 착수 및 완료

○2020.  4. 실시계획인가완료 및 보상착수

○2020.  8.  투자심사 완료(적정)

○2021.  8. 보상완료

○2021.  9. 총사업비 변경 보고

○2022.  3. 공사 착공

□ 향후계획

○2024. 6. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○공사원가 및 감정평가결과 보상비 상승으로 인한 총사업비 변경

- 당초 : 5,530백만원(전액시비)

- 변경 : 7,100백만원(전액시비)

사업명

상패동 6통 도시계획도로(소로1-19호선) 개설

담당자

도시재생과 권연진(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○도시계획도로 개설을 통해 접근성을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충을      통해 쾌적한 주거 환경을 조성하여 지역의 발전 역량을 개선하며, 법면 보강 및     배수시설 확충을 통해 우기시 산지부 토사 및 우수 유출을 저감함으로써      주민 피해 및 불편을 해소하고, 소방도로 확보를 통해 긴급 차량의 접근성을     개선함으로써, 각종 재해·재난상황 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2023. 3.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 14-59번지~22-27번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=184m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,400	553	645	800	402
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	553	645	800	402
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○2019. 11. ~2020. 1. 실시설계용역 착수 및 완료

○2020.  4. 실시계획인가완료 및 보상착수

○2020.  8.  투자심사 완료(적정)

○2021.  8. 보상완료

○2022.  3. 공사 착공

□ 향후계획

○2023. 6. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○공사원가 및 감정평가결과 보상비 상승으로 인한 총사업비 변경

- 당초 : 2,300백만원(전액시비)

- 변경 : 2,400백만원(전액시비)

사업명

상패동 수변공원 앞 도시계획도로(소로1-20호선) 개설

담당자

도시재생과 권연진(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로개설을 통한 접근성 개선 및 쾌적한 주거환경 조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ~ 2022. 9.

○ 위 치 : 상패동 수변공원 서측(상패동 14-67 ~ 10-58번지 일원)

○ 규 모 : 도로개설 L=159m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,400	1,952	200	248
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	1,952	200	248
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2019. 10. ~ 2020. 1. 실시설계용역 완료

○ 2020. 4. ~ 2020. 4. 보상 완료

○ 2021. 4. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 9. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

우리동네 주민쉼터 조성

담당자

건축과 윤보기(☎860-2404)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 주거지의 빈집이 계속 발생하여 주민들이 안전사고에 무방비로 노출되어 있으며, 지역주민이 떠난 후 안전사고 발생위험으로 민원 증대

○ 1년 이상 방치된 빈집(공·폐가)을 정비·철거하여 주민편의시설(공용주차장, 주민쉼터, 공용텃밭)을 조성(3년간 사용)하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 동두천 전역

○ 규 모 : 빈집 64개소 철거

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,987백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,987	1,337	650
국 비	1,590	1,067	523
시군구비	397	270	127

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019년 제1~3차 빈집 24개소(주차장 21개소, 텃밭 3개소) 조성완료

○ 2020년 제1~3차 빈집 23개소(주차장 10개소, 텃밭 12개소, 쉼터 1개소) 조성완료

○ 2021년 제1~3차 빈집 17개소(주차장 9개소, 텃밭 6개소, 쉼터 2개소) 조성완료

※총 64개소(주차장 40개소, 텃밭 21개소, 쉼터 3개소) 조성완료

사업명

경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. ∼ 2023. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 161번지 일원

○ 규 모 : 19,500㎡ (유원지 놀이 및 편의시설, 기반시설(도로) 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,000	3,743	2,457	745	4,055
국 비	5,500	1,872	1,229	745	1,655
시 도 비
시군구비	5,500	1,871	1,228		2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 2018. 9 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 1 : 보상 착수

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 12. : 보상 완료

○ 2022. 7. ∼ 2023. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업위치 : 당초(상봉암동 8번지 일원), 현재(상봉암동 161번지 일원)

○ 사업기간 : 당초(2018. 1. ∼ 2019. 12.), 현재(2018. 1. ∼ 2023. 12.)

○ 사업규모 : 당초(A=19,618㎡), 현재(A=19,500㎡)

○ 사업내용 : 당초(사계절 썰매장, 작은식물원 및 숲길조성 등), 현재(유원지 놀이시설, 산책로, 조경 식재 등)

사업명

캠프 소요 in 경기

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ∼ 2023. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 164-3번지 일원

○ 규 모 : 공원, 유원지 등 기반 및 편의시설 조성(44,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	1,200		600	2,200
국 비
시 도 비	2,000	1,200			800
시군구비	2,000			600	1,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2019. 11. : 경기도 투자사업 심사 완료

○ 2019. 11. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 11. : 소규모 환경영향평가 협의 완료

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 7. ~ 2023. 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초(2019. 10. ~ 2021. 12.), 현재(2019. 10. ~ 2023. 12.)

○ 사업규모 : 당초(A=11,000㎡), 현재(A=44,000㎡)

○ 사업내용 : 당초(자연공원 조성 11,000㎡), 현재(공원 조성 44,000㎡)

사업명

산림치유원 자연누림(산림복지단지) 조성

담당자

투자개발과 박용군(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 산림자원으로 동두천 산림복지지구로 지정된 왕방산 일원에 산림 교육, 휴양, 놀이 등의 종합적 산림복지단지 조성을 통해 시민 복지증진 및 방문객 유치를 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 탑동동 산16번지 일원

○ 규 모 : 915,570㎡(산림복지단지 조성 1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,200	2,393	2,904	7,620	2,283
국 비	11,200	393	904	7,620	2,283
시 도 비	2,000	1,000	1,000
시군구비	2,000	1,000	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 9. : 조성계획 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 10. : 동두천 산림복지단지 조성계획 심의(원안가결)

○ 2022. 6. : 산림복지단지 실시계획 승인(원안의결)

□ 향후계획

○ 2022. 8. ~ 2023. 8. : 공사 추진

사업명

치유의 숲 조성

담당자

투자개발과 박용군(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림치유인자를 활용한 인체면역력 증진 등 산림 치유공간 조성을 통해 시민 휴양 공간 확보 및 건강한 산림자원 이용환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ∼ 2021.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 탑동동 산16번지 일원

○ 규 모 : 500,035㎡(치유의 숲 1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	4,000
국 비	1,000	1,900
시 도 비	1,000	1,000
시군구비	2,000	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 2. : 조성계획 승인

○ 2020. 7. : 공사착공

○ 2021. 7. : 공사준공

사업명

행복드림센터(시민수영장) 건립

담당자

투자개발과 김재상(☎860-2583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신시가지 조성 이후 급격히 쇠락한 원도심에 수영장, 키즈헬스케어센터, GX룸 등이 포함된 복합건축물을 건립하여 시민들의 삶의 질 향상과 원도심 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ∼ 2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 594-1번지

○ 규 모 : 부지면적 4,560㎡, 건축연면적 7,764㎡(지상5층)

※ 키즈헬스케어센터, 수영장, 실내놀이터, GX룸, 사무실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	27,400	2,004	4,100	11,141	10,155
국 비	3,000	1,000	1,000	1,000
시 도 비	15,400	1,000	3,000	4,191	7,209
시군구비	9,000	4	100	5,950	2,946
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020.  7. : 공공건축사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료

○ 2020. 10. : 건축설계용역 착수

○ 2021.  7. : 건축설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2021. 10. ~ 2023. 11. : 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초(연면적 6,218㎡, 지상3층), 변경(연면적 7,764㎡, 지상5층)

사업명

복합문화커뮤니티센터 건립

담당자

투자개발과 박진국(☎860-2592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활문화, 동아리, 청년지원, 청소년 교육활동, 도서관이 복합적으로 구성된 문화시설을 건설하여 청소년 및 청년 등 시민 모두가 함께 어우러져 이용할 수 있도록 복합문화커뮤니티센터 건립을 통해 원도심 주민의 문화복지 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2024.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 557-3번지 외 8필지

○ 규 모 : 건축연면적 9,420㎡(지하1층/지상7층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	30,000	2,003	5,136	4,581	18,280
국 비
시 도 비	18,500	1,000	2,050	3,565	11,885
시군구비	11,500	1,003	3,086	1,016	6,395
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

○ 2021. 4. : 도시계획시설(문화시설) 실시계획 고시

○ 2021. 5. : 보상계획 공고

○ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2022. 1. : 토지 소유권 이전 완료 및 공사 착수

□ 향후계획

○ 2024. 1. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초(부지면적 2,978㎡, 연면적 6,218㎡, 지하2층/지상4층),  변경(부지면적 3,037㎡, 연면적 9,420㎡, 지하1층/지상7층)

사업명

장애인 스포츠 재활센터 조성

담당자

투자개발과 박지훈(☎860-2597)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 장애인의 욕구와 필요에 부합한 스포츠와 재활을 접목한 장애인체육 시설을 조성하여 장애 주민들의 재활의지 고취 및 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상패동 55번지 외 3필지

○ 규 모 : 건축연면적 4,290㎡(지하1층/지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,600	4,604	6,096	6,191	2.391
국 비	6,021	1,000	2,000	1,000
시 도 비	9,079	1,800	3,000	4,279	2,021
시군구비	4,500	1,804	1,096	1,230	370
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2020. 5. : 2차 토지매입(상패동 60-3번지 외 1필지)

○ 2021. 5. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2021. 8. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 1. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사 업 명 : 당초(장애인 스포츠 재활센터), 변경(반다비 체육센터)

○ 사업규모 : 당초(부지면적 3,228㎡, 연면적 6,000㎡, 지하1층/지상3층),  변경(부지면적 5,670㎡, 연면적 4,290㎡, 지하1층/지상3층)

사업명

스마트 관망관리 인프라 구축사업

담당자

환경사업소 이신재(☎860-3188)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수돗물 전 공급과정에서 실시간 감시체계를 구축하여 수도 사고발생을

사전에 방지하고 사고 발생 시 신속한 대응 및 조치가 가능하도록 스마트

관망관리 인프라를 구축하여 수돗물에 대한 불안감을 잠재우고 음용수로써의
국민신뢰를 회복하고자 함,

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 동두천시 전역

○ 규 모 : 지방상수도 스마트 관망관리 인프라시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,359백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,359		4,144	1,215
국 비	3,751		2,901	850
시 도 비
시군구비	1,608		1,243	365

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 스마트 미터링 등 주요 자재 구매 완료

○ 관세척설비, 정밀여과장치 등 주요 설비 설치 중(공사추진)

□ 향후계획

○ 2022. 10. : 공사추진 완료

○ 2022. 12. : 종합 시운전 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 5,059백만원 → (변경) 5,359백만원