109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
보훈회관 건립	2,773	2,523	250	-	-	2022	2019	100
송내동 행정복지센터 신축	10,862	1,366	1,491	5,246	2,759	2024	2021	60
생연동 원도심 상권 진흥구역 지정 지원	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2024	2020	50
자연휴양림 세미나실 및 객실 신축	11,174	3,453	3,505	4,216	-	2023	2021	60
탑동계곡 편익시설 조성	5,450	4,456	994	-	-	2022	2021	100
송내지구 주차장 조성	4,010	2,909	1,101	-	-	2022	2019	100
중앙동 일원 주차장 조성	3,241	2,399	842	-	-	2022	2021	100
미세먼지 차단 숲 조성	2,000	-	2,000	-	-	2022	2021	100
어수로 도로확장	21,215	18,544	1,693	978	-	2023	2018	85
동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업	3,875	2,994	62	819	-	2023	2019	70
지행동~시가지 우회도로 연결사업	14,000	147	6,206	3,503	4,144	2025	2019	10
선업교~하패리 도로개설공사	2,000	-	3	377	1,620	2024	2020	5
어수로 전선 지중화	6,246	3,732	1,598	916	-	2023	2019	85
국도 3호선 도로 확포장 공사	19,000	291	43	7,116	11,550	2026	2019	10
하봉암교~평화로 도로 개설	2,500	-	1,438	600	462	2024	2021	50
왕방터널 관리용역	2,400	-	267	704	1,429	2025	2022	16
곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강	2,192	1,276	916	-	-	2022	2020	100

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로 (소로1-21호선) 개설	7,100	2,695	1,757	1,684	964	2024	2019	60
상패동 6통 도시계획도로 (소로1-19호선) 개설	2,400	1,199	657	372	172	2024	2020	81
상패동 수변공원 앞 도시계획도로 (소로1-20호선) 개설	2,460	1,624	836	-	-	2022	2021	100
소요초교 동측도시계획도로 (소로3-370호선 외 1개소) 개설	3,000	-	70	100	2,830	2025	2022	5
상패동 동성교회 인근 도시계획도로 (소로2-327호선)개설	4,000	-	70	100	3,830	2025	2022	2
조산마을회관 인근 도시계획도로 (소로1-100호선) 개설	3,500	-	6	62	3,432	2025	2022	2
경기북부 어린이박물관 편의시설 조성	11,000	6,200	745	4,055	-	2023	2018	50
캠프소요 in 경기	4,000	1,200	600	2,200	-	2023	2019	30
산림치유원 자연누림 (산림레포츠 시설) 조성	15,200	1,180	4,589	9,431	-	2023	2019	65
행복드림센터 (시민수영장) 건립	27,400	6,604	8,692	7,546	4,558	2024	2019	55
복합문화 커뮤니티센터 건립	30,000	7,139	9,381	10,480	3,000	2024	2019	53
반다비체육센터 (장애인스포츠재활센터) 건립	19,600	10,700	6,509	2,391	-	2023	2019	90
스마트 관망관리 인프라 구축	5,359	4,144	1,215	-	-	2022	2021	100
노후 정수장 정비	5,704	-	600	3,062	2,042	2024	2022	64
하수 색도 개선	4,000	-	124	83	3,793	2024	2022	30

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

보훈회관 건립

담당자

복지정책과 김욱(☎860-2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018년 민선7기 시장 공약사항[국가유공자를 위한 보훈회관 건립]

○ (구)보훈회관은 30년 이상 되어 시설 열악·협소(보훈회관 신축 필요)

○ 분산된 보훈단체를 통합 운영 및 쾌적한 환경 제공(보훈가족 예우)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1.∼2022. 2.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 294-2(삼육사로 1051)

○ 규 모 : 지상 4층/연면적 995.77㎡/면적 611㎡(사무실 9개, 다목적실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,773백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,773	2,523	250
국 비	500	250	250
시 도 비	80	80
시군구비	2,193	2,193
지방채
민간자본
기타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 8. : 보훈회관 부지선정 및 건립계획

○ 2020. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2020. 1. ∼ 2021. 3. : 사전 행정절차, 설계용역 추진

○ 2021. 4. : 보훈회관 공사착공(건축·기계, 통신, 전기, 소방 공사)

○ 2022. 1. : 보훈회관 공사준공(건축·기계, 통신, 전기, 소방 공사)

○ 2022. 2 : 보훈회관 개관식

□ 향후계획

○ 연중 : 보훈회관 관리운영

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

송내동행정복지센터 신축

담당자

회계과 김종헌(☎860-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 집합건축물인 싸이언스타워에 위치한 송내동 행정복지센터는 외부

입주기관과 통로 및 공용부 공간을 공유하고 있어, 행정수요 및 인구 증가로

인한 행정 업무와 문화·복지 서비스 제공 공간이 부족한 상태로, 행정복지

센터의 기능 유지가 어려운 실정임.

○ 행정복지센터의 행정서비스 제공과 주민자치 프로그램 및 취미활동 등을

위한 공간을 확보할 필요가 있으나, 청사 증축에 대한 행정적․법적 절차가

복잡하여 이행하기 어려운 실정으로, 독립적인 행정복지센터의 신축이 필요함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 동두천시 690~691번지

○ 규 모 : 지하1~지상3층 철근콘크리트구조 업무시설, 연면적 2,991.97㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,862백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,862	1,366	1,491	5,246	2,759
국 비
시 도 비
시군구비	10,862	1,366	1,491	5,246	2,759
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 송내동행정복지센터 신축 기본 및 실시설계 완료

○ 현재 공사 중(가시설 공사)

□ 향후계획

○ 사업완료 및 개청(2024. 12. 예정)

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

생연동 원도심 상권진흥구역지정 지원

담당자

일자리경제과

김의정(☎860-2309)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지와 원도심의 상권 분화로 상권의 슬럼화가 가속화 되어가고 있음. 이는 원도심 상권의 하드웨어(H/W) 및 소프트웨어(S/W) 요소의 노후화로 구매층에 흥미를 끌만한 특징이 없는 것이 문제이므로 전통시장(2개소) 및 골목상권(3개소)을 경기도형 상권진흥구역으로 지정해 다양한 지원 사업을 통해 최신 상권 트렌드를 구축하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. 1.~2024. 12. 31.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연로 97-1 일원

○ 규 모 : 대지면적 120,650㎡, 점포수 371개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
국 비
시 도 비	2,000	500	500	500	500
시군구비	2,000	500	500	500	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2021.~2022. : 1년차 및 2년차 사업 추진 완료

□ 향후계획

○ 2023. 1.~12. : 3년차 사업 추진

○ 2024. 1.~12. : 4년차 사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

자연휴양림 세미나실 및 객실 신축

담당자

관광휴양과 박성호(☎860-3255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주중 및 비수기 단체방문객 유도를 위한 대형행사, 워크숍 등에 활용 가능한       세미나실 건립

○ 치유의 숲 및 놀자숲 운영, 산림복지단지 사업 추진에 따른 방문객 증가에       대비해 세미나실 상부에 숙박시설 추가조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. ~ 2023. 10.

○ 위 치 : 탑동동 산16번지 일원

○ 규 모 : 지상3층, 연면적 2,897.91[eqn: m ^{2}]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,174백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,174	3,453	3,505	4,216
국 비
시 도 비	4,500		700	3,800
시군구비	6,674	3,453	2,805	416
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2020. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 9. : 세미나실 3층 규모 확대 조성 확정

○ 2020. 10. ~ 2022. 5. : 기본·실시설계 및 각종 행정절차 추진

○ 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 7. : 건설사업관리용역 착수 및 본공사 및 전기·통신·소방공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 10. : 공사준공(예정)

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초		변 경		증액사유
	사업비	사업규모	사업비	사업규모
계	10,514		11,174
설계비	286	-	286	-	-
공사비	9,639	연면적 2,807㎡	9,743	연면적 2,897㎡	· 연면적 변경 : 증90㎡ · ‘22년 노무비. 자재단가, 상반기 표준품셈 반영 · 경기도 계약심사 반영
감리비	566	-	1,122	-	· 안전관리 전담 인력 배치 · 공사비 증가 반영 · ‘22년 건설기술자 임금 반영
부대비	23	-	23	-	-

사업명

탑동계곡 편익시설 조성

담당자

안전총괄과 황원준(☎860-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 탑동계곡을 점거하고 있는 불법시설물을 철거하고 친수공간을 조성하여 청정한 계곡을 시민들에게 환원하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. ~ 2022. 11.

○ 위 치 : 탑동동 364-2번지 일원 (탑동계곡 일원)

○ 규 모 : 계곡 물놀이장(11개소) 및 쉼터(430m), 주차장 3개소(106면), 둘레길(3.5km) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,450	4,456	994
국 비
시 도 비
시군구비	5,450	4,456	994
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021.  5. 13. 공사 착공

○ 2022. 11. 28. 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

송내지구 주차장 조성

담당자

교통행정과 정지은(☎860-2432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 송내택지지구 내 주차시설 부족으로 인한 시민들의 불편을 해소하고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 동두천시 송내동 681번지

○ 규 모 : 부지면적 1,595㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,010백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,010	2,909	1,101
국 비
시 도 비
시군구비	4,010	2,909	1,101
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020.  4. : 도시관리계획 결정(변경) 공람․공고

○ 2020.  5. : 주민설명회 실시

○ 2020.  7. : 송내지구 지구단위계획 및 도시관리계획 결정(변경) 완료

○ 2020. 10. : 건축허가 및 실시계획 고시

○ 2020. 12. : 공사 착공

○ 2021. 12. : 골조 및 타설 등 주차장 공사 완료

○ 2022.  5. : 콘크리트 마감 타설 및 외부 금속공사 추진

○ 2022.  8. : 전기, 통신, 외부 조경공사 추진

○ 2022. 12. : BF인증 및 행정절차 및 주차장 준공

□ 사업변경 내역

(단위 : 억원)

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			40.1
공사비	소계		40.1
	▪건축공사	□2,480.12㎡ × 866,895원/㎡ = 2,150백만원	21.5
	▪토목공사	□350㎡ × 290,000원/㎡ = 100백만원	1.0
	▪기계공사	□ELEV 1대 설치외 기계설비공사 1식 = 270백만원	2.7
	▪통신공사	□차량차단기 2대 설치 외 통신공사 1식 = 480백만원	4.8
	▪전기공사	□전기충전기 1대 설치 외 전기공사 1식 = 560백만원	5.6
	▪소방공사	□스프링클러 300개설치 외 소방공사 1식 = 410백만원	4.1
용역비	소계		0.4
	▪설계비	□실시설계 1식	0.4

사업명

중앙동 일원 주차장 조성

담당자

교통행정과 정지은(☎860-2432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 주차장 부족으로인한 시민들과 인근 상가 이용자들의 불편을 해소하고 불법주정차 차량 증가로 인한 교통 통행 불편을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 10.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 612-1

○ 규 모 : 대지면적 1,934㎡ / 45면 규모 주차장 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,241백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,241	2,399	842
국 비	700	700
시 도 비
시군구비	2,541	1,699	842
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 1. ~ 2022. 5. : 토지 및 지장물 보상 완료

○ 2021. 9. ~ 2022. 10. : 주차장 공사(철거 포함) 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

(단위 : 억원)

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			32.5
공사비	소계		7
	▪토목공사	토 공 : 50,000,000 원 (1식) 배수공 : 우수관 80m (D450m/m) = 80,000,000 원 구조물공 : 140m (옹벽 H=1.0m) = 120,000,000 원 포장공 : 18 a (아스콘, t=450m/m) = 170,000,000 원 부대공사 : 100,000,000 원 (휀스 및 기타 부대시설 1식)	5.2
	▪전기공사	□4,000,000×10주 = 40,000,000 원	0.4
	▪통신공사	□6,000,000 원 (1식)	0.1
	▪CCTV공사	□2,500,000 원×10ea = 25,000,000 원	0.3
	▪관제시스템	□100,000,000 원 (1식)	1
용역비	소계		2.5
	▪설계비	□실시설계+현황측량 □실시설계 : 직선보간법 적용(엔지니어링사업대가 기준) 당해공사비요율 = 4.85 , 공사비 : 380,000,000 원 (380,000,000 × 4.85) ÷ 100 = 18,430,000 원 □현황측량(전통시장 주차장 측량비 참조) : 819,000원	0.2
	▪철거비	□철거비 1식	2.3
보상비	소계		23
	▪토지	□1,785m² × 1,120,000원/㎡ = 1,999,200,000원	20
	▪건물	□650.7m² × 324,264원/㎡ = 210,998,650 원	3

사업명

미세먼지 차단 숲 조성

담당자

공원녹지과 조은미(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 공원 대상지로 2020. 7. 1.일자로 자동실효 방지 및 실효에 따른 난개발, 공원감소에 대처하고 공원조성을 통해 생태계 보존 및 부족한 공원 확보

□ 사업 개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 동두천지방산업단지, 경원선, 평화로 등

○ 규 모 : 미세먼지 차단 숲 조성 2ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000		2,000
국 비	1,000		1,000
시 도 비	300		300
시군구비	700		700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022. 3. 16. : 도시숲 등의 조성·관리 심의 위원회 자문

○ 2022. 4. 23. : 실시설계 용역추진

○ 2022. 6. 23. : 공사 및 감리용역착수

○ 2022. 12. 9. : 공사완료

□ 향후 계획

○ 사업대상지 내 수목 및 시설물 하자 등 지속 관리

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

어수로 도로확장

담당자

도로과 한재민(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 도로의 기능 강화를 위해 기존 도로확장구간(동두천중앙역~어수

사거리)과 연계, 4차선으로 확장하여 시가지 도로이용 편의 제공 및 시민

불편을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2023.

○ 위 치 : 어수사거리~신천교사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=270m, B=14.5→20m(2→4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	21,215	18,544	1,693	978
국 비	9,350	9,196	69	85
시 도 비
시군구비	11,865	9,348	1,624	893
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2018.  5.  2. : 실시설계용역 착수

○ 2018. 10. 28. : 실시설계용역 준공

○ 2019.  6. 27. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023.  4. 10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

동두천중앙역 주변 보행환경 개선

담당자

도로과 한재민(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신시가지와 연결되는 역세권 도로의 기능성 확보를 위해 협소한 기존

도로폭 조정과 보도 신설을 통해 도로이용 편의 증진과 안전 도모.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 제일산부인과 사거리~부영5단지 사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=159m, B=8→15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,875백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,875	2,994	62	819
국 비	2,700	2,477	45	178
시 도 비
시군구비	1,175	517	17	641
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2019. 10.  4. : 실시설계용역 착수

○ 2020.  9. 21. : 실시설계용역 준공

○ 2021.  6. 21. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 11. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

지행동∼시가지우회도로 연결

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020년 시가지 우회도로가 개통되었으나 중로1-6호선이 미개설되어 인근

아파트 등 시민들의 교통편의 제공을 위한 도로 개설 필요.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2025.

○ 위 치 : 지행동 휴먼빌2차 ∼ 송내동 시가지우회도로

○ 규 모 : 도로개설 L=500m,, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,000	147	6,206	3,503	4,144
국 비	6,000	6	2,991	3,003
시 도 비
시군구비	8,000	141	3,215	500	4,144
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 11. 14. : 실시설계용역 착수

○ 2023.  7. 21. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2023.  9. : 공사 착공

○ 2026. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

선업교~하패리 도로개설 공사

담당자

도로과 한재민(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선업교~양주시 하패리 구간은 협소한 도로폭과 보도 미설치로 인해 통행

불편 및 보행자 사고위험이 상존하는 구간으로, 도로개선을 통해 안전하고

쾌적한 도로교통망 제공.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 선업교 ~ 양주시 무궁화교

○ 규 모 : 도로개설 L=297m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000		3	377	1,620
국 비
시 도 비
시군구비	2,000		3	377	1,620
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019.  8. 26. : 실시설계용역 착수

○ 2019. 11. 25. : 실시설계용역 준공

○ 2022.  9. 27. : 보상계획 공고

□ 향후계획

○ 2024.  3. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

어수로 전선 지중화

담당자

도로과 한재민(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어수로 도로확장사업과 병행 추진하는 사업으로 동두천 중앙역 역세권

도로의 기능확보를 위해 도시미관 저해요소를 제거하여 보행자 중심의

보행환경 제공 및 원도심 활성화 기여.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 동두천중앙역 ~ 신천교사거리

○ 규 모 : 전선지중화 L=1.1㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,246백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,246	3,732	1,598	916
국 비
시 도 비
시군구비	3,190	1,989	785	416
지 방 채
민간자본	3,056	1,743	813	500
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2020. 12. 23. : 사업 선정(한국전력공사)

○ 2021.  3.  2. : 협약 체결(한전)

○ 2021.  6. 30. : 협약 체결(KT, 기타 통신사)

○ 2021. 10. 19. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023.  4. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

국도3호선 도로확포장공사(송내동)

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평화로의 기존도로 협소로 인한 교통 정체와 사고 위험이 항시 내포하고 있어 시가지 교통정체 해소와 교통사고 예방을 위한 도로 확장 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2026.

○ 위 치 : 송내삼거리~롯데마트 앞 사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=1.09㎞, B=20m→35m, 교량 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,000	291	43	7,116	11,550
국 비	5,000			1,900	3,100
시 도 비
시군구비	14,000	291	43	5,216	8,450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 11. 14. : 실시설계용역 착수

○ 2023.  7. 21. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2023.  9. : 공사 착공

○ 2026. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

하봉암교~평화로 도로 개설

담당자

도로과 한재민(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신설 하봉암교와 기존 하상도로 접속부 종단구배가 극심하여 교량기준에

맞추어 도로 선형 및 구배, 폭원 등을 조정하여 지역주민 등 도로이용객

불편 해소 및 안전한 도로교통망 구축.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024.

○ 위 치 : 하봉암교 ~ 평화로

○ 규 모 : 도로개설 L=134m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500		1,438	600	462
국 비
시 도 비
시군구비	2,500		1,438	600	462
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2021. 12. 16. : 실시설계용역 착수

○ 2022.  4. 14. : 실시설계용역 준공

○ 2023.  7. 17. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2024.  7. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

왕방터널 관리용역

담당자

도로과 이재오(☎860-2296)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로이용자의 안전과 쾌적한 도로교통 환경조성 도모

○ 관련법에 따른 터널의 지속적 점검을 통한 사고 예방, 및 대응 철저

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2025. 7.

○ 위 치 : 동두천시 왕방터널

○ 규 모 : 지방도 364호선 왕방터널(2,080m) 유지관리

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,400		267	704	1,429
국 비
시 도 비
시군구비	2,400		267	704	1,429
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

○ 2022. 7.  관리용역 계약

○ 2022. 8.~12.  왕방터널 관리용역 (1차-6개월) 수행 완료

□ 향후계획

○ 2023. 1. ~ 12.  왕방터널 관리용역 (2차-12개월) 수행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

곡촌교 외 14개소 내진성능 및 보수ㆍ보강

담당자

도로과 임형묵(☎860-2289)

□ 사업목적 및 필요성

○ 곡촌교 외 14개소 교량에 대한 내진성능평가 결과 내진 취약, 포장 균열, 콘크리트 열화, 신축이음 파손 및 미설치, 교량 하부 부식 등이 발생하여 주요부재의 내구성 향상 및 기능 증진을 위해 보수ㆍ보강공사를 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 4.

○ 위 치 : 동두천시 곡촌교 외 14개소 교량

○ 규 모 : 관내 교량 15개소 보수ㆍ보강

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,192백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,192	1,276	916
국 비
시 도 비
시군구비	2,192	1,276	916
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2020. 10. : 곡촌교 외 14개소 내진성능 및 보수보강공사 실시설계용역 착수

○ 2021. 4. : 곡촌교 외 14개소 내진성능 및 보수보강공사 실시설계용역 준공

○ 2021. 9. : 곡촌교 외 14개소 내진성능 및 보수보강공사 착공

○ 2022. 4. : 곡촌교 외 14개소 내진성능 및 보수보강공사 준공

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

상패동 약수암～경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선)개설

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○도시계획도로 개설을 통해 접근성을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충을      통해 쾌적한 주거 환경을 조성하여 지역의 발전 역량을 개선하며, 법면 보강 및      배수시설 확충을 통해 우기시 산지부 토사 및 우수 유출을 저감함으로써      주민 피해 및 불편을 해소하고, 소방도로 확보를 통해 긴급 차량의 접근성을      개선함으로써, 각종 재해·재난상황 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 5.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 32-85번지∼22-27번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=416m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,100	2,695	1,757	1,684	964
국 비
시 도 비
시군구비	7,100	2,695	1,757	1,684	964
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○2019. 11. ~ 2020. 3. 실시설계용역 착수 및 완료

○2020.  4. 실시계획인가완료 및 보상착수

○2021.  8. 보상완료

○2021.  9. 총사업비 변경 보고

○2022.  3. 공사 착공

□ 향후계획

○2024. 5. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○공사원가 및 감정평가결과 보상비 상승으로 인한 총사업비 변경

- 당초 : 5,530백만원(전액시비)

- 변경 : 7,100백만원(전액시비)

사업명

상패동 6통

도시계획도로(소로1-19호선) 개설

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○도시계획도로 개설을 통해 접근성을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충을      통해 쾌적한 주거 환경을 조성하여 지역의 발전 역량을 개선하며, 법면 보강 및     배수시설 확충을 통해 우기시 산지부 토사 및 우수 유출을 저감함으로써      주민 피해 및 불편을 해소하고, 소방도로 확보를 통해 긴급 차량의 접근성을     개선함으로써, 각종 재해·재난상황 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 5.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 14-59번지~22-27번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=184m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,400	1,199	657	372	172
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	1,199	657	372	172
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81%)

○2019. 11. ~ 2020. 1. 실시설계용역 착수 및 완료

○2020.  4. 실시계획인가완료 및 보상착수

○2021.  8. 보상완료

○2022.  3. 공사 착공

□ 향후계획

○2023.  6. 토목공사 타절

○2023. 11. 지장물 수용재결 및 불확지 공탁

○2024.  3. ~ 5. 잔여공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○공사원가 및 감정평가결과 보상비 상승으로 인한 총사업비 변경

- 당초 : 2,300백만원(전액시비)

- 변경 : 2,400백만원(전액시비)

사업명

상패동 수변공원 앞

도시계획도로(소로1-20호선)개설

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○도시계획도로 개설을 통해 접근성을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충을      통해 쾌적한 주거 환경을 조성하여 지역의 발전 역량을 개선하며, 법면 보강 및      배수시설 확충을 통해 우기시 산지부 토사 및 우수 유출을 저감함으로써      주민 피해 및 불편을 해소하고, 소방도로 확보를 통해 긴급 차량의 접근성을      개선함으로써, 각종 재해·재난상황 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ~ 2022. 10.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 14-67번지∼10-58번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=159m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,460	1,624	836
국 비
시 도 비
시군구비	2,460	1,624	836
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○2019. 10. ~ 2020. 1. 실시설계용역 착수 및 완료

○2020.  2. ~ 2020. 4. 실시계획인가완료 및 보상착수

○2020. 10. 보상완료

○2021.  4. 공사 착공

○2022.  7. 총사업비 변경 보고

○2022. 10. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○민원발생 사항으로 인한 총사업비 변경

- 당초 : 2,400백만원(전액시비)

- 변경 : 2,460백만원(전액시비)

사업명

소요초교 동측 도시계획도로

(소로3-370호선외 1개소) 개설

담당자

도시재생과 신명범(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 소요초교 동측 ~ 신천 제방도로 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=420m, B=6~15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000		70	100	2,830
국 비
시 도 비
시군구비	3,000		70	100	2,830
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2022. 10. 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2023.  4. 실시설계용역 (도시관리계획 변경 절차 진행)

○ 2023. 10. 실시설계용역 완료

○ 2024. 12. 보상완료

○ 2025.  3. 착공

○ 2025. 12. 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

상패동 동성교회 인근

도시계획도로(소로2-327호선) 개설

담당자

도시재생과 신명범(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 상패동 동성교회 동측 ~ 골프장 북측 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=394 B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000		70	100	3,830
국 비
시 도 비
시군구비	4,000		70	100	3,830
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2022. 10. 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2023.  4. 실시설계용역 완료

○ 2023.  7. 실시계획 인가 및 보상 준비

○ 2024.  9. 착공

○ 2025. 12. 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

조산마을회관 인근 도시계획도로(소로1-100호선) 개설

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 탑동동 금말교 ~ 조산마을회관 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=419, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500		6	62	3,432
국 비
시 도 비
시군구비	3,500		6	62	3,432
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2022. 11. 실시설계용역 착수 및 예정지 지적좌표 측량

□ 향후계획

○ 2023. 8. 실시계획 인가 및 보상 준비

○ 2024. 10. 보상 완료 및 공사 착공(보상 완료 시)

○ 2025. 12. 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

경기북부 어린이박물관 편의시설 조성

담당자

투자개발과 강정훈(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ∼ 2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 161번지 일원

○ 규 모 : 19,500㎡ (유원지 놀이 및 편의시설, 기반시설(도로) 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,000	6,200	745	4,055
국 비	5,500	3,100	745	1,655
시 도 비
시군구비	5,500	3,100		2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018.  9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021.  1. : 보상 착수

○ 2022.  7. : 공사 착수

○ 2022. 12. : 보상 완료

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업위치 : 당초(상봉암동 8번지 일원), 현재(상봉암동 161번지 일원)

○ 사업기간 : 당초(2018. 1. ∼ 2019. 12.), 현재(2018. 1. ∼ 2023. 12.)

○ 사업규모 : 당초(A=19,618㎡), 현재(A=19,500㎡)

○ 사업내용 : 당초(사계절 썰매장, 작은식물원 및 숲길조성 등), 현재(유원지 놀이시설, 산책로, 조경 식재 등)

사업명

캠프 소요 in 경기

담당자

투자개발과 강정훈(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ∼ 2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 164-3번지 일원

○ 규 모 : 공원, 유원지 등 기반 및 편의시설 조성(44,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	1,200	600	2,200
국 비
시 도 비	2,000	1,200		800
시군구비	2,000		600	1,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 11. : 경기도 투자사업 심사 완료

○ 2019. 11. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 11. : 소규모 환경영향평가 협의 완료

○ 2022.  7. : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초(2019. 10. ~ 2021. 12.), 현재(2019. 10. ~ 2023. 12.)

○ 사업규모 : 당초(A=11,000㎡), 현재(A=44,000㎡)

○ 사업내용 : 당초(자연공원 조성 11,000㎡), 현재(공원 조성 44,000㎡)

사업명

산림치유원 자연누림 조성

담당자

투자개발과 박용군(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시 면적 중 약68%를 차지하는 우수한 산림자원을 보유하고 있음에 따라,

○ 경기도 최초 산림복지단지 조성을 통한 다양한 산림복지서비스 제공으로 관광객 유치 및 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2023.

○ 위 치 : 동두천시 탑동동 산16 일원

○ 규 모 : 915,570㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,200	1,180	4,589	9,431
국 비	11,200	405	3,490	7,305
시 도 비	2,000	498	650	852
시군구비	2,000	277	449	1,274
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2022. 5. : 경기도 계약심사 완료(공사)

○ 2022. 6. : 동두천 산림복지단지 실시계획 승인

○ 2022. 8. : 공사 착수

○ 2023. 7. : 산림복지단지 사업 추진 중

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 준공

사업명

행복드림센터(시민수영장) 건립

담당자

투자개발과 김재상(☎860-2583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신시가지 조성 이후 급격히 쇠락한 원도심에 수영장, 키즈헬스케어센터,        등이 포함된 복합건축물을 건립하여 시민들의 삶의 질 향상과 원도심        활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ∼ 2024.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 594-1번지

○ 규 모 : 부지면적 4,560㎡, 건축연면적 7,764㎡(지하2층/지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,400	6,604	8,692	7,546	4,558
국 비	3,000	2,000	1,000
시 도 비	15,400	4,000	4,191	4,600	2,609
시군구비	9,000	604	3,501	2,946	1,949
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2020.  7. : 공공건축사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료

○ 2020. 10. : 건축설계용역 착수

○ 2021.  7. : 건축설계용역 완료

○ 2021. 10. : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2024.  6. : 준공

사업명

복합문화커뮤니티센터 건립

담당자

투자개발과 박성윤(☎860-2592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청년창업지원, 생활문화, 동아리, 청소년 상담, 청소년 교육활동, 도서관 및 지역영상미디어센터 등 복합적으로 구성된 문화시설을 건설하여 시민 모두가 함께 어우러져 이용할 수 있도록 복합문화커뮤니티센터 건립을 통해 원도심 주민의 문화복지 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2024.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 557-3번지 외 8필지

○ 규 모 : 건축연면적 9,420㎡(지하1층/지상7층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	30,000	7,139	9,381	10,480	3,000
국 비
시 도 비	18,500	3,050	5,565	6,885	3,000
시군구비	11,500	4,089	3,816	3,595
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

○ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2022.  1. : 토지 소유권 이전 완료 및 공사 착수

□ 향후계획

○ 2023. 7. : 지상4층 바닥 슬래브 타설

○ 2024. 6. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초(부지면적 2,978㎡, 연면적 6,218㎡, 지하2층/지상4층),  변경(부지면적 3,035㎡, 연면적 9,420㎡, 지하1층/지상7층)

사업명

장애인 스포츠 재활센터 조성

담당자

투자개발과 박지훈(☎860-2597)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 장애인의 욕구와 필요에 부합한 스포츠와 재활을 접목한 장애인체육 시설을 조성하여 장애 주민들의 재활 의지 고취 및 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상패동 55번지 외 3필지

○ 규 모 : 건축연면적 4,254㎡(지하1층/지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,600	10,700	6,509	2,391
국 비	4,000	3,000	1,000
시 도 비	11,000	4,800	4,279	2,021
시군구비	4,500	2,900	1,230	370
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2020. 5. : 2차 토지매입(상패동 60-3번지 외 1필지)

○ 2021. 5. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2021. 8. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 4. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사 업 명 : 당초(장애인 스포츠 재활센터), 변경(반다비 체육센터)

○ 사업규모 : 당초(부지면적 3,228㎡, 연면적 6,000㎡, 지하1층/지상3층),  변경(부지면적 5,670㎡, 연면적 4,254㎡, 지하1층/지상3층)

사업명

스마트 관망관리 인프라 구축

담당자

환경사업소 양화석(☎860-3188)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수돗물 전 공급과정에서 실시간 감시체계를 구축하여 수도 사고발생을

사전에 방지하고 사고 발생 시 신속한 대응 및 조치가 가능하도록 스마트

관망관리 인프라를 구축하여 수돗물에 대한 불안감을 잠재우고 음용수로써의      국민신뢰를 회복하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 동두천시 전역

○ 규 모 : 지방상수도 스마트 관망관리 인프라시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,359백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,359	4,144	1,215
국 비	3,751	2,901	850
시 도 비
시군구비	1,608	1,243	365
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020.  2. : 사업추진 설명 및 도-시․군 간 회의(경기도 수자원본부)

○ 2020.  3. : 사업추진 계획서 제출(동두천시⇒경기도)

○ 2020.  9. : 2021년(1차) 국고보조금 가내시 통보(환경부⇒동두천시)

○ 2021.  5. : 사업 위․수탁 협약체결(동두천시-한국수자원공사)

○ 2021.  6. : 사업 기본사업 계획 수립완료 및 실시설계 용역 착수

○ 2021.  8. : 2021년 국고보조금 내역조정 통보(사업비 증액)

○ 2021.  9. : 스마트 관망관리 인프라 구축 공사 착공(물품구매 발주)

○ 2022. 12. : 스마트 관망관리 인프라 구축 완료, 시운전 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 5,059백만원 → (변경) 5,359백만원

사업명

노후 정수장 정비

담당자

환경사업소 양화석(☎860-3188)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 동두천정수장의 공정개선(시설개량)을 통하여 소형생물(유충) 대응강화 및 정수시설 운영 안정화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2024.

○ 위 치 : 동두천정수장(동두천시 평화로3208번길 1)

○ 규 모 : 노후정수장 정수공정 개선(Q=40,000㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,704백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,704		600	3,062	2,042
국 비	2,852		300	1,531	1,021
시 도 비
시군구비	2,852		300	1,531	1,021
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64%)

○ 2022.  6. : 노후정수장 정비사업 위․수탁 협약 체결(한국수자원공사)

○ 2022. 11. : 동두천(정) 폴리아민주입설비 제조구매설치 준공

○ 2023.  4. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2023.  5. : 사전기술 검토 신청

○ 2023.  7. : 동두천(정) 생활침전지 파동발생장치 제조구매설치 준공

○ 2023.  7. : 동두천(정) 침전지 자동 미세스크린 제조구매 및 도입

□ 향후계획

○ 2023.  8. : 사전기술 검토 승인(예정)

○ 2023. 10. : 공사발주

○ 2024. 12. : 사업완료(준공)

사업명

하수 색도 개선

담당자

환경사업소 방완수 (☎860-3204)

□ 사업목적 및 필요성

○ 색도개선 시설을 설치하여 맑고 깨끗한 신천의 청정수질을 되찾고 시민들에게 쾌적한 환경을 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 봉동로 27, 환경사업소

○ 규 모 : 18,000㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000		124	83	3,793
국 비	2,000		120		1,880
시 도 비	1,000		2	41.5	956.5
시군구비	1,000		2	41.5	956.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 2021. 6. 21. 2022년 색도개선 사업비 국비 보조금 신청 (환경부)

○ 2022. 10.~11. 기본 및 실시설계 입찰·계약

○ 2022. 11.~2023. 11. 기본 및 실시 설계용역 추진 중 (12개월)

※ 2023. 4.~9. 공법선정 중

□ 향후계획

○ 2024. 1.~2024. 12. 색도 저감시설 설치공사 및 준공