□ 주요 투자사업 추진현황

우리 동두천시에서 ‘24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

‣ 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
지역영상 미디어센터 조성	2,720	1,074	1,646	-	-	2024	2023	100
송내동행정복지센터 신축	9,741	3,302	6,439	-	-	2024	2021	100
꿈일다 프로젝트	2,127	100	2,012	15	-	2025	2022	99
생연동 원도심 상권 진흥구역 지정 지원	4,000	3,000	1,000	-	-	2024	2020	100
중앙로상점가 플리마켓 행사	290	-	290	-	-	2024	2024	100
폴리텍 동두천교육원 설립부지 매입	5,906	-	5,906	-	-	2024	2024	100
산업단지 아름다운거리 조성 플러스 사업	2,926	-	-	1,550	1,476	2026	2024	0
상패근린공원 조성	6,000	749	998	2,253	2,000	2026	2022	0
생연문화공원 조성	2,200	1,050	1,050	1,150	50	2025	2024	40
소요산 체육공원	16,500	-	1,500	15,000	-	2029	2024	5
반려동물 테마파크 조성	25,000	106	63	8,500	16,331	2027	2023	0
소요내음공원 조성(前상봉암2 역사공원 조성)	15,270	3,980	734	2,106	8,450	2029	2024	5
지행동~시가지 우회도로 연결사업	14,000	11,804	1,602	1,846	-	2026	2019	70
선업교~하패리 도로개설공사	2,000	1,000	-	1,000	-	-	2020	40
국도3호선 도로 확포장공사(송내동)	25,500	10,700	5,998	5,500	6,790	2026	2023	50
하봉암교~평화로 도로 개설	2,500	1,671	628	-	-	2024	2021	100
소요초교 주변 도시계획도로 개설사업	8,100	66	46	500	7,400	2028	2022	20
캠프 북캐슬 주변 도시계획도로개설	8,000	44	39	1,000	6,850	2028	2022	20
왕방마을 갈라교~ 도립병원 간 도로확포장 공사	11,000	70	221	-	6,790	2027	2024	40
왕방터널 관리용역	2,125	972	727	426	-	2025	2022	79
상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로 (소로1-21호선) 개설	6,788	6,181	607	-	-	2024	2020	100
상패동 6통 도시계획도로 (소로1-19호선) 개설	2,514	2,353	161	-	-	2024	2020	100
소요초교앞~동안교 도시계획도로 (소로3-304호선) 개설	4,270	2,104	1,396	770	-	2025	2020	40
상패동 동성교회 인근 도시계획도로 (소로2-327호선)개설	4,000	1,618	852	530	1,000	2026	2022	40
소요산역 북서측 도시계획도로 (소로2-312호선 외 3개소) 개설공사	8,601	3,586	17	1,000	3,998	2027	2020	30
종이골 느티나무 ~ 제생병원 도시계획도로 (소로3-371호선) 개설	3,650	445	605	800	1,800	2027	2021	30
조산마을회관 인근 도시계획도로 (소로1-100호선) 개설	3,500	370	250	500	2,380	2027	2022	20
소요초교 동측도시계획도로 (소로3-370호선 외 1개소) 개설	3,000	106	64	600	2,230	2027	2022	20
소요산역 건너편 도시계획도로 개설	2,500	1,350	816	334	-	2027	2023	20
불현지구 남측 전선 지중화	2,400	2,104	12	6	278	2028	2021	20
경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성	17,000	7,236	3,843	4,121	1,800	2027	2018	70
캠프 소요 in 경기	4,000	2,740	1,260	-	-	2024	2019	100
산림치유원 자연누림 (산림레포츠 시설) 조성	15,427	12,423	3,004	-	-	2024	2019	100
행복드림센터 (시민수영장) 건립	31,565	19,107	12,446	12	-	2024	2019	100
복합문화 커뮤니티센터 건립	30,000	18,765	11,235	-	-	2024	2019	100
생연동 소규모 주택정비 관리지역 기반시설조성	25,000	4,557	4,522	4,950	10,971	2027	2022	40
소리이음마당 조성	18,000	16	111	453	17,420	2027	2023	10
노인회관 및 장애인회관 건립	20,029	4,352	2,257	13,420	-	2025	2022	65
(가칭)청소년특화도서관조성	3,922	-	3,922	-	-	2024	2023	100
공공건축물 (시립도서관) 그린리모델링사업	2,304	-	2,266	38	-	2025	2023	100
소요초 체육관 및 주차장 증축	4,000	2,800	1,200	-	-	2025	2023	80
노후 정수장 정비	6,879	3,662	2,042	1,175	-	2025	2022	82
하수 색도 개선	4,000	124	0	0	3,876	2026	2022	31

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동두천미디어센터 조성

담당자

홍보미래담당관 양준모(☎860-2143)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년, 청년 등 전 세대가 함께 체험할 수 있는 영상문화 공간을 조성하여       미디어 소통·문화 활동을 통한 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 9.~2024. 11.(14개월)

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 557-3(복합문화커뮤니티센터 7층)

○ 규 모 : 연면적 860㎡(260평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,720	1,074	1,646
시 도 비	1,360	537	823
시군구비	1,360	537	823

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024. 11. 20. 복합문화커뮤니티센터 개관

□ 사업변경 내역

○ 2023년 1차 변경(증 114일)

- 당초 일자 : 2024. 1. 25.

- 변경 일자 : 2024. 6. 28.

- 변경 사유 : 동두천 미디어센터가 조성되는 복합문화커뮤니티센터 공기연장에 따른 사업 기간 변경

○ 2024년 2차 변경(증 31일)

- 당초 일자 : 2024. 6. 28.

- 변경 일자 : 2024. 7. 31.

- 변경 사유 : 인테리어 공사 중 물품 발주 지연, 방송 시스템 관련 조달청 구매 업무협의 지연

○ 2024년 3차 변경(증 31일)

- 당초 일자 : 2024. 7. 31.

- 변경 일자 : 2024. 8. 31.

- 변경 사유 : 인테리어 공사 중 설계변경 (천장 높이 변경 등)

○ 2024년 4차 변경(증 81일)

- 당초 일자 : 2024. 8. 31.

- 변경 일자 : 2024. 11. 20.

- 변경 사유 : 복합문화커뮤니티센터 사용승인 지연

사업명

송내동행정복지센터 신축

담당자

회계과 김현아(☎860-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 집합건축물인 싸이언스타워에 위치한 송내동 행정복지센터는 외부 입주기관과 통로 및 공용부 공간을 공유하고 있어, 행정수요 및 인구 증가로 인한 행정 업무와 문화·복지 서비스 제공 공간이 부족한 상태로, 행정복지센터의 기능 유지가 어려운 실정임.

○ 행정복지센터의 행정서비스 제공과 주민자치 프로그램 및 취미활동 등을 위한 공간을 확보할 필요가 있으나, 청사 증축에 대한 행정적․법적 절차가 복잡하여 이행하기 어려운 실정으로, 독립적인 행정복지센터의 신축이 필요함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1.∼2024. 12.

○ 위 치 : 동두천시 송내동 690, 691번지

○ 규 모 : 지하1∼지상3층 철근콘크리트구조 업무시설, 연면적 2,991.77㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,741백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,741	3,302	6,439
시군구비	9,741	3,302	6,439

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024. 12. 19. 준공

사업명

꿈일다 프로젝트

담당자

사회복지과 주현정(☎860-2217)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구도심 침체 및 마을 공동체 시설 확보를 통한 원도심 기능 회복

○ 노후된 경로당 재건축으로 유(幼)-노(老)케어 복합 공간을 마련하여 노인의 사회 활동 참여율 증가 및 쾌적한 노인여가복지시설 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9.~2025. 12.

○ 위 치 : 평화로2508번길 16 (생연1동경로당), 중앙로 286-6(어수경로당)

○ 규 모

· 생연1동경로당 : 지상 2층, 연면적 297.9㎡

· 어수경로당 : 지상 2층, 연면적 190.74㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,127백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,127	100	2,012	15
국 비	1,695	99	1,596
시군구비	432	1	416	15

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2022. 11. : 前어수경로당 기부 채납 완료 (생연동 612-3)

○ 2023. 5. : 기본 및 실시설계, 건축기획 용역 및 BF 예비인증 용역 착수

○ 2023. 12. : 기본 및 실시설계, 건축기획 용역 및 BF 예비인증 용역 준공

○ 2024. 2.~4. : 경기도 계약 심사 의뢰 및 승인

○ 2024. 4. : 생연1동경로당 본공사 및 전기·통신·소방공사 착공

○ 2024. 5. :  어수경로당 본공사 및 전기·통신·소방공사 착공

○ 2024. 10. : 생연1동경로당 준공 완료 (경로당명 선정 : 평화로 경로당)

○ 2024. 11. : 어수경로당 준공 완료

□ 향후계획

○ 2025. 9.~12. : BF 본인증 완료 후 용역 준공

사업명

생연동 원도심 상권진흥구역 지정지원사업

담당자

일자리경제과 이샘☎031-860-2309)

□ 사업목적 및 필요성

○ 택지개발지구와 원도심 상권 분화에 따른 원도심상권 슬럼화가 빠르게 진행됨에 따라 소비자의 흥미를 끌 수 있는 상권 트렌드를 개발 및 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.~2024.

○ 위 치 : 경기 동두천시 생연로 97-1 일원

○ 규 모 : 120,650㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	3,000	1,000
시 도 비	2,000	1,500	500	-	-
시군구비	2,000	1,500	500	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 1~3년차 사업 추진 완료

○ 4년차 사업 정산 진행 중

사업명

중앙로상점가 플리마켓 행사

담당자

일자리경제과 이샘☎031-860-2309)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 골목상권 상가 거리 상권 활성화를 위한 플리마켓 행사 진행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 12. 30.~2025. 6. 27.

○ 위 치 : 경기 동두천시 중앙로 270일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 290백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	290		290
시 도 비	145		145
시군구비	145		145

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2025년 3월, 4월, 5월 총 3회 플리마켓 행사 진행 완료

사업명

폴리텍 동두천교육원 설립부지 매입

담당자

일자리경제과 배종곤(☎860-2369)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 직업교육훈련 수요에 대응하기 위한 교육원 설립부지 매입

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 3.∼2024. 12.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 523-1번지 일원

○ 규 모 : 부지 6,349㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,910백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,906		5,906
시군구비	5,906		5,906

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022. 3. : 폴리텍대학 동두천교육원 설립 추진

○ 2024. 12. : 폴리텍대학 동두천교육원 부지 매입

사업명

산업단지 아름다운거리 조성 플러스 사업

담당자

일자리경제과 한재준(☎860-2325)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 산업단지 보도 및 녹지를 정비하여 입주자의 편의 및 업무효율 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 7.∼2026. 6.

○ 위 치 : 동두천시 동두천동 534번지 일원

○ 규 모 : 토목(도로, 보도) 및 녹지 : 2.8km 개보수 공사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,926			1,450	1,476
국 비	997			485	512
시군구비	1,929			965	964

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2024. 12. : 실시설계 용역 착수

○ 2025.  5. : 공공디자인 심의 검토 완료

□ 향후계획

○ 2025. 7. : 경기도 계약심사 추진

○ 2025. 8. : 착공

○ 2026. 6. : 준공 및 정산

사업명

상패근린공원 조성

담당자

공원녹지과 박용군(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 녹색복지가 부족한 낙후된 지역의 녹색복지 불균형 해소를 위한 근린공원의       필요성이 절실한 지역의 공원조성을 통해 안전한 여가문화공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.~2026.(4년)

○ 위 치 : 상패동 산18번지 일원

○ 규 모 : A=75,558㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,000	749	998	2,253	2,000
국 비	4,800	334	996	1,800	1,670
시군구비	1,200	415	2	453	330

□ 추진상황(공사착공 단계)

○ 2023. 2. : 분묘조사용역 완료

○ 2023. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2024. 7. : 무연분묘 개장용역 착수

○ 2025. 5. : 계약심사 완료(상패근린공원 조성공사)

○ 2025. 6. : 실시계획인가 고시 및 공사 착공

□ 향후계획

○ 2025. 9. : 무연분묘 개장용역 완료

○ 2026. 6. : 공사 준공

사업명

생연 문화공원 정비사업

담당자

공원녹지과 나효상(☎031-860-2411)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해당 부지는 동두천의 중앙부에 위치하여 시민의 건강과 여가 활용      장소로 이용율이 매우 높은 지역이나 공원시설 결정 후 통일되지 않은      계획 및 관리로 산만하게 운영되고 있음

○ 부지의 효율적으로 이용을 통한 주민 여가생활 향상

□ 사업개요

○ 기 간 :  2024.~2025.

○ 위 치 : 생연동 715-5 및 715-6

○ 규 모 : A=22,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,200		1,050	1,150	50
시 도 비	75		75
시군구비	2,125		975	1,150	50

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

○ 2024. 6. : 문화공원 정비사업 착공

○ 2024. 11. : 마을정원 및 문화공원 정비사업 (1단계) 조성완료

○ 2024. 12. : 생연 문화공원 2차 정비사업 실시설계 완료

○ 2025. 6. : 생연 문화공원 2차 정비사업 착공

□ 향후계획

○ 2025. 10. 준공 예정

사업명

소요산 체육공원 조성

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2442)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획시설(체육공원) 실시계획 인가 취소로 장기간 방치된 소요산 체육공원

매매계약 체결됨에 따라 토지소유권 이전 및 공원조성 사업으로 지역내 새로운

성장동력 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024.~2029.

○ 위 치 : 소요산 체육공원(상봉암동 산6번지 일원)

○ 규 모

· 토지매입 : 상봉암동 산6번지 외 21필지, A=767,325㎡

· 재해예방사업 : 기 훼손면적 약 154,000㎡

· 기본계획 및 타당성 조사용역

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	16,500		1,500	15,000
시군구비	16,500		1,500	15,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2024. 12. : 부동산매매계약 완료 및 계약금 지급(15억 원)

○ 2025. 1. : 중도금(1차) 지급(30억 원)

○ 2025. 2. : 기 수행한 재해예방사업 약정금(1.5억원)회수, 해빙기 안전점검

○ 2025. 3. : 인명피해 우려지역 점검

○ 2025. 4. : 소요산 체육공원 지형측량 완료, 유치권 및 금전채권 주장자 진행사항 협의(대주단)

※ 협의사항 : 중도금(2차) 지급전 유치권 및 금전채권 주장자 확정을 위한 법적절차 추진

○ 2025. 5. : 재해예방사업 실시설계 완료, 재해예방사업 착수

○ 2025. 6. : 소요산 체육공원 기본계획 및 타당성 조사용역 착수

○ 2025. 7. : 중도금(2차) 지급(30억 원), 기본계획 및 타당성 조사용역 착수보고

○ 2025. 8. : 혹서기 재해예방사업 공사 정지(2주간)

□ 향후계획

○ 2025. 10. : 소요산 체육공원 재해예방사업 완료

○ 2025. 12. : 소요산 체육공원 기본계획 및 타당성 조사용역 준공

○ 2026. ~ : 유치권 해결 등을 통한 토지매입 완료 및 소유권 이전,

사업계획 확정에 따른 행정절차 이행(공원조성계획 변경, 기본

및 실시설계 등)

사업명

반려동물 테마파크 조성사업

담당자

공원녹지과 홍성철(☎860-2439)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반려동물 양육 인구 증가에 대응하여 반려 가구를 위한 문화·교육복지 공간

조성으로 양질의 반려동물 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년~2027년

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 산13번지 일원

○ 규 모 : 82,715㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	25,000	106	63	8,500	16,331
시군구비	25,000	106	63	8,500	16,331

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2023. 8.~2024. 1. : 건축기획용역 완료

○ 2024. 3. : 공공건축심의 완료

○ 2024. 9. : 경기 북부권역 반려동물 테마파크 조성 공모 선정

○ 2024. 11.: 25년 지방소멸대응기금 확보

□ 향후계획

○ 2025. 1.~2026. 6. : 설계용역 및 행정절차 완료

○ 2026. 7.~2027. 12.: 공사 준공

사업명

소요내음공원 조성

(前상봉암2 역사공원 조성)

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2442)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요산 관광지와 인접하고 소요산 확대개발사업의 중심부에 위치하고 있어,

향후 지역 내 관광자원과 유기적 연계로 새로운 성장동력 창출

○ 우수한 산림자원의 지역적 특성을 살린 테마형 산림휴양·문화·관광단지

조성으로 체류형 관광산업 기반 구축으로 가족단위 관광객 유입 및 지역경제 회복 기대

□ 사업개요

○ 기  간 : 2025.~2029.

○ 위  치 : 동두천시 상봉암동 산41번지 일원(상봉암2 역사공원)

○ 규  모 : 공원조성 271,740㎡(자유수호평화박물관 40,000㎡ 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,270백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	15,270	3,980	734	2,106	8,450
시 도 비	7,000			600	6,400
시군구비	8,270	3,980	734	1,506	2,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016. 5. : 상봉암2 역사공원 신설고시

○ 2023. 5. : 1차 토지매입 완료(10필지, 면적 176,435㎡)

○ 2024. 2. : 토지 등 감정평가(상봉암동 147-30번지 등 10필지, 42,487㎡)

○ 2024. 4. : 조성계획 수립용역 착수

○ 2024. 7. : 토지매입 일부완료(4,423㎡) *전체토지 중 86% 확보

○ 2024. 8. : 지방재정 투자심사

○ 2024.11. : 조성계획 수립 중간보고(시장, 의회), 지역균형발전사업비 확보

□ 향후계획

○ ’25. 3. : 관련협의(현충시설)

○ ‘25. 4. : 지방재정 투자심사(경기도)

○ ‘25. 7. : 기본 및 실시설계 발주

○ ‘25. 10. : 공원조성계획 입안

○ ‘25. 12. : 관련부서 협의, 재해영향평가, 도시공원위원회 심의, 공원조성계획

승인, 각종 행정절차(소규모환경영향평가, 문화재지표조사 등) 착수

○ ‘26. 5.~29. 12. : 소요내음공원 조성 착수 및 완료

사업명

지행동∼시가지우회도로 연결사업

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020년 시가지 우회도로가 개통되었으나 중로1-6호선이 미개설되어 인근

아파트 등 시민들의 교통편의 제공을 위한 도로 개설 필요.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.~2026.

○ 위 치 : 지행동 휴먼빌2차∼송내동 시가지우회도로

○ 규 모 : 도로개설 L=500m,, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,000	11,804	1,602	350	1,846
국 비	6,000	5,950	772	50
시군구비	8,000	5,854	830	300	1,846

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2019. 10. : 실시설계용역 착수

○ 2020. 3. : 실시설계용역 준공

○ 2023. 10. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2026. 4. : 공사 준공

사업명

선업교~하패리 도로개설 공사

담당자

도로과 박철희(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선업교~양주시 하패리 구간은 협소한 도로폭과 보도 미설치로 인해 통행

불편 및 보행자 사고위험이 상존하는 구간으로, 도로개선을 통해 안전하고

쾌적한 도로교통망 제공.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.~2024.

○ 위 치 : 선업교 ~ 양주시 무궁화교

○ 규 모 : 도로개설 L=270m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,000	1,000		1,000
시군구비	2,000	1,000		1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 8. : 실시설계용역 착수

○ 2019. 11.. : 실시설계용역 준공

○ 2022. 9. : 보상계획 공고

○ 2024. 2. : 수용재결신청

□ 향후계획

○ 2025. 9. : 공사 착공

○ 2026. 12. : 공사 준공

사업명

국도3호선 도로확포장공사(송내동)

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평화로의 기존도로 협소로 인한 교통 정체와 사고 위험이 항시 내포하고 있어 시가지 교통정체 해소와 교통사고 예방을 위한 도로 확장 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.~2026.

○ 위 치 : 송내삼거리~롯데마트 앞 사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=1.09㎞, B=20m→35m, 교량 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	25,500	10,700	6,036	5,500	6,790
국 비	5,000	5,000
시군구비	20,500	5,700	6,036	5,500	6,790

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2019. 11. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 7. : 실시설계용역 준공

○ 2023. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2026. 12. : 공사 준공

사업명

하봉암교~평화로 도로 개설

담당자

도로과 박철희(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신설 하봉암교와 기존 하상도로 접속부 종단구배가 극심하여 교량기준에

맞추어 도로 선형 및 구배, 폭원 등을 조정하여 지역주민 등 도로이용객

불편 해소 및 안전한 도로교통망 구축.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.~2024.

○ 위 치 : 하봉암교~평화로

○ 규 모 : 도로개설 L=134m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,500	1,671	628
시군구비	2,500	1,671	628

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 12. 16. : 실시설계용역 착수

○ 2022.  4. 14. : 실시설계용역 준공

○ 2023.  7. 17. : 공사 착공

○ 2024.  9. : 공사 준공

사업명

소요초교 주변 도시계획도로

(중로2-44 등) 개설사업

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상대적으로 낙후된 소요초교 인근 지역의 균형적인 발전이 필요하며,

현재 추진 중인 소요초교 동측 도시계획도로(소로3-310호선 등)과 연결하여       접근성 향상 및 도시발전을 위한 생활기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.~2026.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 285-1번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=610m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,100	66	46	500	7,400
시군구비	8,100	66	46	500	7,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2023. 1. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 12. : 실시설계용역 준공

○ 2024. 6. : 실시계획인가 고시

□ 향후계획

○ 2027. 1. : 공사 준공

○ 2028. 12. : 공사 준공

사업명

캠프 북캐슬 주변 도시계획도로개설

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘주한미군 공여구역 주변지역 등 발전종합계획 변경’ 확정(2022.12.)에 따른       중로 3-58호선 주변 근린공원조성 계획 및 캠프캐슬 공여지 매입

○ 기존 협소한 도로를 확장하여 시민들의 접근성 향상 및 교통편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.~2028.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 동두천동 377-2번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=914m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,000	44	39	1,000	6,850
시군구비	8,000	44	39	1,000	6,850

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2023. 2. : 실시설계용역 착수

○ 2024. 2. : 실시설계용역 준공

○ 2025. 5. : 보상 추진

□ 향후계획

○ 2027. 1. : 공사 착공

○ 2028. 12. : 공사 준공

사업명

왕방마을 갈라교~도립병원간 도로확포장공사

담당자

도로과 강성규(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 탑동동 왕방마을회관 일원 협소한 도로에 따른 교통불편이 가중되며,

집객시설 다수에 따른 안전한 교통망 구축으로 교통사고 예방 및 방문객의       교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.~2027.

○ 위 치 : 탑동동 갈라교~도립병원 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.3㎞, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,000	70	221		6,790
시군구비	11,000	70	221		6,790

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2022. 12. : 실시설계용역 착수

○ 2024. 11. : 실시설계용역 준공

○ 2025. 5. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2027. 5. : 공사 준공

사업명

왕방터널 관리용역

담당자

도로과 이재오(☎860-2296)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로이용자의 안전과 쾌적한 도로교통 환경조성 도모

○ 관련법에 따른 터널의 지속적 점검을 통한 사고 예방, 및 대응 철저

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8.~2025. 7.

○ 위 치 : 동두천시 왕방터널

○ 규 모 : 지방도 364호선 왕방터널(2,080m) 유지관리

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,400	972	727	426
시군구비	2,400	972	727	426

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 79%)

○ 2022. 7. : 관리용역 계약

○ 2022. 8.~12. : 왕방터널 관리용역 (1차-6개월) 수행 완료

○ 2023. 1.~12. : 왕방터널 관리용역 (2차-12개월) 수행 완료

○ 2024. 1.~12. : 왕방터널 관리용역 (3차-12개월) 수행 완료

□ 향후계획

○ 2025. 1.~7. : 왕방터널 관리용역 (4차-6개월) 수행

사업명

상패동 약수암∼경찰서 앞 도시
계획도로(소로1-21호선)개설공사

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 접근성을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충을       통해 쾌적한 주거 환경을 조성하여 지역의 발전 역량 개선

○ 법면 보강 및 배수시설 확충을 통해 우기시 산지부 토사 및 우수 유출을       저감함으로써 주민 피해 및 불편 해소

○ 소방도로 확보를 통해 긴급 차량의 접근성을 개선함으로써, 각종 재해·재난       상황 발생시 주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11.∼2024. 3.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 32-85번지∼22-27번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=416m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,788	6,181	607
시군구비	6,788	6,181	607

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 11.~2020. 3. : 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2020. 4. : 실시계획인가완료 및 보상착수

○ 2020. 8. : 투자심사 완료(적정)

○ 2021. 8. : 보상완료

○ 2022. 3. : 공사 착공

○ 2024. 5. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 공사원가 및 감정평가결과 보상비 상승으로 인한 총사업비 변경

- 당초 : 5,530백만원(전액 시비)

- 변경 : 7,100백만원(전액 시비)

사업명

상패동 6통 도시계획도로
(소로1-19호선) 개설공사

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 접근성을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충을       통해 쾌적한 주거 환경을 조성하여 지역의 발전 역량 개선

○ 법면 보강 및 배수시설 확충을 통해 우기시 산지부 토사 및 우수 유출을       저감함으로써 주민 피해 및 불편 해소

○ 소방도로 확보를 통해 긴급 차량의 접근성을 개선함으로써, 각종 재해·재난       상황 발생시 주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11.∼2024. 7.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 14-59번지∼22-27번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=184m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,514	2,353	161	-	-
시군구비	2,514	2,353	161	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 11.~2020. 1. : 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2020. 4. : 실시계획인가완료 및 보상착수

○ 2020. 8. : 투자심사 완료(적정)

○ 2021. 8. : 보상완료

○ 2022. 3. : 공사 착공

○ 2023. 6. : 토목공사 타절준공

○ 2023. 11. : 지장물 수용재결 및 공탁

○ 2024. 3. : 잔여공사 착공

○ 2024. 7. : 잔여공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 공사원가 및 감정평가결과 보상비 상승으로 인한 총사업비 변경

- 당초 : 2,400백만원(전액시비)

- 변경 : 2,550백만원(전액시비)

사업명

소요초교앞~동안교 도시계획도로(소로3-304호선) 개설공사

담당자

도시재생과 엄상규(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 2.∼2025. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 209-36번지~안흥동 12번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=993m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,270백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,270	2,104	1,396	770
시군구비	4,270	2,104	1,396	770

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2021. 2. : 실시설계용역 착수

○ 2021. 12. : 실시설계용역 및 재해영향평가 완료

○ 2023. 12. : 공사 착공

○ 2024. 12. : 공사 추진 중

□ 향후계획

○ 2025.  12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 2024년 9월 총사업비 변경

- 당초 : 3,500백만원(전액시비)

- 변경 : 4,270백만원(전액시비)

사업명

상패동 동성교회 인근 도시계획도로(소로2-327호선) 개설공사

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편 해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10.~2026. 6.

○ 위 치 : 상패동 동성교회 동측 ~ 골프장 북측 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=394, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	1,618	852	530	1,000
시군구비	4,000	1,618	852	530	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2022. 10. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 4. : 실시설계용역 완료

○ 2023. 6. : 실시계획인가 고시

○ 2024. 4.∼2024. 11. : 보상 착수 및 완료

○ 2024. 11. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2026. 6. : 공사 준공

사업명

소요산역 북서측 도시계획도로(소로
2-312호선 외 3개소) 개설공사

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3.~2027. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 54-2번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1,249, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,601백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,601	3,586	17	1,000	3,998
시군구비	8,601	3,586	17	1,000	3,998

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021. 3. : 실시설계용역 착수

○ 2022. 10. : 소규모 재해영향평가용역 완료 및 교통시설 안전진단 용역 착수

○ 2024. 7. : 실시설계용역 완료

○ 2024. 8. : 보상절차 이행 및 착수

□ 향후계획

○ 2025. 12. : 보상 완료

○ 2026. 1.∼2027. 12. : 공사 발주 및 준공

사업명

종이골 느티나무~제생병원 도시계획도로(소로3-371호선) 개설공사

담당자

도시재생과 엄상규(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 3.∼2027. 12.

○ 위 치 : 지행동 239-3번지 ~ 생연동 산90-1번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=980m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,650	445	605	800	1,800
시군구비	3,650	445	605	800	1,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2023. 6. : 실시설계용역 완료

○ 2024. 3. : 보상절차 이행 및 착수

□ 향후계획

○ 2025. 8. : 보상 완료

○ 2025. 11.~2027. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명

조산마을회관 인근 도시계획도로(소로1-100호선) 개설공사

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10.~2027. 12.

○ 위 치 : 탑동동 금말교~조산마을회관 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=419, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,500	370	250	500	2,380
시군구비	3,500	370	250	500	2,380

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2022. 11. : 실시설계용역 착수

○ 2024. 9. : 실시계획인가 준비

□ 향후계획

○ 2025. 1. : 소하천 예정지선 변경

○ 2025. 5. : 설계안전성검토, 공사보건대장, 공사기간 적정성 용역 착수

○ 2025. 6. : 실시계획인가 완료 및 부지 영향진단 조사 용역 착수

○ 2025. 7.∼2026. 2. : 보상 추진 및 완료

○ 2026. 3.∼2027. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명

소요초교 동측 도시계획도로

(소로3-370호선외 1개소) 개설공사

담당자

도시재생과 엄상규(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10.∼2027. 12.

○ 위 치 : 소요초교 동측 ∼ 신천 제방도로 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=420m, B=6∼15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	106	64	600	2,230
시군구비	3,000	106	64	600	2,230

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2022. 10. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 12. : 도시관리계획 변경 결정고시

○ 2024. 7. : 실시계획인가 완료

□ 향후계획

○ 2025. 4.~ 2026. 5. : 보상 착수 및 완료

○ 2026. 6.∼2027. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명

소요산역 건너편 도시계획도로

(소로3-380호선외1개소)개설공사

담당자

도시재생과 김숙철(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통해 차량 통행 불편해소와 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5.∼2027. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 127-8∼82-38번지

○ 규 모 : 도로개설 L=366m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2025년 이후
계	2,500	1,350	816	334
시군구비	2,500	1,350	816	334

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2023.  3. : 중기지방재정계획 및 투자심사

○ 2023.  5. : 실시설계용역 착수

○ 2024. 11. : 지장물 석면조사 용역 착수 및 완료

□ 향후계획

○ 2025. 2. : 실시계획인가 완료

○ 2025. 3. : 보상 절차 진행 및 공고

○ 2025. 7. : 실시설계용역 완료

○ 2026. 2. : 보상 완료

○ 2026. 3.∼2027. 12 : 공사 착공 및 준공

사업명

불현지구 남측 지중화

담당자

도시재생과 엄상규(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 불현지구 내 쾌적하고 합리적인 주거환경 창출 및 효율적인 토지이용 제고와 주거생활에 필요한 편익시설 제공 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1.∼2028. 12.

○ 위 치 : 평화로 226번길 41~이담로 67 일원

○ 규 모 : 전선 지중화 L=500m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,400	2,104	12	6	278
시군구비	2,400	2,104	12	6	278

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2024. 6. : 지중화 사업 협약 체결(동두천시-한국전력공사)

○ 2024. 10. : 실시설계 착수(한국전력공사)

□ 향후계획

○ 2025. 6. : 실시설계 완료(한국전력공사)

○ 2026. 8. : 통신시설 설계 및 이설 협의(KT외 5개 통신사 등)

○ 2026. 3.~2028. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명

경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성

담당자

공공사업과 강정훈(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.~ 2027.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 161번지 일원

○ 규 모 : 19,500㎡ (전망대 및 편의시설, 기반시설(도로) 등)

잔디광장 조성 A=9,127㎡, 도시계획도로 L=335m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	17,000	7,236	3,843	4,121	1,800
국 비	5,500	4,044	1,456	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,500	3,192	2,387	4,121	1,800

□ 추진상황(추가 사업 보상중, 공정률 : 70%)

○ 2018.  9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021.  1. : 보상 착수

○ 2022.  7. : 공사 착수

○ 2022. 12. : 보상 완료

○ 2024. 6. : 준공 (주차장, 정망대 및 편의시설)

○ 2025. 1. : 실시계획인가 고시

○ 2025. 5. : 보상실시 (광장 및 도로)

□ 향후계획

○ 2026.  3. : 추가 공사 착공

○ 2026. 12. : 추가 공사 준공

사업명

캠프 소요 in 경기

담당자

공공사업과 강정훈(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2024.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 164-3번지 일원

○ 규 모 : 공원, 숲놀이터 등 기반 및 편의시설 조성(44,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	2,740	1,260	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,000	1,800	641	-	-
시군구비	2,000	940	619	-	-

□ 추진상황(완료)

○ 2018. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 1. : 보상 착수

○ 2022. 7. : 공사 착수

○ 2022. 12. : 보상 완료

○ 2024. 6. : 준공

사업명

산림치유원 자연누림(산림레포츠시설) 조성

담당자

공공사업과 최민석(☎860-2583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림레포츠 시설과 산림자원을 활용한 체험시설 등의 산림과 어우러진 관광단지를 조성하여 외부 관광객 유치 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2024.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 탑동동 산16번지 일원

○ 규 모 : 트리탑데크로드(L=410m), 담금센터(지하1층/지상2층 연면적1,700㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,493백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	15,427	12,423	3,004
국 비	11,440	9,733	1,707
시 도 비	1,994	1,751	243
시군구비	1,993	939	1,054

□ 추진상황(완료)

○ 2020. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2022. 8. : 공사 착수

○ 2023. 11. : 트리탑데크로드 공사 준공

○ 2024. 4. : 담금센터 공사 준공

사업명

행복드림센터(시민수영장) 건립

담당자

공공사업과 최민석(☎860-2583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 중앙도심광장에 수영장, 키즈헬스케어센터 등이 포함된 복합건축물을 건립하여 시민들의 복지 향상과 유동인구 증가에 따른 원도심활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2024.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 594-1번지 일원

○ 규 모 : 건축연면적 15,755㎡(지하2층/지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,553백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	31,565	19,107	12,446	12
국 비	3,000	3,000
시 도 비	15,400	10,108	5,292
시군구비	13,165	5,999	7,154	12

□ 추진상황(완료)

○ 2018. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2022. 7. : 공사 착수

○ 2024. 8. : 공사 준공

사업명

복합문화커뮤니티센터 건립

담당자

공공사업과 임형묵(☎860-2597)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청년창업지원, 생활문화, 동아리, 청소년 상담, 청소년 교육활동, 도서관 및 지역영상미디어센터 등 복합적으로 구성된 문화시설을 건설하여 시민 모두가 함께 어우러져 이용할 수 있도록 복합문화커뮤니티센터 건립을 통해 원도심 주민의 문화복지 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2024.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 557-3번지 외 8필지

○ 규 모 : 건축연면적 9,420㎡(지하 1층/지상 7층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	30,000	18,765	11,235
시 도 비	18,500	10,214	8,286
시군구비	11,500	8,551	2,949

□ 추진상황(완료)

○ 2021. 10. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2022. 1. : 토지 소유권 이전 완료 및 공사 착수

○ 2024. 6. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초 부지면적 2,978㎡, 연면적 6,218㎡, 지하2층/지상4층,

변경 부지면적 3,035㎡, 연면적 9,420㎡, 지하1층/지상7층

사업명

생연동 소규모 주택정비 관리지역 기반시설 조성사업

담당자

공공사업과 강정훈(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소규모 주택정비 관리지역내에 공공시설(공원 및 지하주차장)을 개설하여 쾌적한 주거환경을 조성하고자함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ∼ 2027.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 487-40번지 일원

○ 규 모 : 지상공원(4,861㎡), 지하주차장(약 200면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	25,000	4,557	4,522	4,950	10,971
국 비	15,000	3,557	2,790	1,875	6,778
시 도 비	4,000	1,000	866	625	1,509
시군구비	6,000		866	2,450	2,684

□ 추진상황(기본 및 실시설계 용역 착수)

○ 2021. 4. : 소규모주택정비 선도사업 선정

○ 2021. 12. : 소규모주택정비 관리계획 고시

○ 2022. 8. : 중앙지방재정 반영 완료 및 중앙투자심사 조건부 승인

○ 2023. 6. : 관리계획 변경 및 실시설계용역 착수

○ 2023. 12. : 손실보상 한국부동산원 위탁계약

○ 2024. 8. : 사업시행계획인가 고시

□ 향후계획

○ 2026. 6. : 공사 착수

○ 2027. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2026. 12.까지 / 변경 2027. 12.까지

○ 사업규모 : 당초 A=4,861㎡, 변경 A=8,931㎡

○ 사업내용 : 당초 공원 조성 4,861㎡, 지하주차장 약 200면

변경 공원 조성 8,931㎡, 지하주차장 약 140면

사업명

동두천 소리이음마당 조성

담당자

공공사업과 임형묵(☎860-2597)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가안보를 위한 희생과 각종 중첩된 규제로 다양한 분야의 발전이 어려운 동두천시에 문화적 인프라 구축으로 전통 문화계승 및 활성화를 통해 지역균형과 주민복리 향상

○ 원도심에 문화자산을 활용한 공연, 강좌, 프로그램 등을 활성화하여 사업대상지 인근에 추진 중인 5060청춘로드, 도시재생 활성화 사업 등과의 시너지효과로 원도심 경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1.~2027. 6.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 824-8번지 외 11필지 일원

○ 규 모 : 총 부지면적 1,520㎡, 건축 연면적 2,995㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	18,000	16	111	453	17,420
국 비	10,000	16	19	451	9,514
시군구비	8,000		92	2	7,906

□ 추진상황(실시설계용역중, 공정률 : 50%)

○ 2022. 8. 특수상황지역개발 신규사업 선정

○ 2023.  6. 지방재정 투자심사

○ 2024. 10. 건축기획용역 완료

○ 2024. 12. 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2025. 3. 보상협의 완료

□ 향후계획

○ 2026. 3.~2027. 6. : 공사 착공 및 준공

사업명

동두천시 노인회관 및 장애인회관 건립

담당자

공공사업과 김종헌(☎860-2589)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천 노인 인구는 21.5%로, 경기도 평균 14.1%에 비해 노인 인구 비율이  높은 상황으로, 초고령사회 진입에 따른 노인복지 수요가 크게 증가하고 있으나, 노인여가복지시설은 크게 부족하여, 노인들의 여가 프로그램을 위한 공간의 조성이 필요함

○ 동두천 장애인 인구는 7%로 장애인복지 수요가 증대되고 있으나 장애인복지관 및 장애인단체 사무실은 건축된 지 20년 이상 되어 활동 공간이 협소하고 환경이 열악하여, 장애인들이 활동할 수 있는 새로운 복지․문화 공간이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.~2025.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 511-1번지 일원

○ 규 모 : 건물 2개 동 지상 1~3층 노유자시설(2,766㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,029백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
시군구비	20,029	4,352	2,257	13,420

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2022. 7. : 노인회관 및 장애인회관 건립계획 수립

○ 2022. 8. : 지방재정 투자심사

○ 2023. 1. : 부지매입 및 소유권 이전 완료

○ 2023. 6. : 건축기획 용역 및 공공건축사업계획서 사전검토 완료

○ 2023. 7. : 공공건축심의 완료

○ 2023. 10. : 설계공모작 평가심사위원회 개최

○ 2023. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2024. 5. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2024. 8. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2024. 10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(사업비 변경)

○ 당초 사업비 : 16,616백만 원, 변경 사업비 : 20,029백만 원

○ 변경 내용

가. [건축공사] 현장 부지 내 매립 폐기물 발생에 처리비용 증가

나. [건축공사] 가설펜스 보강, 지반조사 추가 시행, 추가 부지 확보, 사업부지 내 콘크리트 구조물 철거에 따른 공사량 증가

다. [건축공사] 각종 공종 설계 산출내역 정정, 현장여건 및 건축관ㄹ 기준 개정에 따른 공사내용 변경, 입주기관 건의사항 반영에 따른 추가공사 발생

라. [전기공사] 수전방식 변경에 따른 인입 설비 증설, 실별 계량기함 설치, 각종 설비 전원 신설 및 추가, 모니터링, 자동문 등 설비 연동, 조도개선을 위한 조명기구 추가 등

마. [통신공사] 각종 공종 설계 산출내역 정정, 입주기관 건의사항 반영에 따른 추가공사 발생

바. [소방공사] 현장여건 반영에 따른 소화배관, 스프링클러, 자동화재탐지설비공사 추가

사업명

복합문화커뮤니티센터 내

(가칭)청소년특화도서관조성

담당자

도서문화사업소 손재식(☎860-2143)

□ 사업목적 및 필요성

◯ 사회문화적 수요변화에 따른 공공도서관의 다양하고 차별적인 서비스 필요

◯ 창작욕구가 큰 아동 및 청소년을 위한 메이커스페이스 공간 등 콘텐츠 제공

◯ 4차 산업혁명시대의 첨단 기술을 접목한 인공지능 ICT 시스템을 도입함으로써       시민들에게 편리한 도서관 이용 환경을 제공하여 독서환경 조성

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 복합문화커뮤니티센터 내 청소년특화도서관조성

◯ 사업기간 : 2023. 9.∽2024. 11.

◯ 위    치 : 복합문화커뮤니티센터 내 4~6층

◯ 사업규모 : 연면적 2,596㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,922백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,922		3,922
기 금	1,675		1,675
지 방 비	2,247		2,247

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024. 1. : 인테리어 설계 방안 검토

○ 2024. 6. : 기본 및 실시설계용역

○ 2024. 11. : 인테리어 공사 준공

사업명

공공건축물(시립도서관) 그린리모델링사업

담당자

도서문화사업소 김혜성(☎860-3274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시립도서관은 1996년 개관 이후 페인트 변색 및 부식, 누수 등 노후화가 심각하여 건물 외벽 개선(방수, 방열, 외장재 시공) 필요

○ 도서관 외벽판넬은 2016년 앞면만 실시하였으나 2023년 7월 반다비체육센터 개관으로 도서관 건물 뒷면, 옆면 외관 보강하여  시설 안정성 확보 및 이미지 개선

○ 조경공간을 개선하여 탄소절감 및 환경보존 등 자연친화적 공간 제공

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2024. 6.∼2025. 3.(6개월)

❍ 대    상 : 시립도서관 1~3층 내외부 시설(연면적 2,670.5㎡)

❍ 사업내용 : 자료실 석면 해체 및 천장 보강, 외벽판넬 설치, 냉난방기 교체,

환기장치 설치, 태양광 설치, 조경공사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,304백만원(국비 1,613 도비 207 시비 484)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,304		2,266	38
국 비	1,613		1,586	27
시 도 비	207		204	3
시군구비	484		476	8

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024. 5. : 그린리모델링공사 실시설계 완료

○ 2024. 6. : 그린리모델링 공사 착공

○ 2025. 3. : 그린리모델링 공사 준공

사업명

소요초 체육관 및 주차장 증축

담당자

미래교육진흥원 김미연(☎860-3459)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요초등학교 실내체육관 증축을 통해 미세먼지와 오존으로부터 안전한 환경에서 체육교육을 받을 수 있도록 조성

○ 주차장이 있는 차량 진입로와 학생 등하교 동선이 겹쳐 안전 문제 발생이 우려되어 다른 위치에 주차장 증축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5.∼2025. 8.

○ 위 치 : 동두천시 봉동로 64 (소요초등학교 내)

○ 규 모 : 체육관 A=800㎡ 및 주차장 A=1,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	2,800	1,200
시군구비	600	200	400
기 타	3,600	2,600	800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2023. 4.∼8. : 공유재산 심의 및 공공건축 심의 등(교육지원청 실시)

○ 2023. 9.∼2024. 3. : 설계용역 실시 및 완료

○ 2024. 4.∼현재 : 입찰공고 및 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 2025. 8. : 준공 예정

사업명

노후 정수장 정비

담당자

환경사업소 양화석(☎860-3188)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 동두천정수장의 공정개선(시설개량)을 통하여 소형생물(유충) 대응강화 및 정수시설 운영 안정화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.~ 2025.(4년간)

○ 위 치 : 동두천정수장(동두천시 평화로3208번길 1)

○ 규 모 : 노후정수장 정수공정 개선(Q=40,000㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,879백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,879	3,662	2,042	1,175
국 비	3,439.5	1,831	1,021	587.5
시군구비	3,439.5	1,831	1,021	587.5

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 82%)

○ 2022. 3. : 지방상수도 현대화사업 공모 선정(국고 보조)

○ 2023. 4. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2023. 8. : 환경부 사전기술 검토(총사업비 : 증 1,175백만원)

○ 2024. 1. : 공사착공

○ 2025. 6. : 차염 주입설비 설치 완료

□ 향후계획

○ 2025. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경(증) : 당초 5,704백만원 / 변경 6,879백만원

※ 환경부 사전기술 검토 반영[환경부 물이용기획과-5094(2023. 8. 22.호)]

○ 사업기간 변경 : 당초 2024. 12.까지 / 변경 2025. 12.까지

※ 총사업비 변경(국고 증)에 따른 사업기간 변경 [환경부 물이용기획과-6811(2023. 11. 8.)호]

사업명

하수 색도 개선

담당자

환경사업소 남상준(☎860-3214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 색도 저감 시설 설치 및 운영을 통해 신천 방류수 색도를 개선하여 쾌적한
도심 환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9.~2026. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 봉동로 27(동두천시 환경사업소 일원)

○ 규 모 : 색도 저감 시설 설치 18,000톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	124			3,876
국 비	2,000	120			1,880
시 도 비	1,000	2			998
시군구비	1,000	2			998

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계 용역 공정률 31%)

○ 2022. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2024. 10. : 공법 선정 지연에 따른 기본 및 실시설계 용역 중지

※ 시설 준공 후 고가의 유지관리비 발생 예상으로 운영비 절감 방안 모색

□ 향후계획

○ 색도 저감 시설 운영비를 절감할 수 있는 대체 공법 지속적 발굴

○ 방류수 색도 목표 기준치 50도 이하 유지(법정 허용기준 200도 이하, 목표 50도 이하)

※ 2024년 기준 방류수 평균 색도 46도(최소 34도)로 색도 목표 기준치 50도 이하 달성